사남 고압 송전선로 지중화 사업

관리번호		6-28		주관부서		지역경제과(에너지팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○					○		20

◦ 사남면 월성리~화전리 간 고압송전선로가 인근 아파트 및 마을을 통과하여

인체 유해성 제기, 도시 미관 저해, 지역개발 저해 등 인근 주민들에게 피해를

주고 있어 고압 송전선로 지중화로 민원 해소

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 사남면 월성리 ~ 화전리 일원

◦ 사업기간: 2019. 1.~2022. 12.

◦ 사 업 량: 지중화(L=2.9km, 15,000볼트 4회선 철탑12기)

◦ 사업내용: 철탑 12기 고압 전선 지중화

◦ 사 업 비(투자계획): 44,700백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	44,700						6,000	38,700
시 비	22,400						3,000	19,400
민자(한전)	22,300						3,000	19,300

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	30%	40%	80%	100%
고압전선 지중화 사업	타당성 검토 및 기본계획 수립	타당성 검토 및 기본계획 수립	국도비 확보방안 마련 및 한전 협의	국도비 및 시비 확보	사업추진 여부결정	실시설계 및 공사착공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2018.  6.~9.: 사남 송전선로 전선 지중화 사업 타당성 및 기본계획 용역

◦ 2019.  1.~3.: 고압선로 지중화 사업 업무 협의

◦ 2019.  6. 26.: 지중화사업 업무협의(한국전력공사 사천지사)

◦ 2019.  8. 21.: 지중화사업 업무협의(한국전력공사 경남지역본부)

◦ 2019. 10. 22.: 지중화사업 업무협의(한국전력공사 송배전운영처)

◦  2020.  8. 12.: 지중화사업 업무협의(한국전력공사 송배전운영처)

◦  2021.  4. 20.: 사남 송전선로 지중화사업 예산지원 건의(에너지산업과)

□ 향후 추진계획

◦ 2022. 1.~12. : 지중화 사업 예산 확보 방안 검토

□ 문제점 및 대책

◦ 우리시 어려운 재정여건으로 지중화 사업 시비 분담금(22,400백만원) 확보 애로→ 국 ‧ 도비 확보 방안 마련 및 지속적 건의