권역별 노인복지회관 건립

관리번호		1-4		주관부서		노인장애인과(복지시설팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				○			35

◦ 날로 다양해져 가는 어르신들의 복지서비스 욕구에 부응하고 고령사회에

접어든 어르신들의 건강관리 및 여가선용을 위한 양질의 복지서비스 제공

□ 사업개요

◦ 위    치: 3개 권역(서부권, 동부권, 남부권)

◦ 사업기간: 2019년~2026년

◦ 사업내용: 권역별(서부, 동부, 남부) 노인복지회관 건립

◦ 사 업 비(투자계획): 25,400백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	25,400			200	1,500	4,100	500	19,100
국 비
도 비
시 비	25,400			200	1,500	4,100	500	19,100

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021~22.6월	2022.6월 이후
추진율(누계)	5%	5%	10%	20%	60%
권역별 노인복지회관 건립	건립 기본 방침	서부노인복지회관 행정절차진행	서부노인복지회관 실시설계용역, 공사착공	서부노인복지회관 공사 준공	동부노인복지회관 실시설계 용역 착공 동부·남부노인복지회관공사 추진

□ 추진실적

◦ 2018.  9.: 건립 기본 방침 결정

◦ 2019.  3.: 권역별 노인복지관 건립 타당성 조사용역

◦ 2020.  3. ~ 8.: 서부노인복지관 실시설계 용역

◦ 2020. 12.: 서부노인복지회관 공사 착공(총괄분, 1차분)

◦ 2021.  5.: 동부노인복지회관 건립사업 사전검토 및 공공건축가 선정

◦ 2021.  6. ~ 9.: 서부노인복지회관 공사 착공(2차분, 3차분)

◦ 2022.  1.: 서부노인복지회관 공사 준공

□ 향후 추진계획

◦ 2022.  9. ~ 2023. 3.: 동부노인복지회관 기본 및 실시설계 용역

◦ 2023. 이후. : 동부 및 남부 노인복지회관 공사 추진

◦ 2026.  5.: 권역별 노인복지회관 설치 완료

□ 문제점 및 대책

◦ 많은 사업비 소요로 시 재정 여건상 사업기간 장기화 우려