사남 우천숲~용소 간 산책로 설치

관리번호		5-12		주관부서		건설과(농업기반팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			85

◦ 지역 주민 및 자연발생 유원지 방문객의 편익 증진

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 사남면 우천리 1502번지 일원

◦ 사업기간: 2019년~2021년(3년 간)

◦ 사 업 량

- 산책로 정비 L=1,094.5m, 쉼터 2개소, 횡단교 1개소

◦ 사업내용 : 산책로 및 교량 ‧ 쉼터 설치

◦ 사 업 비(투자계획): 500백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	500	-	-	50	300	63	87
도 비	0	-	-
시 비	500	-	-	50	300	63	87

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)		25%	70%	100%	100%
우천숲~용소간 산책로 설치	계획 수립 예산 확보	용역 시행	공사 시행	공사 시행	준공, 정상 운영

□ 추진실적

◦ 2019.  2.~ 2019. 4.: 실시설계용역 완료

◦ 2020.  1.: 손실보상 협의

◦ 2020.  4.: 공사 착공(총괄분, 2020년분)

◦ 2020. 12.: 2020년분 준공

◦ 2021.  1.: 2021년분 착공

◦ 2021.  5.: 2021년분 준공 ※ 공정율 총괄분 85%

※ 보상 현황

구 분	추진 현황			비고
	합 계	지 급	미 지 급
보상필지	23필지	23필지	0필지	보상 완료 (1,184㎡)

□ 향후 추진계획

◦ 2022. 6.: 2022년분 총괄분 준공

□ 기대효과

◦ 편익시설 증진으로 지역주민 삶의 질 향상

◦ 방문객들의 만족도 증진에 따른 관광 활성화로 주민소득증대에 기여