신수도 생태관광 자원화

관리번호		5-16		주관부서		도시재생과(균형발전팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			63

◦ 낙후된 도서지역 주민의 소득증대 및 삶의 질 향상

◦ 한려해상의 수려한 관광자원을 활용한 섬 관광 활성화

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 신수동 일원

◦ 사업기간: 2019년~2024년

◦ 사 업 량: 관광지 조성 1식, 부잔교 L=280m, 탐방로 L=27km

◦ 사업내용: 신수도 생태관광지 조성

◦ 사 업 비(투자계획): 5,062백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기 투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	5,062			60	1,330	1,026	816.4	1,829.6
국 비	4,050			48	1,064	821	653	1,464
도 비	506			6	133	102.5	81.7	182.8
시 비	506			6	133	102.5	81.7	182.8
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)		10%	40%	60%	80%
신수도 부잔교 설치		실시설계	공사 착공, 공사 준공
신수도 관광지 조성			캠핑장 주변 조성공사 준공	물놀이장 조성공사 준공	’22년분 공사 시행	공사준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2016. 10. 21.: 제4차 도서종합개발계획(2018.~2027.) 사업계획 제출

◦ 2018.  3. 30.: 제4차 도서종합개발계획(2018.~2027.) 확정

〈신수도 부잔교 설치〉

◦ 2019.  1.: 실시설계용역 발주

◦ 2019.  3.: 실시설계 완료

◦ 2019.  4.: 행위허가신청(한려해상국립공원관리공단)

◦ 2019.  4.: 공유수면 점용·사용 승인

◦ 2019. 10.: 공유수면 점용·사용 실시계획 신고

◦ 2020.  3.: 공사 착공

◦ 2020.  6.: 공사 준공

〈신수도 관광지 조성〉

◦ 2020.  3.: 실시설계용역 착수

◦ 2020.  4.: 실시설계 완료

◦ 2020.  6.: 농지전용협의, 공사 발주

◦ 2020.  9.~11.: 신수도 물놀이장 조성 실시설계용역 완료

◦ 2020. 12.: 신수도 관광지 조성공사(캠핑장 인근 조성) 준공

◦ 2021. 10.: 신수도 유어장 설치사업 사업계획 변경 승인(행정안전부)

◦ 2021.  3.~11.: 신수도 물놀이장 조성사업 착공 및 준공

◦ 2021. 12.~ 2022. 3.: 신수도 야영장 부대시설 증축공사 설계용역 완료

◦ 2021. 12.~ 2022. 01.: 신수도 야영장 CCTV 및 방송설비 설치

□ 향후 추진계획

◦ 신수도 관광지 조성

- 2022. 03.~ 2022. 06.: 신수도 야영장 부대시설(매점 등) 증축공사 추진