실안휴양림 종합개발(숙박시설)

관리번호		5-7		주관부서		녹지공원과(산림휴양팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○		◯					100

◦ 편백림을 시민에게 정서함양과 보건휴양의 장소로 제공

◦ 사천바다 케이블카와 연계한 체류형 관광인프라 구축 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 실안동 산170-2번지 외 25필지 일원(39.4ha)

◦ 사업기간: 2018. ~ 2021년

◦ 사업내용

- 숙박시설: 산림휴양관 3동 6실, 숲속의 집 16동 16실

- 편익시설: 방문자센터 1동, 야영센터 1동, 관리실 1동, 야영데크 15개소,

야외공연장 1식, 진입로 1식, 주차장 1식 등

- 위생시설: 상수ㆍ오수시설 1식

- 체험시설: 산책로 3km, 숲속놀이터 1식, 숲속교실 1식, 다목적 구장 1개소,

계류탁족장 1개소 등

- 기타: 전기ㆍ통신ㆍ신재생에너지 시설 등

◦ 소요사업비: 7,280백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6	임기후
계	7,280		200	5,300	1,000	780
국 비	2,500		100	1,900	500
도 비	750		30	570	150
시 비	4,030		70	2,830	350	780
민자 등

※ 사천 케이블카 자연휴양림 조성사업으로 추진

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	5%	20%	90%	100%	100%	100%
케이블카 자연휴양림 조성	실시설계, 조성계획 승인 및 사업발주	공사추진	공사추진	준공 및 운영, 보완사업 추진	운영 및 보완사업 추진	운영 및 보완사업 추진

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2017. 1. 15.: 휴양림 예정지 내 사유지 매입(24필지 177,047㎡) 완료

◦ 2017. 5. 17.: 휴양림 지정 고시(산림청 고시 제2017-48호)

◦ 2017. 7. 31.: 균특사업 반영(2018.~2020.)

◦ 2018. 4. 11.: 휴양림 조성사업 실시설계 완료

◦ 2018. 6. 29.: 휴양림 조성계획 승인(도지사)

◦ 2018. 6. 29.: 국·공유림 교환 신청

◦ 2018. 12. 5.: 전기, 정보·통신부분사업 총괄 발주

◦ 2018. 12. 12.: 토목·건축부분 총괄사업 및 1차분 발주

◦ 2019. 1. 8~9.: 건축 및 전기, 정보·통신감리 용역 발주

◦ 2019. 2. 14.: 토목·건축부분 2차분 사업 발주

◦ 2019. 6. 17.: 토목·건축부분 1차분 사업 준공

◦ 2020. 3. 31.: 토목·건축부분 3차분 사업 발주

◦ 2020. 5. 25.: 국·공유림 교환계약 체결

◦ 2020. 6. 19.: 2차분 사업기간 연장(3차분과 동기화)

◦ 2020. 7월: 국유림 교환 잔액정산, 소유권 및 재산대장 정리

◦ 2021. 5월: 휴양림 조성사업 준공(총괄)

◦ 2021. 6월: 준공검사(총괄)

◦ 2021. 8. 27.: 휴양림 개장

□ 향후 추진계획

◦ 2021. 10월 ~: 휴양림 운영 및 시설 보완