발전소 우회도로 조기 개설

관리번호		6-1		주관부서		기획예산담당관(기획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			80

◦ 화력발전소 추가 건설에 따른 물동량 증가로 배후도로 개설 필요

◦ 시민안전 위해요소 제거 및 시가지 교통난 해소

□ 사업개요

◦ 위    치: 사천시 좌룡동 ~ 향촌동 일원

◦ 사업기간: 2019. 1. ~ 2024. 12.(6년간)

◦ 사 업 량: 우회도로 개설 L=4.3㎞, B=18m

◦ 사 업 비(투자계획): 53,000백만원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	53,000				1,200		11,500	40,300
시 비	28,400				1,200		6,500	20,700
민자 등	24,600						5,000	19,600

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)		20%	40%	60%	80%	100%
우회도로 개설		실시설계	실시설계	토지보상	공사시행	완공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2015.  7.~2019. 2. 14.: 발전소 우회도로 개설 협상 T/F팀 협의 12회

◦ 2019.  3.~12.: 사천시장, GGP사장 대표자 협상 5회

◦ 2019.  6.: 발전소 우회도로 실시설계 용역 착수(도시과)

◦ 2019. 12.  4.: 발전소 우회도로 개설 협약 체결

◦ 2020.  1.~: 발전소 우회도로 개설 실무협의회 개최(5회)

◦ 2020.  6. 25.: 도시계획시설(도로:남부 대로1-2호선)사업 실시계획 인가(도시과)

◦ 2020.  8. 10.: 공공토지비축 업무 협약 체결(사천시, LH)

◦ 2020. 12. 11.: 발전소 우회도로 실시설계용역 준공(도시과)

◦ 2021.  1. 21.: 발전소 우회도로 개설 실무협의회 개최(6차)

◦ 2021.  2. 19.: LH 토지 등 보상계획 열람 공고

◦ 2021.  3. 18.: 발전소 우회도로 개설 보상협의회 개최(1차)

◦ 2021.  5.: 감정평가 시행(나라감정, 우리감정, 중앙감정)

◦ 2021.  6.~8.: 토지보상 착수 및 손실보상 협의(LH, 75%완료)

◦ 2022.  1.: 수용재결 신청(LH → 중앙토지수용위원회)

□ 향후 추진계획

◦ 2022.  5.: 수용재결 완료

◦ 2022.  5.: 공사 착공 예정(GGP)