축동IC~곤양IC 동서도로 개량사업 실시

관리번호		6-20		주관부서		도로과(도로계획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			65

◦ 이용객의 편익 증대 및 안전사고 예방을 위한 도로 개량

□ 사업개요

◦ 위    치: 축동면~곤양면(지방도 1002호선)

◦ 사업기간: 2018년~2022년

◦ 사 업 량: 지방도 1002호선 굴곡도로 개량 2개소

◦ 사 업 비(사업계획): 1,700백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	1,700		400		200	400	700
국 비	650				100	200	350
도 비	1,050		400		100	200	350
시 비

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	50%		60%		100%
지방도1002호선 굴곡도로 개량	1개소 개량 (곤양 환덕리)		실시설계 (축동면 구호리)		1개소 개량

□ 추진실적

◦ 2017. 11.: 지방도 굴곡도로 사업 대상지 제출

◦ 2018. 10.: 지방도 굴곡도로 개량 건의

◦ 2018. 12.: 환덕지구 굴곡도로 개량 완료

◦ 2019.  2. 22.: 지방도 굴곡도로 개량사업 중장기 계획 수립 대상지 제출

◦ 2019. 12.: 2020년 예산 반영(용수도로 선형개량)

◦ 2020.  3.: 용수도로(지1002호) 선형개량사업 실시설계 착수

◦ 2020.  8.: 용수도로 주민설명회 개최

□ 향후 추진계획

◦ 2022. 1.~2022. 12.: 공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 대규모 사업비 소요에 따른 예산 확보 애로

→ 관계기관 지속 협의 사업조기 착수 노력