유․무형문화재 보존 및 계승사업 지원

관리번호		6-7		주관부서		문화체육과(문화재팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○			○				100

◦ 관내 유․무형문화재 53개의 보존과 계승발전을 위한 방안 마련

□ 사업개요

◦ 사업대상: 관내 문화재 53개(유형 48, 무형 5)

◦ 사업기간: 2018년~2022년

◦ 사업내용: 지정 문화재 개보수, 주변정비 사업, 무형문화재 지원 등

◦ 사 업 비(투자계획): 13,629백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	13,629		3,832	3,657	2,040	2,000	2,100
국 비	2,757		1,110	887	250	250	260
도 비	2,395		759	576	350	350	360
시 비	8,477		1,963	2,194	1440	1400	1480
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
추진율(누계)	20%	40%	60%	80%	100%
무형문화재 상설공연 외 12건 지원	보조금 등 지원	보조금 등 지원	보조금 등 지원	보조금 등 지원	보조금 등 지원
각산봉수대 주변 CCTV 및 방송시설 설치	완료
사천읍성 복원	착공	당해연도분 사업 추진	당해연도분 사업 추진	완료
다솔사 주변정비 공사	착공	당해연도분 공사추진	당해연도분 공사추진	당해연도분 공사추진	당해연도분 공사추진
지방문화재 내 소화시설 공사		완료
전통사찰 방재시스템 구축	완료
선진리성 주변 경관조명 설치	당해연도분 사업 추진	당해연도분 사업 추진	당해연도분 사업 추진
조명군총 기본정비계획 사업 추진		당해연도분 사업 추진	당해연도분 사업 추진	당해연도분 사업 추진	당해연도분 사업 추진

□ 연도별 달성목표

□  추진실적

◦ 2018년 하반기

- 무형문화재 상설 공연 외 12건 지원 완료

- 각산봉수대 주변 CCTV 및 방송시설 설치 완료(9월/ 130백만 원)

- 다솔사 주변정비 공사 완료(10월/ 135백만 원)

- 전통사찰 방재시스템 구축 사업 완료(12월/ 432백만 원)

◦ 2019년

- 사천읍성 복원 공사 1차 년도 준공(11월/ 543백만 원)

- 다솔사 종합정비계획 사업 계속 추진(9월/ 산신각 신축 준공)

- 조명군총 기본정비계획 사업 계속 추진(9월/ 진입시설 공사 준공)

- 선진리성 주변 경관조명 설치 사업 완료(8월/ 273백만 원)

◦ 2020년(4/4분기)

- 사천읍성 복원 공사에 따른 긴급발굴 조사 용역 완료

- 사천읍성 복원 공사 2차년도 공사 착공(2021년 3월/540백만 원)

- 조명군총 역사관 기단보수 공사 완료(5월/ 32백만 원)

- 다솔사 극락전 주변보수 공사 완료(6월/ 35백만 원)

- 대방진굴항 계단 보수 공사 완료(6월/ 25백만 원)

◦ 2021년

- 사천매향비 IoT 구축사업 완공(3월/45백만원)

- 사천 구계서원 진입계단 정비 공사 완공(10월/15백만원)

- 다솔사 산신각 단청공사(10월/22백만원)

◦ 2022년 1월 사천읍성 주변정비공사 완공

◦ 2022년 1월 사천 가산리 석장승 도난방지 시스템 구축 공사 완공

□ 향후 추진계획

◦ 2022년 5월 사천향교 동서무 보수정비 공사 완공

□ 문제점 및 대책

◦ 노후 문화재로서 즉시 보수대상이 많지만 국․도비 지원 부족으로 즉시 조치 한계