노인문화복지센터 건립 지속 추진

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
1-11		○			○			○	○
주관부서	노인장애인과(복지시설팀)				협조부서 (협조기관)

목    적

◦ 날로 다양해져 가는 어르신들의 복지서비스 욕구에 부응

◦ 고령사회에 접어든 어르신들의 건강관리 및 여가선용을 위한 양질의 복지서비스 제공

사업개요

◦ 사업대상: 권역별 노인문화복지센터 건립

◦ 사업기간: 2019년 ~ 2026년

◦ 사업내용: 3개 권역(서부, 동부, 남부) 노인문화복지센터 건립

◦ 소요사업비: 24,600백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	24,600	6,000	500	4,500	5,000	4,300	4,300
국 비
도 비
시 비	24,600	6,000	500	4,500	5,000	4,300	4,300
민자 등

그 간 추진사항

◦ 2018. 9.: 기본방침 결정

◦ 2019. 3.: 권역별 노인복지관 건립 타당성 조사용역

◦ 2020. 3. ~ 11.: 서부노인복지회관 건립 기본 및 실시설계용역

◦ 2020. 12. ~ 2022. 1.: 서부노인복지회관 건립공사 추진

추진계획

◦ 2022. 9. ~ 2023. 8.: 동부노인문화복지센터 건립 기본 및 실시설계용역

◦ 2023. 9. ~ 2024. 8.: 동부노인문화복지센터 건립공사 추진

◦ 2024. 9. ~ 2025. 8.: 남부노인문화복지센터 건립 기본 및 실시설계용역

◦ 2025. 9. ~ 2026. 8.: 남부노인문화복지센터 건립공사 추진

연도별 추진목표

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	40%	50%	70%	80%	90%	100%
동부 노인문화복지센터 건립	기본 및 실시 설계용역	실시설계 공사시행	완공
남부 노인문화복지센터 건립			기본 및 실시 설계용역	실시설계 공사시행	공사추진	완공

문제점 및 대책

◦ 노인문화복지센터 건립에 많은 사업비가 소요되어 사업비 확보에 어려움이 있어 사업 기간 장기화 우려

◦ 남부권 건립 장소는 대지면적이 협소하고 주차공간이 부족하여 선구동 소재 삼천포노인복지관은 매각하고, 시민들이 많이 거주하는 삼천포종합운동장 인근이나 삼천포종합운동장 내 게이트볼장에 설치를 검토

◦ 착공 시점이 2025년 9월로 물가상승분에 대한 보상비 및 공사비 증액 예상

□ 기대효과

◦ 권역별 노인복지회관 건립으로 노후 여가생활을 영위할 수 있는

복지시설 확충

◦ 복지시설의 다변화·집중화와 노인들에게 다양한 복지서비스 제공