항공국가산업단지 조기 완공

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
2-11		○	○				○		○
주관부서	산업입지과(산단지원팀)				협조부서 (협조기관)		한국토지주택공사(LH)

목    적

◦ 항공국가산업단지 조기 완공을 통한 지역경제 활성화 및 항공우주산업 전진기지 조성

사업개요

◦ 위    치: 용현면 신촌·통양·선진리 일원

◦ 사업기간: 2017년 ~ 2024년

◦ 사 업 량: A=820,040㎡

◦ 시 행 사: 한국토지주택공사(LH)

◦ 총사업비: 228,300백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	228,300	149,800	15,600	32,800	30,100
국 비	228,300	149,800	15,600	32,800	30,100
도 비
시 비

그 간 추진사항

◦2014. 12.: 경남 항공 국가산업단지 개발 확정(국토부)

◦2017.  5.: 경남 항공국가산업단지 승인 고시

◦2017. 11.: 국가산단 상호협력 약정서 체결(도-시-LH)

◦2017. 12.: 관리기본계획 고시

◦2019.  3.: 산업단지계획 변경(1차) 고시

◦2019.  9.: 착공통보서 제출 및 실착공 신고

◦2021. 10.: 산업단지계획 변경(2차) 고시

추진계획

◦ 2022. 10.: 산업단지계획 변경(3차) 고시 및 산업시설용지 분양 공고

◦ 2024. 10.: 산업단지 조성공사 준공

연도별 추진목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	60%	80%	100%
경남항공 국가산업단지	공사추진	공사추진	공사준공

문제점 및 대책

◦ 항공국가산업단지 조성으로 인하여 주변 피해지역의 지원사업 및 침수대책 등 요구(배수로 개선, 마을안길 확장 및 개설, 침수지역 성토 등)

⇒ 배수로 개선 및 마을안길 확장은 실시설계 완료하였으며, 2023년 당초예산 확보 후 사업추진 예정.

⇒ 침수지역 성토는 토지소유자 동의 시 사업시행자인 LH에 성토 요구 후 2022년 말 성토 예정.

◦ 산업단지 준공 후 3년 이내 산업시설 미분양 시 미분양 용지 매입에 따른 시비 부담 가중

⇒ 미분양 용지 다수 발생 우려 시 입주 업종 변경을 통한 업체 유치 및 우리시(우주항공과 투자유치팀)와 LH가 협력하여 공동 TF팀을 구성하여 기업 유치

기대효과

◦ 항공우주산업 중심 강소 도시 위상 제고

◦ 항공기업 간 상생협력 및 동반성장 인프라 구축