남강댐 유수지 체육공원 조성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
3-12	○				○		○		○
주관부서	문화체육과(체육시설팀)				협조부서 (협조기관)		건설과(하천팀)

목    적

◦ 곤명면 남강댐 유수지 성토를 통한 체육공원 조성으로 사업비 절감 및 시민 체력 증진

사업개요

◦ 사업기간: 2023년 ~ 2024년

◦ 사업내용: 유수지 준설 및 체육공원 조성 1식

◦ 소요사업비: 4,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	4,000			500	3,500
국 비
도 비
시 비	4,000			500	3,500
민자 등

추진계획

◦ 2023. 1. ~  6.: 사업부지 점용허가 협의

◦ 2023. 7. ~ 12.: 실시설계 및 실시계획인가 용역

◦ 2024. 1. ~ 12.: 공사 착공 및 준공

연도별 추진목표

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		30%	100%
체육공원 조성		행정절차 및 용역시행	공사 착공 및 준공

문제점 및 대책

◦ 유수지 및 상수원보호구역 활용을 위해 관리청(환경부)의 하천점용 허가 승인 등 행정절차 이행 필요

◦ 관리청의 허가 가능 여부 사전협의

기대효과

◦ 유수지의 일원 환경정비로 깨끗한 도시 이미지 조성

◦ 체육공원 조성으로 지역민에게 여가선용 기회 제공 및 체력 증진