삼천포 무지갯빛 생태탐방로 조성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
3-16		○			○			○	○
주관부서	관광진흥과(관광개발팀)				협조부서 (협조기관)

목    적

◦ 사천바다 케이블카와 연계한 해양관광 바닷길 조성으로 해양관광거점도시 인프라 확충

사업개요

◦ 위    치: 동서동 일원(늑도~신도~마도~저도)

◦ 사업기간: 2020년 ~ 2027년

◦ 사 업 량: 생태탐방로 L=3.0km

◦ 사업내용: 늑도~신도~마도~저도를 잇는 생태탐방로 조성

◦ 총사업비: 68,300백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	68,300	300			1,000	15,000	7,500	44,500
국 비	68,000				1,000	15,000	7,500	44,500
도 비
시 비	300	300
민자 등

그 간 추진사항

◦ 2020.  7.: 한국판 뉴딜-그린뉴딜 종합계획 확정(환경부)

◦ 2020. 10.: 국립공원 생태 문화 교육 플랫폼 구축사업 기본구상 수립용역 추진

◦ 2021.  4.: 기본구상 수립용역 준공(국립공원공단)

◦ 2022.  1.: 한려해상국립공원 사천지구 해상탐방로 공원계획(변경) 용역 착수

추진계획

◦ 2023.  1.: 한려해상국립공원 공원계획(변경) 반영

◦ 2024.  1.: 기본 및 실시설계용역 착수(한려해상국립공원사무소)

◦ 2025.  1.: 공사 착공

◦ 2027. 12.: 공사 준공

연도별 추진목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	5%	10%	20%	50%	70%	100%
생태탐방로 조성	공원계획 변경 추진	공원계획 반영	기본 및 실시설계	공사착공	생태탐방로 조성	공사 준공

문제점 및 대책

◦ 사업비(국비) 확보 애로

◦ 사업추진을 위하여 한려해상국립공원 공원계획 반영 필요

기대효과

◦ 관광인프라 확충 및 관광객 증가에 따른 지역경제 활성화