실비집 문화거리 조성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
3-18	○				○		○		○
주관부서	관광진흥과(관광개발팀)				협조부서 (협조기관)

목    적

◦ 사천의 실비문화를 관광객들이 접하고 즐길 수 있도록 특화 테마거리로 조성하여 관광활성화

사업개요

◦ 위    치: 선구동 일원

◦ 사업기간: 2023년 ~ 2024년

◦ 사 업 량: 음식풍류의 거리 조성 1식

◦ 사업내용: 삼천포 퓨전실비, 박재삼 시인 단골실비집 조성, 음식점 간판 및 입구정비, 경관조명 설치

◦ 총사업비: 1,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	1,000			500	500
국 비
도 비
시 비	1,000			500	500
민자 등

그 간 추진사항

◦ 2021. 2.: 실비거리 조성 학술연구용역 완료

추진계획

◦ 2023.  1.: 기본 및 실시설계용역 추진

◦ 2023.  4.: 공사 착공

◦ 2024. 12.: 공사 준공

연도별 추진목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	5%	50%	100%
실비집 문화거리 조성사업	계획수립	기본 및 실시설계, 공사착공	공사준공

문제점 및 대책

◦ 원활한 사업추진을 위해 주민협의체 구성 필요

기대효과

◦ 관광인프라 확충 및 관광객 증가에 따른 지역경제 활성화