광포만 갯벌 해양생태관광 자원화

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
3-19		○			○			○	○
주관부서	관광진흥과(관광개발팀)				협조부서 (협조기관)

목    적

◦ 광포만 갯벌 해양생태관광 조성으로 관광자원화 및 관광 인프라 확충

사업개요

◦ 위    치: 곤양면 대진리, 서포면 조도리 일원

◦ 사업기간: 2023년 ~ 2026년

◦ 사 업 량: 탐방로 설치 L=4.8km

◦ 사업내용: 갯벌 관찰로 설치

◦ 총사업비: 30,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	30,000				1,000	15,000	7,000	7,000
국 비	30,000				1,000	15,000	7,000	7,000
도 비
시 비
민자 등

그 간 추진사항

◦ 2020. 4.: 한려해상국립공원 구역조정을 위한 타당성 용역 착수

◦ 2020. 6.: 주민설명회 개최(곤양면, 서포면)

◦ 2020. 9.: 국립공원 타당성조사 관련 총괄협의회 안건 제출

◦ 2021. 7.: 주민설명회 및 공청회 개최

◦ 2022. 3.: 국립공원 구역조정을 위한 관계부처 협의(환경부)

추진계획

◦ 2023.  1.: 한려해상국립공원 공원계획 변경 고시

◦ 2024.  1.: 기본 및 실시설계용역(한려해상국립공원사무소)

◦ 2025.  1.: 공사 착공

◦ 2026. 12.: 공사 준공

연도별 추진목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	5%	20%	30%	50%	70%	100%
탐방로 조성	계획수립	국립공원 공원계획 변경	기본 및 실시설계	공사착공	공사추진	공사 준공

문제점 및 대책

◦ 사업비(국비) 확보 애로

◦ 사업추진을 위하여 한려해상국립공원 공원계획 반영 필요

◦ 한려해상국립공원 공원계획 미반영 등 국립공원사업 추진 불가 시 해수부 공모사업으로 추진

기대효과

◦ 관광인프라 확충 및 관광객 증가에 따른 지역경제 활성화