파크골프장 조성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
3-5		○			○		○		○
주관부서	문화체육과(체육시설팀)				협조부서 (협조기관)		녹지공원과(공원팀)

목    적

◦ 시민 누구나 즐길 수 있는 파크골프장 조성

사업개요

◦ 사업기간: 2022년 ~ 2024년

◦ 사업내용: 파크골프장 조성 2개소(9홀 1, 27홀 1)

◦ 소요사업비: 8,150백만 원(도비 2,400, 시비 4,450, 기금 1,300)

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	8,150		1,050	3,200	3,900
국 비
도 비	2,400			1,200	1,200
시 비	4,450		150	1,600	2,700
기 금	1,300		900	400

그 간 추진사항

<항공우주테마공원 파크골프장>

◦ 2022. 7.: 실시설계용역 완료

◦ 2022. 9.: 도시계획시설 결정(변경) 용역 완료

<모충공원 파크골프장>

◦ 2022. 6.: 부지매입 완료(A=61,441㎡)

추진계획

<항공우주테마공원 파크골프장>

◦ 2022. 10.: 실시계획인가 고시

◦ 2022. 10. ~ 12.: 파크골프장 설치

<모충공원 파크골프장>

◦ 2022. 10.: 투자심사 및 각종 영향평가

◦ 2023.  1.: 실시설계용역

◦ 2023.  5. ~ 2024. 12.: 공사 착공 및 준공

연도별 추진목표

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	30%	60%	100%
파크골프장 조성	설계용역 공사진행	설계용역 공사착공	준공

문제점 및 대책

◦ 파크골프장 조성에 대한 부지매입비[자체재원] 예산 과다 소요

◦ 파크골프장 조성 위치를 선정하여 부지매입 후 체육진흥지원사업(균특) 국고보조금 확보 필요

□ 기대효과

◦ 파크골프 이용객들의 폭발적인 증대와 관심도가 높아짐에 따라 타 지자체에서 파크골프장을 이용하던 시민들의 불편 해소