서부권 다목적체육관 건립

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
3-6	○				○		○		○
주관부서	문화체육과(체육시설팀)				협조부서 (협조기관)		-

목    적

◦ 서부권의 열악한 체육시설 환경개선

◦ 생활체육인프라 확충으로 지역민 삶의 질 향상

사업개요

◦ 사업기간: 2023년 ~ 2026년

◦ 사업내용: 다목적체육관 건립 1식

◦ 소요사업비: 8,500백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	8,500			300	2,200	3,000	3,000
국 비	2,100				300	900	900
도 비
시 비	6,400			300	1,900	2,100	2,100
민자 등

추진계획

◦ 2023.  1. ~  2.: 사업위치 선정을 위한 주민 의견 수렴

◦ 2023.  1. ~  6.: 체육진흥지원사업 공모 신청

◦ 2024.  1. ~  6.: 실시설계 및 실시계획인가 용역

◦ 2024.  7. ~ 12.: 감정평가 및 보상협의 실시

◦ 2025.  1. ~ 2026. 6.: 공사 착공 및 준공

연도별 추진목표

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		20%	50%	80%	100%
다목적체육관 건립		위치 선정, 공모신청	설계용역 보상협의	공사착공	공사준공

문제점 및 대책

◦ 서부 3개면 지역민들의 체육관 건립에 대한 관심이 높아 부지선정 시 의견충돌 예상

◦ 주민 의견을 수렴하여 체육시설 이용의 편의성, 접근성 등을 다각적으로 검토 추진

□ 기대효과

◦ 서부권의 공공체육시설의 확충을 통해 지역 균형 및 주민 단합 도모

◦ 시민 체력증진