곤양면 궁도장(낙홍정) 이전

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
3-8	○				○		○		○
주관부서	문화체육과(체육시설팀)				협조부서 (협조기관)		-

목    적

◦ 성내공원을 이용하는 시민들의 안전사고 예방

◦ 생활체육 활성화 및 궁도 동호인 저변 확대

사업개요

◦ 위    치: 곤양면 성내리 224-7번지 일원

◦ 사업기간: 2023년 ~ 2025년

◦ 사업내용: 낙홍정 이전 건립 1식

◦ 소요사업비: 5,000백만 원(국비 900, 시비 4,100)

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	5,000				2,000	3,000
국 비	900					900
도 비
시 비	4,100				2,000	2,100
민자 등

그 간 추진사항

◦ 2018. 12.: 낙홍정 이전 검토 보고

추진계획

◦ 2023. 8. ~ 12.: 사업위치 선정을 위한 주민 의견 수렴

◦ 2024. 1. ~  4.: 도시계획 시설 결정

◦ 2024. 1. ~  6.: 편입토지 보상 협의

◦ 2024. 5.: 체육진흥지원사업 공모 신청

◦ 2024. 7. ~ 12.: 실시설계 및 실시계획인가 용역

◦ 2025. 1. ~ 2025. 12.: 공사 착공 및 준공

연도별 추진목표

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		10%	30%	100%
궁도장 이전		위치선정	보상협의 행정절차 이행	착공 및 준공

문제점 및 대책

◦ 성내공원에 위치한 궁도장 전면에 보행로가 위치하여 탐방객 및 시민들의 안전사고 위험 상존

◦ 지역주민 및 궁도협회의 의견을 수렴하여 부지선정 후 사업 추진

기대효과

◦ 현대적 시설을 갖춘 궁도장 건립으로 궁도 동호인의 이용 편의성 증진

◦ 전통스포츠인 궁도 대중화 및 행사·대회 개최 등에 따른 생활스포츠 활성화