야구장 조성사업

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
3-9	○				○		○		○
주관부서	문화체육과(체육시설팀)				협조부서 (협조기관)		-

목    적

◦ 신규 야구장 조성을 통한 생활체육 활성화

◦ 야구인프라 개선으로 전지훈련팀 유치 기대

사업개요

◦ 위    치: 서포면 다평리 일원(서포 하수처리장)

◦ 사업기간: 2023년 ~ 2026년

◦ 사업내용: 야구장 1~2면(A=49,500㎡), 본부석 1동, 주차장 등

◦ 소요사업비: 6,500백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	6,500			1,200	1,760	1,770	1,770
국 비	1,590				530	530	530
도 비
시 비	4,910			1,200	1,230	1,240	1,240
민자 등

그 간 추진사항

◦ 2022. 9. 15.: 야구장 조성 계획 보고

◦ 2022. 9.: 2023년도 당초예산 신청

추진계획

◦ 2023. 1. ~ 6.: 편입토지 보상 협의 및 도시계획 시설 결정

◦ 2023. 5.: 체육진흥지원사업 공모 신청

◦ 2023. 10. ~ 2024. 6.: 실시설계 및 실시계획인가 용역

◦ 2024. 7. ~ 2026. 6.: 공사 착공 및 준공

연도별 추진목표

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		20%	40%	100%	100%
야구장 조성		보상협의 행정절차 이행	착공	공사	준공

문제점 및 대책

◦ 사등야구장이 환경사업소 내 위치하여 악취 등 주변 환경이 열악하고, 추후 소각장 증축 시 야구장 이전 불가피

◦ 시유지인 서포면 다평리(서포 하수처리장) 일원에 야구장을 조성하면 토지보상 최소화를 통한 사업비 절감 가능

기대효과

◦ 신규 야구장을 비토섬의 관문에 조성하고 체험·숙박시설과 연계해 관광 활성화 및 전지훈련팀 유치

◦ 야구 동호인의 이용 편의 증진 및 생활체육 활성화