삼천포천(한내천) 제2의 청계천으로 조성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-12		○			○		○		○
주관부서	건설과(하천팀)				협조부서 (협조기관)

목    적

◦ 삼천포천 생태하천 복원사업 추진으로 수질개선 및 수생태계 건강성 회복 등 수생태계 복원 효과 극대화로 삼천포천의 생태적 가치를 높이고자 함.

사업개요

◦ 위    치: 사천시 와룡저수지 ~ 동서금동 일원

◦ 사업기간: 2017년 ~ 2024년

◦ 사 업 량: 생태하천복원 L=4.4km

◦ 사업내용: 생태유량확보(저수로 조성 L=3,263m), 여울 14개소,

탐방로 L=2,610m 등

◦ 총사업비: 17,106백만 원

(단위: 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	17,106	10,238	1,000	3,360	2,508
국 비
도 비	10,383	6,348	620	1,860	1,555
시 비	6,723	3,890	380	1,500	953
민자 등

그 간 추진사항

◦ 2017. 11.  3.: 기본 및 실시설계 사업착수

◦ 2020.  5.  1.: 삼천포천 하천기본계획 고시

◦ 2020. 12. 22.: 특정공법 심의

◦ 2021.  3. 28.: 설계VE 검토

◦ 2021.  4. 30.: 삼천포천 생태하천복원사업 기본계획(변경) 승인

◦ 2021. 11.  4.: 소규모 환경영향평가 협의 완료, 문화재 지표조사 완료

◦ 2021. 12. 28.: 공사기간 적정성 심의 (경상남도) 완료

◦ 2022.  1. 20.: 건설기술심의 (경상남도) 완료

◦ 2022.  2. 16.: 생태하천복원사업 기술검토 의뢰 승인 (낙동강유역환경청)

◦ 2022.  5. 31.: 생태하천복원심의 (경상남도) 완료

◦ 2022.  7.  4.: 일상감사 완료

◦ 2022.  7. 13.: 원가심사 및 계약의뢰(조달청)

◦ 2022.  9. 29.: 낙찰자 선정(조달청)

추진계획

◦ 2022.: 공사 계약 및 착공, 시행계획 고시

◦ 2023.: 공사 추진(생태하천 복원 L=3.0km)

◦ 2024.: 공사 추진(생태하천 복원 L=1.4km) 및 준공

연도별 추진목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	20%	50%	100%
삼천포천 생태하천 복원사업	공사 착공	생태하천 복원 L=3.0km	생태하천 복원 L=1.4km 공사 준공

문제점 및 대책

◦ 없음

기대효과

◦ 수생태계 건강상 확보

◦ 지역주민에게 친수공간 확보에 따른 지역 시민의 행복감 고양