시도1호선 확장공사 우선 시행

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-15		○			○		○		○
주관부서	도로과(도로계획팀)				협조부서 (협조기관)		도시과(도시개발팀)

목    적

◦ 사천읍에서 동지역을 연결하는 시도1호선 확포장을 통한 도로망 확충

◦ 고질적인 교통체증 해소를 통한 지역민 삶의 질 향상

사업개요

◦ 위    치: 사천시 사남면 / 사천시 죽림동 일원

◦ 사업기간: 2019년 ~ 2026년

◦ 사 업 량: 도로 확포장 L=1,850m, B=20.0m

◦ 사업내용: 사남구간 L=980m,B=20m, 남양구간 L=870m, B=20.0m
(2단계 L=460m, 3단계 L=410m)

◦ 총사업비: 27,800백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	27,800	8,445	2,500	4,000	5,000	5,855	2,000	0
국 비
도 비	450	450
시 비	27,350	7,995	2,500	4,000	5,000	5,855	2,000	0

그 간 추진사항

[사남구간]

◦ 2020. 8.: 실시설계용역 완료

◦ 2021. 7.: 도로구역 결정(LIG앞 삼거리~병둔사거리)

◦ 2022. 8.: 실시설계(보완) 추진(상수관 반영)

[남양구간]

◦ 2015. 12. 10.: 실시계획인가(사천시 고시 제2015-182호)

◦ 2020.  1. ~: 보상 및 공사 추진(2단계 남양동주민센터 구간, L=460m)

추진계획

◦ 시도1호선 전체 구간 중 기 추진 중에 있는 사남면 구간(LIG사거리~병둔사거리) 구간과 교통량이 집중되어 우선 추진이 필요한 남양동 구간(남양행정복지센터~죽림삼거리)을 우선적으로 추진

[사남구간] - 도로과 추진

◦ 2022.  8.: 손실보상협의(계속-22년 예산)

◦ 2023.  1.: 23년 당초예산 확보(30억원)

◦ 2023. 12.: 보상 완료

◦ 2024.  1.: 공사 총괄 발주

◦ 2027.  3.: 공사 총괄 준공

[남양구간] - 도시과 추진

◦ 2022.  7.: 손실보상협의(계속)

◦ 2023.  1.: 23년 당초예산 확보(10억원)

◦ 2023.  3.: 손실보상 완료

◦ 2023.  7.: 공사 총괄 발주

◦ 2025. 12.: 공사 총괄 준공

연도별 추진목표

세부사업명		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		20%	40%	60%	90%	100%
합 계		2,500	4,000	5,000	5,885	2,000
사남면 구간 (LIG사거리~병둔사거리)	사업비	2,000	3,000	3,000	2,000	2,000
	추진 내용	보상추진	보상완료	공사발주	공사추진	준공
남양동 구간 (남양동~ 죽림삼거리)	사업비	500	1,000	2,000	3,885
	추진 내용	보상추진	보상완료 공사발주	공사추진	준공

문제점 및 대책

◦ 열악한 지방재정 여건으로 예산확보 애로

◦ 토지소유자들의 집단적 보상가 불만(토지수용에 따른 사업장기화)

(대책)

◦ 토지소유자 집단적 보상가 불만에 대한 대책 수립 필요
(사업구역 조정 및 조기 예산확보에 따른 토지수용재결 추진)

◦ 예산의 집중 투입을 통한 사업추진

기대효과

◦ 국도3호선의 고질적인 교통체증 완화에 기여

◦ 교통환경개선으로 인한 지역민들의 삶의 질 향상

◦ 장기적으로 교통 소통 원활함으로 인한 사천시 관광산업발전에 기여