사남-정동간 국도대체우회도로 건설

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-16		○	○					○	○
주관부서	도로과(도로계획팀)				협조부서 (협조기관)

목    적

◦ 국도대체우회도로 개설을 통한 국도3호선의 고질적 교통체증 해소

◦ 한국항공우주(KAI) 등 산업단지 물류수송능력 향상에 기여

사업개요

◦ 위    치: 사천시 사남면 월성리 ~ 정동면 대곡리 일원

◦ 사업기간: 2019년 ~ 2027년

◦ 사 업 량: 도로 개설 L=3.9km, B=20m (국비100%)

◦ 사 업 비: 136,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	136,000	0	1,700	4,000	50,000	50,000	20,000	10,300
국 비	136,000	0	1,700	4,000	50000	50000	20000	10300
도 비
시 비

그 간 추진사항

◦ 2005.  6.: 제2차 국도·국지도 건설 5개년 계획 반영

◦ 2014.  4.: 실시설계 용역 착수(월성-대곡 국대도)

◦ 2016.  9.: 실시설계 용역 타절(월성-대곡 국대도)

◦ 2018. 11.: 제5차 국도·국지도 건설 5개년 계획 반영 건의

◦ 2020.  1.: 일괄 예타 대상사업 선정

◦ 2021.  8.: 일괄 예타 통과 (기획재정부)

◦ 2022.  1. ~: 실시설계 착수(부산지방국토관리청)

◦ 2022.  8.: 주민설명회 개최(정동면, 사남면)

추진계획

◦ 2022. 12.: 기본설계(노선 선정)

◦ 2023.  7.: 실시설계 완료

◦ 2023. 12.: 행정절차 추진

◦ 2024.  1.: 공사 착공

◦ 2026.  6.: 공사 준공

연도별 추진목표

세부 사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율 (누계)	20%	40%	60%	80%	100%
사남-정동간 국도대체우회도로	기본설계 (노선결정)	세부설계 공사착공	공사추진	공사추진	공사추진	준공

문제점 및 대책

◦ 예타 통과 사업비의 15%증가 시 타당성 재조사(현재 20%증가 예상)

➥제2차 국도‧국지도 건설5개년 사업(월성~대곡) 설계 중 사업 무산
(※ 요인 : 2016년경 주민들의 요구사항 반영에 따른 B/C 저하)

◦대책

- 지역민들의 적극적인 협조가 필요(읍‧면‧동 사전 설명 추진)

- 사업비 절약 방안을 위하여 부산청과 긴밀히 협조하여 사업 조기착공 추진

기대효과

◦ 국도3호선에 집중되어진 산업단지 물류수량 분산에 기여

◦ 물류수송력 향상에 따른 항공산업 발전과 균형 발전에 기여

◦ 국도3호선 교통성 향상으로 인하여 사천시 관광 발전에 기여
(사천바다케이블카, 아쿠아리움, 비토여가캠핑장 등)