회전교차로 설치(사남KCC앞 외 5개소)

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-19	○				○		○		○
주관부서	도로과(도로관리팀)				협조부서 (협조기관)

목    적

◦ 지역개발을 통한 경제발전을 위한 회전교차로 설치

사업개요

◦ 위    치: 사천시 동금동 143번지 외 1개소(동금사거리 외1)

◦ 사업기간: 2023년 ~ 2024년

◦ 사업내용: 회전교차로 설치 2개소(동림사거리, 중앙여중 앞)

◦ 총사업비: 1,030백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	1,030		420	610
국 비
도 비	280		140	140
시 비	750		280	470

그 간 추진사항

◦ 2022. 7.: 민선8기 공약사업 선정

◦ 2022. 8.: 회전교차로 기본계획 수립용역 시행

◦ 2022. 9.: 유관기관 협의(사천경찰서, 도로교통공단)

◦ 2022. 9.: 2023년 당초예산 편성 요구

향후계획

◦ 2023. 1.: 실시설계용역 시행(동금사거리, 중앙여중 앞)

◦ 2023. 3.: 유관기관 협의(사천경찰서, 도로교통공단))

◦ 2023. 6. ~ 2023.11.: 공사 착공 및 준공(동금사거리)

◦ 2024. 1. ~ 2024. 6.: 공사 착공 및 준공(중앙여중 앞)

연도별 추진목표

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
추진율(누계)	0%	50%	50%
회전교차로 설치	회전교차로 타당성 검토 및 우선순위 선정	동금사거리 공사착공 및 준공	중앙여중앞 공사착공 및 준공
		(1순위)	(2순위)

문제점 및 대책

◦ 공약사업에 포함된 회전교차로 설치대상지 6개소 중 죽림삼거리 외 1개소(3호광장)는 교통량 기준 초과 등으로 회전교차로 설치가 부적합하며, 사남KCC 앞 외 1개소(1호광장) 주변 신규아파트 건설이 완료 후 교통 여건 변화 고려하여 중장기적으로 추진 검토가 필요하며, 동금사거리 외 1개소(중앙여중 앞)는 교통 소통 증진 및 사고 감소 예상이 되므로 회전교차로 사업을 내년에 예산확보 하여 추진코자 함.

◦ 상기 추진할 회전교차로(동금사거리 외1개소)가「회전교차로 중장기 계획(22~26)」에 포함되어 있지 않아 경남도와 협의하여 사업대상지 변경하여 추진코자 하며, 사업대상지 변경이 어려울 경우에는 전액 시비로 사업을 추진하여 교통흐름 개선하여 안전한 도로환경을 조성코자 함.

기대효과

◦ 신호체계형 교차로를 회전교차로 정비하여 시민에게 안전하고 편리한 도로환경 조성

◦ 회전교차로 설치로 주요간선도로 교통정체 해소 및 교통 안전사고 예방