팔포음식특화지구 마리나항 개발

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-2	○				○			○	○
주관부서	해양수산과(해양레저팀)				협조부서 (협조기관)		경상남도(해양항만과)

목    적

◦ 수상레저선박의 지속적 증가에 따른 마리나항 및 관련시설 확충을 통해 해양레포츠 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

사업개요

◦ 위    치: 삼천포항 일원

◦ 사업기간: 2022년 ~ 2029년

◦ 사 업 량: 요트계류시설, 상하가시설, 보관 및 수리시설 등 확충

◦ 총사업비: 6,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	6,000	-	20	200	-	-	300	5,480
국 비	0	-	-	-	-	-
도 비	0	-	-	-	-	-
시 비	6,000	-	20	200	-	-	300	5,480
민자 등	-	-	-	-	-	-	-	-

그 간 추진사항

◦ 2022. 2.: 팔포음식특화지구 마리나항 조성 타당성 조사용역 시행

◦ 2022. 5.: 마리나항 조성 타당성 조사용역 중간 보고

◦ 2022. 6.: 마리나항 조성 타당성 조사용역 최종보고 및 준공

추진계획

◦ 2023. 3. ~ 12.: 삼천포항 항만기본계획 및 마리나항기본계획 변경 용역

- 제4차 전국항만기본계획(삼천포항) 변경(안) 작성·협의 및 기본계획 변경 반영

- 제2차 마리나항 기본계획 수정계획 반영(팔포지구 마리나항 예정구역 반영)

- 기본설계 등을 통한 사업계획 수립

◦ 2025. 1. ~  6.: 항만기본계획 및 마리나항 기본계획 변경

◦ 2026. 1. ~  6.: 마리나항 조성 실시설계

◦ 2027. 1. ~ 2029. 12.: 마리나항 조성사업 착공 및 준공

◦ 2030. 1.: 마리나항 개장 및 시설 운영

연도별 추진목표

세부 사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율 (누계)	10%	30%	30%	50%	70%	100%
팔포지구 마리나항 개발	타당성 조사용역	항만기본계획 및 마리나항만 기본계획 변경 용역, 사업계획 수립	-	항만기본계획 및 마리나항만 기본계획 변경 반영	마리나항만 조성 실시설계	마리나항만 공사착공 및 준공, 마리나항만 개장 및 시설 운영

문제점 및 대책

◦ 마리나항 개발을 위해서는 제4차 항만 기본계획 및 제2차 마리나항만 기본계획 변경 반영 후 사업추진을 하여야 함에 따라 임기 내 사업완료 불가

◦ 마리나항 조성 관련 공모사업(지자체 직접시행)이 없어 전액 시비 확보 필요

기대효과

◦ 지역 거점 해양레저 관광 인프라 구축에 따라 해양 레포츠 유치 및 지역경제 활성화에 기여