서포~곤명 간(국지도58호선) 도로 확장

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-21		○	○				○		○
주관부서	도로과(도로계획팀)				협조부서 (협조기관)

목    적

◦ 기존 선형이 불량하고 협소한 교통환경을 조기에 개선

◦ 지역주민 안전 및 교통편의성 제고를 위하여 국지도58호선 조속 추진

사업개요

◦ 위    치: 사천시 서포면~곤양면~곤명면 일원

◦ 사업기간: 2019년 ~ 2026년

◦ 사 업 량: 2차로 시설개량 L=13.2km

◦ 사업내용: 2차로 시설개량 L=13.2km(서포~곤양 L=6.1km, 곤양~곤명 7.1km)

◦ 총사업비: 51,800백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	51,800	800	2,136	20,000	15,000	10,000	3,864	0
국 비	51,800	800	2,136	20,000	15,000	10,000	3,864	0
도 비
시 비

그 간 추진사항

◦ 2015.  3.: 국지도 58호선 혼잡구간 우회도로 개설 건의

◦ 2019.  1.: 국지도 58호선 혼잡구간 우회도로 개설 건의

◦ 2019. 12.: (곤양~서포) 기본 및 실시설계 착수

◦ 2020.  6.: 부산청 방문 협의

◦ 2020.  7.: 주민설명회 개최(곤양면, 서포면)

◦ 2020. 11.: (곤양~곤명) 기본 및 실시설계 착수

◦ 2021. 11.: 기본설계 설계자문(곤양~곤명)

추진계획

◦ 2022.  8.: 계약심사 등 행정절차 이행사업비 협의(곤양~서포)

◦ 2022.  9.: 발주 공고(곤양-서포 / 경남도→조달청)

◦ 2022. 10.: 세부설계 및 소규모재해영향평가 등 절차 이행(곤양~곤명)

◦ 2022. 11.: 기본설계완료(곤양~곤명)

◦ 2023.  1.: 착공(곤양~서포)

◦ 2023.  1.: 세부 실시설계(곤양~곤명)

◦ 2024.  1.: 착공(곤양~곤명)

◦ 2026. 12.: 공사 준공

연도별 추진목표

세부 사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율 (누계)	20%	40%	60%	80%	100%
서포~곤명간 (국지도58호선) 도로 확장	실시설계	공사착공 (서포~곤양) 실시설계 (곤양~곤명)	공사추진 (서포~곤양) 공사착공 (곤양~곤명)	공사추진 (서포~곤명)	공사준공

문제점 및 대책

◦ 대규모 사업비 소요에 따른 예산확보 어려움

◦ 대책

- 부산국토관리청과 지속협의를 통한 예산확보와 조기 준공 추진

기대효과

◦ 국가지원지방도 선형 개량을 통하여 주민들의 교통 안전성 확보

◦ 낙후된 서부 지역의 도로망 확충으로 지역 균형발전에 기여