송포~실안 간 해안일주 연결도로 개설

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-22	○				○		○		○
주관부서	도로과(도로계획팀)				협조부서 (협조기관)		해양수산과(연안관리팀)

목    적

◦ 동지역 해안 일주도로 연결개설로 관광자원화 및 기존 도로(지방도 1003호선 등) 선형 개량으로 안전한 교통환경 조성 필요

◦ 『사천바다 케이블카』와 연계한 사천 대표 관광지 환경 조성

사업개요

◦ 위    치: 사천시 남양동 송포농공단지 ~ 동서동 산분령 일원

◦ 사업기간: 2022년 ~ 2026년

◦ 사 업 량: 해안도로 확·포장  L=4.7km  B=8.0m
┏ 1단계 : 송포농공단지~광포항(카페거리)L=2.3km
┠ 2단계 : 광포항~영복마을 L=1.4km
┗ 3단계 : 영복마을~산분령항 L=1.0km

◦ 총사업비: 52,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	52,000	0	100	1,000	20,000	20,000	10,900	0
국 비	52,000	0	100	1,000	20,000	20,000	10,900	0
도 비
시 비

그 간 추진사항

◦ 2022.  7.: 민선8기 공약사업 선정

추진계획

◦ 2022. 10.: 기본계획용역 착수

◦ 2023. 03.: 실시설계용역(소규모영향평가) 착수

◦ 2023. 09.: 실시설계용역 및 소규모영향평가 완료

◦ 2023. 10.: 일상감사 및 계약심사

◦ 2023. 11.: 공사 착공

연도별 추진목표

세부 사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율 (누계)	20%	30%	50%	80%	100%
해안일주 연결도로 개설	기본계획	실시설계 공사착공	공사추진	공사추진	준공

문제점 및 대책

◦ 일부구간 공유수면 매립기본계획 반영 등 행정절차에 많은 시일 소요

◦ 대책

- 실시설계 추진 시 사전영향평가 및 공유수면매립 등 관련 행정사항을 사전에 검토하여 행정절차 기간 최소화 추진

기대효과

◦ 사천읍에서 사천바다케이블카까지 해안도로를 연결함으로써 사천시 대표 해안도로 형성으로 관광객 유치

◦ 사천시 관광산업발전으로 지역경제 활성화에 기여