사천읍~진주역 국도33호선 개설

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-23	○		○					○	○
주관부서	도로과(도로계획팀)				협조부서 (협조기관)		진주시

목    적

◦ 경남국가항공산업단지와 항공클러스터 조성 및 KAI를 포함한 산업단지 교통량 분산을 위하여 사남-정동 국도대체우회도로와 연계한 사천읍-진주 정촌간 우회도로 개설 필요

사업개요

◦ 위    치: 사천시 사천읍 ~ 진주시 정촌면 일원

◦ 사업기간: 2022년 ~ 2027년

◦ 사 업 량: 도로 개설 L=6.08km, B=20m (4차로 신설)

◦ 총사업비: 125,200백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	125,200	0	0	0	100	0	1,500	123,600
국 비	125,200	0	0	0	100	0	1,500	123,600
도 비
시 비

그 간 추진사항

◦ 2016.  9.: 제4차 국도․국지도 5개년계획(’16~’20) 미반영(진주시 추진)

◦ 2021.  9.: 제5차 국도․국지도 5개년계획(’21~’25) 미반영(진주시 추진)

◦ 2022.  7.: 민선8기 공약사업 선정

◦ 2022.  8.: 진주시와 사업추진 방향 관련 업무 협의

추진계획

◦ 2024.  1.: 제5차 국도․국지도 5개년계획 기본계획 용역 착수(자체)

◦ 2025.  1.: 제5차 국도․국지도 5개년계획 반영 건의(사천시→국토부)

◦ 2026.  7.: 제5차 국도․국지도 5개년계획 선정

연도별 추진목표

세부 사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율 (누계)	2%	10%	30%	50%	50%	100%
사천읍~진주역 국도33호선 개설	진주시 업무협의	기본설계 수립용역 추진준비	기본계획 용역 착수	사업신청	사업선정	착공 및 준공

문제점 및 대책

◦ 교통량에 따른 경제성 저하로 인하여 사업추진 동력 약화

◦ 대책

- 사남-정동간 국도대체우회도로와 연계한 도로망 구축 필요성 및 항공우주청을 포함한 국가항공산업단지 교통량 증가 제시 추진

기대효과

◦ 국도3호선 교통정체 해소로 인한 교통 안전사고 예방

◦ 국가항공산업 발전 및 지역산업발전과 사천시 관광산업발전에 기여