새로운 산업단지 조성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-26	○				○			○	○
주관부서	산업입지과(산단조성팀)				협조부서 (협조기관)

목    적

◦ 낙후된 동 지역에 산업단지를 조성하여 지역의 특성과 역량에 맞는 기업을 유치하여 지역 균형 발전과 지역경제 활성화에 기여

사업개요

◦ 위    치: 사천시 향촌동 일원

◦ 사업기간: 2023년 ~ 2028년

◦ 사 업 량: A=310,000㎡

◦ 시 행 사: 사천시장(공영개발방식)

◦ 총사업비: 100,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	100,000		50	150	2,000	20,000	50,000	27,800
국 비
도 비
시 비	100,000		50	150	2,000	20,000	50,000	27,800

그 간 추진사항

◦ 2022.  7.    : 민선8기 시장 공약사항 확정

◦ 2022. 10.  5.: 입지 타당성 분석 용역 착수

추진계획

◦ 2023.  5.: 타당성 조사(한국지방행정연구원)

◦ 2023. 11.: 지방재정 투자심사 및 중기재정계획 수립

◦ 2024.  1.: 산업단지계획 용역 추진

연도별 추진목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	5%	10%	20%	30%	80%	100%
향촌 일반산업단지	타당성 분석용역	타당성 조사용역	산업단지계획 용역	보상 추진 공사착공	공사 계속	공사 준공

문제점 및 대책

◦ 향촌2 외 2개(용당MRO, 서부) 산단이 조성 완료 또는 조성 중임

◦ 미분양과 조성사업에 따른 시비 및 지방채 부담 가중

⇒ 우선 입지타당성과 입주업종 분석 용역을 선행하고 사천시 산업단지의 분양추이, 시비 및 지방채 부담 등이 최소화 되는 시점을 감안하여 행정절차 추진

기대효과

◦ 지역의 특성과 역량에 맞는 기업 유치로 지역 경제 활성화 및 지역 균형 발전 도모