남일대 해수욕장 해안산책로 조성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-5	○				○		○		○
주관부서	해양수산과(해양레저팀)				협조부서 (협조기관)

목    적

◦ 2018년 태풍 콩레이 등으로 파손된 남일대 해수욕장 해안산책로의 정비를   통하여 관광객들의 통행 편의 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

◦ 위    치: 남일대 해수욕장 일원(향촌동 산33번지 일원 내 공유수면)

◦ 사업기간: 2022년 ~ 2023년

◦ 사 업 량: 남일대 해수욕장 해안산책로 정비

- 해안데크(강교) 설치 L=104m

- 해안산책로 보강 L=73m

- 안전조명 설치 L=175m

◦ 총사업비: 2,400백만 원(특교세 900, 발전소기금 1,500)

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6.	임기후
계	2,400	-	900	1,500	-	-	-	-
국 비	900	-	900	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-
민자 등	-	-	-	-	-	-	-	-

그 간 추진사항

◦ 2021. 12.: (2구간) 기본 및 실시설계 완료

◦ 2022.  5.: (2구간) 행안부 재난안전 특별교부세 교부

◦ 2022.  7.: 공유수면 점·사용 변경 협의

◦ 2022.  9.: (2구간) 공사 착공(총괄분 및 1차분)

※ 1구간 준공 완료: 2021. 12.

추진계획

◦ 2022. 10.: 발전소주변지역 지원사업 계획서 제출

◦ 2023.  3.: 발전소주변지역 지원사업비 교부

◦ 2023.  4.: (2구간) 공사 착공(잔여분)

◦ 2023.  9.: (2구간) 공사 준공(총괄분, 1차분 및 잔여분)

연도별 추진목표

세부 사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율 (누계)	50%	100%
남일대 해수욕장 해안산책로 조성	(2구간) 공사착공 (총괄분 및 1차분)	(2구간) 공사착공 (잔여분), (2구간) 공사준공 (총괄분, 1차분 및 잔여분)

문제점 및 대책

◦ 없음

기대효과

◦ 사천시 대표 관광지인 남일대 해수욕장 해안산책로 정비를 통해 관광객들의 통행 편의 도모 및 안전을 확보하여 지역경제 활성화에 기여