시민이 먼저입니다

2015년 정책실명제 중점관리 대상사업 현황

	사 천 시 (기획예산담당관)

2015년도 정책실명제 중점관리 대상사업 선정 대상 현황

연번	정 책 명	총사업비 (백만원)		사업부서	선정․심의		비고
					중점대상	내부이력
합계	21건	277,683		11개 부서
1	작은 영화관 건립	1,700		문화정보과	0
2	종합운동장(사천,삼천포) 천연잔디 관리 용역	171		체육지원과	0
3	축동구호농공단지 조성사업	11,300		항공산업과	0
4	향촌농공단지 조성사업	55,300		항공산업과	0
5	구암일반산업단지 조성사업	28,000		항공산업과	0
6	향촌2지구 산업단지 조성사업	20,000		항공산업과	0
7	사주동계 재해위험지구 정비 사업	22,350		재난안전과	0
8	노산공원 재해위험지구 정비 사업	8,533		재난안전과	0
9	예동 재해위험지구 정비 사업	7,560		재난안전과	0
10	선진~신촌간 연안정비 사업	22,810		해양수산과	0
11	사천 남일대 명승지 주변 정비사업	3,800		해양수산과	0
12	남양중학교~송포교간 도시계획 도로 확·포장	48,000		도시과	0
13	사천시 소하천 종합 정비계획	2,400		건설과	0
14	두량5리~두량3리간 도로 확·포장	1,600		도로과	0
15	가화도로 확․포장	2,700		도로과	0
16	광역자전거도로 및 회암·배춘 진입로 확·포장	5,030		도로과	0
17	농산물종합가공센터 설치	1,000		미래농업과	0
18	학점은행제 평생하습대학 설치 운영	2,850		평생학습센터	0
19	서민자녀 교육지원사업	2,617		평생학습센터	0
20	삼천포 하수관거 개보수	12,569		상하수도사업소	0
21	사천지구(2단계) 하수관거 정비	17,393		상하수도사업소	0

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화정보과	②담당자 (전화번호)		지방행정주사 정경숙 지방행정사무관 제정건 (055-831-2710)
③정책사업명	작은 영화관 건립
④선정기준	10억원 이상 사업비가 소요되는 건설 및 개발사업(대규모 건축)		⑤사업기간		2015. 4.~12.
⑥주요내용	○ 사업목적 - 시민들에게 지역에서 영화를 관람 할 수 있는 기회 제공 - 시민들의 문화 향유 욕구 해소 - 타 지역 영화 관람으로 인한 시민 부담 경감 ○ 총사업비 : 1,700백만 원(국비 500, 도비 250, 시비 950) ○ 주요내용 - 위치 : 사천시 사천읍 무산로 21 - 사업규모 : 500㎡(지상 1층 500㎡) - 주요시설 : 2개관 99석(1관 40석, 2관 59석), 대기실, 매점 등 - 운영방식 : 민간위탁 ○ 추진경과 - 사업계획서 제출(도) : 2014. 4. - 작은 영화관 건립 검토보고 : 2014. 9. 5. - 작은 영화관 건립위치 선정 : 2014. 9. 22. - 기존 건축물 철거 실시설계 용역 완료 : 2015. 2. 3.(7,240천 원) - 지정폐기물 해체공사 준공 : 2015. 4. 15.(25,597천 원) - 지정폐기물 운반용역 완료 : 2015. 4. 20.(3,060천 원) - 철거공사 중 - 건설폐기물 처리용역 중

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	체육지원과	②담당자 (연락처)		부서장 : 행정5급 김대균 (831-2400) 담 당 : 행정6급 권남석 (831-2424) 담당자 : 공업9급 이근형 (831-2423)
③정책사업명	종합운동장(사천, 삼천포) 천연잔디 관리 용역
④선정기준	1억 이상의 용역사업		⑤사업기간		2015.05. ~ 2016.05.
⑥주요내용	1. 사업목적 - 사천, 삼천포종합운동장 천연잔디의 효율적 관리를 통해 잔디관리의 전문성 제고 및 시민의 체육 서비스 질 향상에 기여하고자 천연잔디 관리 용역시행 2. 사업개요 - 위 치 : 사천종합운동장(사천시 사천읍 정의리 7) 삼천포종합운동장(사천시 벌리동 4) - 사업기간 : 2015.05. ~ 2016.05(1년간) - 사 업 량 : 사천종합운동장 잔디관리 7,279㎡ 삼천포종합운동장 잔디관리 8,970㎡ - 총 사업비 : 171백만원(시비) 3. 추진상황 - 2015.03.31~04.02 : 용역설계서 일상감사 - 2015.04.06~04.14 : 용역설계서 계약심사 - 2015.04.14~ : 계약의뢰 및 공고 중

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	항공산업과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 최 일 (831-3450) 담 당 : 시설6급 하대철 (831-3459) 담당자 : 행정9급 장명관 (831-3457)
③정책사업명	축동구호농공단지 조성사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2008~2015.6
⑥주요내용	1. 사업개요 - 위 치 : 사천시 축동면 구호리 933번지 일원 - 면 적 : 106,425㎡ - 사업기간 : 2008~2015.6 - 개발방법 : 민간개발(실수요자개발) - 유치업종 : 금속가공제품제조업, 기타기계 및 장비제조업 등 2. 추진사항 - 2007. 6. 22 : 주민설명회 개최 - 2007. 12. 18 : 농공단지 지정승인 - 2008. 4. 11 : 사업시행자 지정 - 2008. 9. 9 : 농공단지 지정변경 및 실시계획승인 - 2008. 10. 1 : 공사착공 - 2008. 12. 26 : 관리기본계획승인 - 2009. 12. 2 : 농공단지 지정변경 및 실시계획변경 승인․고시(2차) 및 지형도면 고시 - 2009. 12. 10 : 관리기본계획 변경승인 - 2009. 12. 24 : 분양계획 승인 - 2010. 4. 28 : 농공단지지정변경 및 실시계획변경승인(3차) - 2010. 8. 6 : 분양공고 - 2011. 10. 26 : 농공단지계획 변경승인고서 (4차) - 2011. 11 .29 : 시공사 변경 (나라종합건설 → 상일토건), 분양계약체결 (케이유터(주)) - 2012. 5. 25 : 농공단지계획 변경승인고시(사업기간연장) - 2012. 7. 11 : 확정측량에 따른 농공단지계획 변경승인고시 - 2012. 8. 20 : 부분준공(1공구)인가 공고 - 2013. 1. 10 : 농공단지계획 변경승인고시(사업기간연장) - 2014. 1. 09 : 농공단지계획 변경승인고시 - 2015. 2. 26 : 농공단지계획 변경승인고시(사업기간연장)

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	항공산업과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 최 일 (831-3450) 담 당 : 시설6급 하대철 (831-3459) 담당자 : 시설7급 이종락 (831-3456)
③정책사업명	향촌농공단지조성사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2007~2013.06
⑥주요내용	1. 추진배경 - 위 치 : 사천시 향촌동, 사등동 215번지선 일원 - 사 업 량 : 260,040㎡ - 사업기간 : 2007 ～ 2013. 06 - 총사업비 : 553억원 - 개발방식 : 민간개발(실수요자 개발) - 사업시행자 : 삼호조선(주)파산관재인 변호사 권영상 - 유치업종 : 기타운송장비제조업 2. 추진사항 - 2007. 10. 17 : 농공단지 지정승인(경상남도 → 사천시) - 2008. 02. 12 : 사업시행자 지정(삼호조선(주) 대표 임문규) - 2008. 11. 25 : 농공단지지정 변경고시(사천시고시 제2008-139호) - 2009. 03. 20 : 농공단지 실시계획승인 및 고시(육지부166,485㎡) - 2009. 06. 02 : 농공단지 실시계획 변경승인 및 고시(육지부+해면부 260,040㎡) - 2010. 06. 28 : 농공단지 실시계획 변경승인 및 고시 - 2010. 10. 15 : 향촌농공단지조성공사 일시중단 - 2011. 05. 13 : 사업시행자 최종부도 - 2011. 12. 31 : 농공단지 실시계획(변경)승인(사업기간연장) - 2012. 02. 15 : 파산 결정 - 2012. 04. 10 : 1차 매각공고 - 희망매수자 없음 - 2013. 03. 28 : 농공단지 실시계획(변경)승인(사업기간연장)

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	항공산업과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 최 일 (831-3450) 담 당 : 시설6급 하대철 (831-3459) 담당자 : 시설7급 조현구 (831-3455)
③정책사업명	구암일반산업단지 조성사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2009.09.28. ~2015.12.30
⑥주요내용	1. 추진배경 - 위 치 : 사천시 사천읍 구암리 산48-1번지 일원 - 면 적 : 208,710㎡ - 사업기간 : 2009.09.28. ~ 2015.12.30. - 개발방법 : 민간개발(실수요자개발) - 유치업종 : 기타운송장비제조업, 기타기계 및 장비제조업 2. 추진사항 - 2009. 9. 28 : 산업단지계획 승인 - 2009. 11. 1 : 공사착공 - 2010. 5. 11 : 산업단지계획 변경승인 - 2011. 12. 30 : 산업단지계획(변경)승인(사업기간연장) - 2012. 12. 04 : 청문실시(1차) - 2013. 03. 07 : 산업단지계획(변경)승인(사업기간연장) - 2013. 06. 27 : 청문실시(2차) - 2014. 02. 05 : 청문실시(3차) - 2014. 07. 17 : 산업단지계획(변경) 승인신청서 제출(에치엘산업(주)) - 2015. 02.04 : 산업단지계획(변경) 승인신청서 자진취하 - 2015. 02.04 : 산업단지계획(변경) 승인신청서 제출(에치엘산업(주)) - 2015. 03.26 : 산업단지계획(변경) 승인․고시

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	항공산업과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 최 일 (831-3450) 담 당 : 시설6급 허원권 (831-3469) 담당자 : 시설8급 이정훈 (831-3466)
③정책사업명	향촌2지구 산업단지 조성사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2015. 4. ~ 2018. 12.
⑥주요내용	1. 추진배경 - 위 치 : 사천시 사등동 산34지선 - 면 적 : 76,933㎡(23,313평, 공유수면) - 사업기간 : 2015년 ~ 2018년 - 개발방법 : 공영개발(사천시) - 유치업종 : 조선시설용지(소형수리조선) 2. 추진사항 - '09. 07. 09 : 소형조선소 이전에 따른 대체부지 조성건의 - '11. 07. 29 : 공유수면매립기본계획 반영 확정(국토해양부) A=70,933㎡ - '11. 09. 20 : 소형조선소 3개업체 간담회 개최 및 개발방식 등 협의 - '12. 05. 07 : 사등Ⅲ지구 산업단지 조성 민간개발 희망(제일조선소, 삼선조선소) - '14. 11. 27 : 향촌2지구 산업단지 추진관련 협의(삼선조선소, 해원조선소) → 입주의향 및 시행방법, 개발면적 등 협의 - '14. 12. 23 : 산업단지 지정계획 고시(경상남도 고시 제2014-496호) - '15. 02. 27 : 입주확약서 접수(제일조선소, 삼선조선소, 해원조선소) - '15. 04. : 향촌2지구 산업단지 전략환경영향평가 용역 외 3건 착수 - '15. 04. 03 : 향촌2지구 산업단지계획 수립용역 사업수행능력평가서 제출 안내공고

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	재난안전과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 박영철(831-3300) 담 당 : 시설6급 김현수(831-3319) 담당자 : 시설7급 김민동(831-3316)
③정책사업명	사주동계 재해위험지구 정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2012 ~ 2016
⑥주요내용	1. 추진배경 - 집중호우 시 주택지 및 농경지 침수로 인한 인명과 재산 피해 예방을 위함 2. 위 치 : 사천읍 사주리, 정동면 고읍리 동계마을 일원 3. 추진기간 : 2012. 01 ~ 2016. 01 4. 사 업 량 - 배수펌프장 2개소(사주리, 동계지구) - 배수로 정비 L=1.241km - 동계소하천 정비 L=0.988km 5. 총사업비 : 22,350백만원 (국비 11,936, 도비 3,344, 시비 6,405, 기타 665) 6. 주요내용 - 토지보상, 하천 정비공사, 배수장 신축 7. 추진경과 - 2006. 12. 18 : 재해위험지구 지정고시 - 2010. 02. 22 : 사주․동계지구 실시설계용역 착수 - 2010. 12. 24 : 소방방재청 실시설계 사전심의 - 2011. 04. 29 : 도 건설기술심의 완료 - 2011. 12월 : 공사발주 및 책임감리 시행 - 2012. 01. 25 ~ 2013. 01. 23 : 2012년분 착공 및 준공 - 2013. 02. 05 ~ 2013. 12. 31 : 2013년분 착공 및 준공 - 2014. 01. 17 ~ 2015. 02. 27 : 2014년분 착공 및 준공 - 2015. 03. 02 ~ 현재 : 2015년분 착공 및 공사 진행 중

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	재난안전과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 박영철(831-3300) 담 당 : 시설6급 김현수(831-3319) 담당자 : 시설7급 김민동(831-3316)
③정책사업명	노산공원 재해위험지구 정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2012 ~ 2016
⑥주요내용	1. 추진배경 - 절리면 풍화로 인한 낙석 및 붕락의 위험으로부터 인명과 재산피해 예방을 위함 2. 위 치 : 사천시 동서금동 노산공원 일원 3. 추진기간 : 2012 ~ 2016 4. 사 업 량 - 낙석방지책 L=198m, 완충지대조성 A=2,350㎡ - 배수관로 L=281m, 방재수목 1식 5. 총사업비 : 8,533백만원 (국비 4,464, 도비 1,170, 시비 2,733, 기타 166) 6. 주요내용 - 위험지구 주택이주(30가구) 및 보상 7. 추진경과 - 2009. 01. 05 : 재해위험지구 지정고시 - 2011. 12. 30 : 신규사업 확정 - 2012. 02. 10 : 노산공원 재해위험지구 실시설계용역 착수 - 2012. 04. 19 : 주민의견 수렴 및 설명회 개최(등대경로당) - 2012. 07. 06 : 소방방재청 실시설계 사전검토(1차) - 2012. 09. 05 : 소방방재청 실시설계 사전검토(2차) - 2012. 12. 04 : 사전설계 승인 - 2012. 12. 04 ~ 현재 : 위험주택 보상 추진 중

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	재난안전과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 박영철(831-3300) 담 당 : 시설6급 김현수(831-3319) 담당자 : 시설7급 김민동(831-3316)
③정책사업명	예동 재해위험지구 정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2013 ~ 2017
⑥주요내용	1. 추진배경 - 저지대의 주택지 및 농경지 침수에 따른 인명과 재산피해 예방을 위함 2. 위 치 : 사천시 축동면 사다리 예동마을 일원 3. 추진기간 : 2013 ~ 2017 4. 사 업 량 - 하천개수공사 L=1.6km - 침수주택이주 11가구 5. 총사업비 : 7,560백만원(국비 3,830, 도비 3,730) 6. 주요내용 - 토지보상 및 침수주택이주(11가구) 7. 추진경과 - 2012. 04. 14 : 재해위험지구 지정고시 - 2013. 01월 : 신규사업 확정 - 2013. 04. 26 : 예동 재해위험지구 실시설계용역 착수 - 2013. 07월 : 주민의견 수렴 및 설명회 개최 - 2013. 11. 18 : 소방방재청 실시설계 사전검토(1차) - 2014. 05. 03 : 소방방재청 실시설계 사전검토(2차) - 2015. 03. 13 : 사전검토 위원 의견 조치계획 제출

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	해양수산과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 김길수 (831-3100) 담 당 : 해양수산6급 문상길 (831-3129) 담당자 : 시설6급 강순철 (831-3125)
③정책사업명	선진~신촌간 연안정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2010~2020
⑥주요내용	○ 추진배경 - 연안정비 기본계획에 의한 중장기계획사업이며, - 자연 환경 및 관광자원과 연계한 해양관광시설 및 이용객의 친수시설을 조성하여 어민 소득 증대는 물론 지역경제 활성화 할 수 있는 친수공간으로 개발토록 하는 사업 ○ 추진기간 : 2010. 01. ~ 2020. 12. ○ 총사업비 : 22,810백만원 ○ 주요내용 - 선진리 지구 : 수변공원 21,016m2, 축제의 거리 461m, 물양장 65m - 신촌리 지구 : 친수호안도로 1,040m, 해안도로 확․포장 960m ○ 추진경과 - ‘06.07. : 국가시행 연안정비사업 확정 - ‘08.06.03. : 기본설계 용역 완료(해양수산부) - ‘09.05.27. : 제2차 연안정비 기본계획 반영 - ‘09.10.06. : 투.융자심사 - ‘11.07.29. : 제3차 공유수면매립기본계획 반영 - ‘11.09.30. : 건설기술심의 (경남도) - ‘11.06.17.~’11.8.4. : 설계의 경제성 검토용역 완료 - ‘11.08.04. : 재해영향 평가 - ‘11.09.29. : 설계의 경제성 검토용역 - ‘11.09.30. : 건설기술 심의 (경남도) - ‘10.04.16.~’11.10.15. : 실시설계 완료

⑥주요내용	- ‘12.02.29. : 환경영향 평가 - ‘12.05.03. : 도시계획시설(도로) 결정 고시 (2012-76호) - ‘12.06.01. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가 고시 - ‘12.06.05. : 연압정비사업 실시계획(안) 협의(국토해양부) - ‘12.08.27. : 문화재 조사 - ‘12.09.05. : 계약심사 - ‘12.09.11. : 선진~신촌간 연안정비사업 실시계획 수립 고시(2012-154호) - ‘12.09.11. : 공유수면매립 면허 고시 및 해역이용협의 - ‘12.10.19.~’14.01.23.: ‘11년분 및 ’12년분 사업 준공 (친수호안도로 670m) - ‘14.05.08. : 계약심사 - ‘14.06.09.~’15.06.08. : ‘14년분 착공(신촌해안도로554m, 선진해안도로 250m)

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

해양수산과

②담당자

(전화번호)

부서장 : 행정5급 김길수 (831-3100)

담  당 : 해양수산6급 김용관 (831-3139)

담당자 : 시설9급 장성재 (831-3137)

③정책사업명

사천 남일대 명승지 주변 정비사업

④선정기준

총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업

⑤사업기간

2015~2017

⑥주요내용

1. 추진배경

- 신라말의 대문장가 고운 최치원 선생이 수려한 경관에 “남녘에서 가장 빼어난 절경”이라는 뜻으로 명명한 남일대의 정체성과 역사성을 재조명하여 관광자원 개발

- 남일대 명승지를 역사성과 예술성이 조화하는 관광지로 개발하여 관광객 유치를 통한 지역경기 활성화를 도모

2. 사업개요

- 위    치  : 사천시 향촌동 일원

- 사업기간  : 2015 ~ 2017 (3년간)

- 사업내용  : 관광자원 개발

- 총 사업비 : 3,800백만원 (광특 1,900  도비 570  시비 1,330)

- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년 까지	2015년	2016년	2017 이후
계	3,800	-	1,000	1,000	1,800
국비(광특)	1,900	-	500	500	900
도 비	570	-	150	150	270
시 비	1,330	-	350	350	630
기 타	-	-

3. 향후 추진 계획

- 2015. 5월중 : 사천 남일대 명승지 주변 정비사업 설계공모

- 2015년 중 : 사천 남일대 명승지 주변 정비사업 시행

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 시설5급 한재천 (831-3150) 담 당 : 시설6급 정종욱 (831-3169) 담당자 : 시설7급 박현철 (831-3166)
③정책사업명	남양중학교~송포교간 도시계획도로 확․포장
④선정기준	10억원 이상 사업비가 소요되는 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2011~2016
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ○ 동지역 관문 도로의 쾌적한 가로 환경 조성 □ 사업개요 ○ 위 치 : 사천시 송포동, 죽림동 일원 ○ 사업기간 : 2011. ~ 2020. ○ 사 업 량 : L=3.3km, B=25 ~ 50m - 1차구간 : 국도3호선~남양중학교 L=900m, B=25m - 2차구간 : 남양중학교~죽림삼거리 L=1,500m, B=25m - 3차구간 : 죽림삼거리~대성초교 L=900m, B=50m ○ 사 업 비 : 480억원(보상비 315 ,공사비 160 기타 5 ) □ 추진사항 ○ ‘11. 4월 : 1차구간 실시설계 ○ ‘12. 9월 : 1차구간 공사 준공 ○ ‘14. 5월 : 2차구간 실시설계 ○ '15. 4월 : 2차구간 공사 시행

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

건설과

②담당자

(연락처)

부서장 : 시설5급 김상돈 (831-3250)

담  당 : 시설6급 서성우 (831-3274)

담당자 : 시설8급 김길규 (831-3270)

③정책사업명

사천시 소하천 정비 종합계획

④선정기준

1억원 이상의 용역사업

⑤사업기간

2014.09. ~ 2017.09

⑥주요내용

1. 추진배경

○ 「소하천정비법」제6조 제1항 규정 상 소하천정비종합계획을 10년        마다 수립하여 시․도지사의 승인을 받도록 규정하고 있는 법정사무임

2. 사업내용

○ 위    치 : 사천시 관내

○ 사 업 량

- 소하천정비 종합계획 용역 L=127.16km(소하천 86개소)

- 전략환경영향평가 1식

○ 사 업 비 : 24억원(시비100%)

※ 2015년 예산 : 3억원

○ 사업기간 : 2014. 9. 18 ~ 2017. 09. 16(3년간)

분기별 추진계획		세부일정	비 고
1/4	○ 2015년도분 착수	2015.05~2015.05
2/4	○ 전략환경영향평가 용역 시행	2015.05~2015.06
3/4	○ 전략환경영향평가 착수	2015.07~2015.09
4/4	○ 2014년분 사업완료	2015.10~2015.12

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 박철우 (831-3350) 담 당 : 시설6급 김진윤 (831-2294) 담당자 : 시설7급 하진건 (831-2290)
③정책사업명	두량5리~두량3리간 도로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2010. 01. ~ 2016. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대 2. 추진기간 : 2010. 01. ~ 2016. 12. 3. 총사업비 : 1,600백만원(시비 1,600) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천읍 두량리 지내(농어촌도로 사천읍201호선) - 사업개요 : 도로 확․포장 L=0.94km, B=8.0m - 수 급 자 : 태원종합건설(주) 대표이사 구종회 - 현 공 정 : 30% 5. 추진경과 - '09. 10월 : 중기재정계획 반영 - '10. 7월 : 설계완료 - '11. 1월~'14. 5월 : 토지보상 - '14. 6월 : 장기계속공사 착공 - '14. 7월~'15. 2월 : 2014년분 공사 - '15. 3월~'15. 11월 : 2015년분 공사 추진 - '16. 12월 : 장기계속공사 준공 예정

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 박철우 (831-3350) 담 당 : 시설6급 김진윤 (831-2294) 담당자 : 시설7급 하진건 (831-2290)
③정책사업명	가화도로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2012. 01. ~ 2017. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대 2. 추진기간 : 2012. 01. ~ 2017. 12. 3. 총사업비 : 2,700백만원(시비 2,700) 4. 주요내용 - 위 치 : 곤양면 가화리 지내(농어촌도로 곤양209호선) - 사업개요 : 도로 확․포장 L=2.1km, B=8.0m - 수 급 자 : 석암건설(주) 대표이사 박광신 - 현 공 정 : 10% 5. 추진경과 - '10. 10월 : 중기재정계획 반영 - '10. 10. 28. : 투․융자심사 적정 - '12. 1월~'12. 5월 : 실시설계(우선 L=1.0㎞추진) - '13. 1월~'14. 11월 : 토지보상 - '14. 12월 : 장기계속공사 착공 - '14. 12월~'15. 12월 : 2014년분 공사 추진 - '15. 3월~'15. 11월 : 2015년분 공사 추진 - '17. 12월 : 장기계속공사 준공 예정

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 박철우(831-3350) 담 당 : 시설6급 김진윤(831-2294) 담당자 : 시설7급 이덕수(831-2291)
③정책사업명	광역자전거도로 및 화암․배춘 진입로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2014. 01. ~2017. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 자전거도로 및 화암․배춘 진입로를 병행개설하여 교통편익 증대 및 국가자전거도로 연결망 구축 2. 추진기간 : 2014. 01. ~ 2017. 12. 3. 총사업비 : 5,030백만원(국비 1,406, 도비 422, 시비 3,202) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천읍 선인리~축동면 배춘리 일원 - 사업개요 ․ 기존도로정비 및 자전거도로개설 L=4.6km B=1.5~3.0m ․ 화암진입로 확․포장 L=0.815km B=10.5m ․ 배춘진입로 확․포장 L=0.44km B=10.0m - 수 급 자 : ㈜선진건설 대표이사 최동환 - 현 공 정 : 5% 5. 추진경과 - '13. 12월 : 실시설계 완료 - '14. 1월 : 토지보상 - '14. 12월 : 장기계속공사 착공 - '14. 12월~'16. 12월 : 2014년분 공사 추진 - '17. 12월 : 장기계속공사 준공 예정

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	미래농업과	②담당자 (전화번호)	부서장 : 농업5급 이외식(831-3800) 담 당 : 농촌지도사 임경주(831-3824) 담당자 : 농촌지도사 송혜경(831-3820)
③정책사업명	농산물종합가공센터 설치
④선정기준	10억원 이상 사업비가 소요되는 건설 및 개발사업			⑤사업기간	2015 ~ 2016
⑥주요내용	1. 추진배경 ❍ 농업기술센터를 지역농산물 가공기술의 전진기지화 ❍ 농산물 가공기술의 이전, 보급, 확산을 통한 농외소득 창출 지원 ❍ 농가의 수요에 맞는 품목·장비 선정으로 상시운영 체계 확립 2. 사업개요 ❍ 위 치 : 농업기술센터 내(용현면 신복리 산75-2) ❍ 사업기간 : 2015 ～ 2016년(2년간) ❍ 사 업 량 : 1개소 ❍ 사업내용 : 농산물가공센터 신축(330㎡), 가공설비 구축 ❍ 사 업 비 : 1,000백만원(도비 300, 시비 700) 3. 추진상황 ❍ ′14. 11 : 농산물종합가공센터 기술시범사업 확정 (경남농업기술원) ❍ ′14. 12 : 부지선정 및 공유재산심의 ❍ ′15. 01 : 기 설치 지역 현장 벤치마킹 ❍ ′15. 03 : 농산물가공센터 설치 기초조사 용역 4. 추진계획 ❍ ′15. 06 : 시설·장비 구축 용역 ❍ ′15. 12 : 사업장 실시 설계 용역 완료 ❍ ′16. 03 : 사업장 착공 ❍ ′16. 06 : 사업장 준공 ❍ ′16. 07 : 시설·장비 구축 ❍ ′16. 12 : 시설·장비 구축 완료

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	평생학습센터	②담당자 (전화번호)		소 장 : 행정6급 황현숙 (831-2590) 담 당 : 행정6급 박중한 (831-2599) 담당자 : 행정8급 김아영(831-2596)
③정책사업명	학점은행제 평생학습대학 설치 운영
④선정기준	시민의권익 및 복지증진관련		⑤사업기간		2014년 ~ 2018년
⑥주요내용	□ 사업 목적 ○ 시민에게 다양한 학습기회를 제공하여 삶의 질 향상 ○ 맞춤식 고급인력 양성으로 지역경쟁력 제고 □ 사업 개요 ○ 위 치 : 사천시 평생학습센터(구, 사천청사) ○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년(5년) ○ 사업량 : 평상학습대학 설치 운영 ○ 사업비 : 2,850백만원 □ 추진 사항 ○ 평생학습센터 프로그램 운영실적 마련 : ‘10년 ~ ‘14년 ○ 평생교육협의회위원 정비 : ‘15. 3월 ○ 타군 학점은행제 평생학습대학 운영 벤치 마킹 : ‘14. 11월 , ‘15. 3월 ※ 경북 칠곡교육문화회관 □ 추진 계획 ○ 학점은행제 평생학습대학 운영규정 제정 : ‘15. 5월 ○ 학점은행제 평생학습대학 설치 운영 계획 : ‘15. 6월 ○ 학점은행제 평생학습대학 리모델링 사업 추진 : ‘15. 7월 ○ 전공평가인정 신청을 위한 강좌 개설운영(3개과목, 150시간이상) : ‘15. 7월 ~ ※ 사회복지학(영유아보육론, 노인복지론, 정신건강론 등) ○ 평생학습센터 홈페이지 학사관리 시스템 구축 및 자료실 도서구입 : ‘16. 3월 ○ 학점은행제 평생학습대학 개강 : ‘17. 3월

⑥주요내용	□ 문제점 및 대책 ○ 사천읍사무소가 현 평생학습센터로 이전할 계획임으로 평생학습 센터는 구, 사천청사(국방품질관리원 임대완료) 건물로 이전계획에 따른 소요시간 및 비용증가 ⇒ 평생학습대학 설치 및 운영에 적정한 시설로 리모델링 필요 ⇒ 2015년 1회 추경 시 리모델링 예산확보 노력(17억원) ○ 학점은행제 평생학습대학 설치·운영에 따른 사전 조건구비 기간 2년 소요 및 수강생 확보 어려움 ⇒ 타시군 학점은행제 운영 벤치마킹을 통한 시행착오 최소화 ⇒ 다양한 계층의 평생학습 참여 유도

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	평생학습센터	②담당자 (전화번호)		소 장 : 행정6급 황현숙 (831-2590) 담 당 : 행정6급 김영운 (831-2589) 담당자 : 행정8급 김동국 (831-2585)
③정책사업명	서민자녀 교육지원사업
④선정기준	시민의권익 및 복지증진관련		⑤사업기간		2015. 1월 ~ 2015. 12월
⑥주요내용	□ 사업 목적 ○ 서민계층 자녀들의 교육격차 해소 및 동등한 교육 기회 제공 ○ 서민자녀들의 꿈 실현과 신분상승을 위한 희망의 사다리 역할 수행 □ 사업 개요 ○ 지원대상 및 기준 : 관내 초중고 학생/최저생계비 250%이하 ○ 신청기간 : 1차 3.16~4.3/2차 4.6~ (예산 소진 시까지) ○ 신청장소 : 주소지 읍면사무소 및 동주민센터 ○ 지원내용 및 예산 : 2,617백만원 - 바우처사업 : 1,354/맞춤형교육지원 : 678/교육여건개선 : 585 □ 추진 사항 및 계획 ○ 1차 수혜대상자 결정 : ‘15. 4. 10 ○ 서민자녀 교육지원에 관한 조례 입법예고 : ‘15. 3. 26 ~ 4. 15 ○ 바우처사업자 및 제공기관과 협약체결 : ‘15. 4월 중 ○ 2차 수혜대상자 결정 : ‘15. 4. 27 ○ 바우처 카드 발급 및 사용 : ‘15. 5월 ~ ○ 서민자녀 교육지원에 관한 조례 시의회 상정 : ‘15. 5월 중 ○ 맞춤형지원 및 교육여건개선 사업 시행 : ‘15. 6월 ~

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	상하수도사업소	②담당자 (전화번호)		부서장 : 시설5급 강삼중 (831-5530) 담 당 : 시설6급 김정문 (831-5545) 담당자 : 시설7급 정오식 (831-5546)
③정책사업명	삼천포 하수관거 개보수(갱생)
④선정기준	10억원 이상 사업비가 소요되는 건설 및 개발 사업		⑤사업기간		2012~2017
⑥주요내용	1. 추진배경 - 공공수역의 수질보전과 소규모 공공하수처리시설의 경제적 운영 2. 추진기간 : 2012 ∼ 2017 3. 총사업비 : 12,569백만원(국비 7,442, 지방비 5,127) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 동지역, 사천읍 일원 - 사업개요 : 하수관로 개보수 L=10.509㎞ 5. 추진경과 - 2012. 04. : 지방재정 투․융자심사 - 2012. 06. : 타당성 조사용역 완료 - 2013. 11. : 기본 및 실시설계 완료 - 2014. 08. : 낙동강유역환경청 재원협의 완료 - 2014. 12. : 총사업비 변경 승인 - 2015. 04. : 공법 선정 위원회 - 2015. 06. : 착공예정

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	상하수도사업소	②담당자 (전화번호)		부서장 : 시설5급 강삼중 (831-5530) 담 당 : 시설6급 김정문 (831-5545) 담당자 : 시설8급 이청용 (831-5547)
③정책사업명	사천지구(2단계) 하수관거 정비사업
④선정기준	10억원 이상 사업비가 소요되는 건설 및 개발 사업		⑤사업기간		2012~2017
⑥주요내용	1. 추진배경 - 공공수역의 수질보전과 소규모 공공하수처리시설의 경제적 운영 2. 추진기간 : 2012~2017 3. 총사업비 : 17,393백만원(국비 12,175, 지방비 5,218) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 사천읍, 사남면, 축동면 일원 - 사업개요 : 하수관로 정비 L=11.947㎞, 배수설비 781개소 - 수 급 자 : (유)일봉도시개발 - 공사기간 : 2014. 11. 24. ~ 2017. 11. 22. 5. 추진경과 - 2011. 03. : 지방재정 투․융자심사 - 2012. 01. : 실시설계 완료 - 2013. 08. : 낙동강유역환경청 재원협의 완료 - 2014. 11. : 2014년분 착공 - 2015. 03. : 2015년분 착공