시민이 먼저입니다

2017년도 「정책실명제」

중점관리 대상사업 현황

	사 천 시 (기획예산담당관)

2017년 정책실명제 중점관리 대상사업 선정 대상 현황

연번	정 책 명	총사업비 (백만원)		사업부서	선정․심의		비고
					중점대상	내부이력
합계	39건	727,101		11개 부서
1	사천시 중·장기 발전계획 수립 학술용역	300		기획예산담당관	○
2	사천시청 관광명소화 사업	1,850		문화관광과	○
3	비토 국민여가 캠핑장 조성사업	2,650		문화관광과	○
4	삼천포 대교공원 브릿지 설치사업	2,500		문화관광과	○
5	삼천포 대교공원 주차장 확장사업	19,100		문화관광과	○
6	실안관광지 내 도로개설사업	1,000		문화관광과	○
7	용현 생활체육시설 조성사업	8,500		체육지원과	○
8	예동 재해위험지구 정비사업	6,394		재난안전과	○
9	노산공원 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	2,296		재난안전과	○
10	선진~신촌간 연안정비사업	22,810		해양수산과	○
11	사천 남일대 명승지 주변 정비사업	3,800		해양수산과	○
12	직장어린이집 및 편의시설 공사	2,830		건축과	○
13	국도3호선 송포교차로 개선사업	8,000		도로과	○
14	사천바다 케이블카 설치사업	60,000		도로과	○
15	초양도 관광거점 마을 만들기	4,850		도로과	○
16	사천대방 관광자원 개발사업	14,040		도로과	○
17	자혜교차로 연결도로 확․포장	2,000		도로과	○
18	포곡마을 진입로 확․포장	1,300		도로과	○
19	사촌~대산간 도로 확․포장	1,500		도로과	○
20	곤양면소재지 종합정비사업	6,500		지역개발과	○
21	곤명면소재지 종합정비사업	5,400		지역개발과	○
22	용현권역단위 종합개발사업	4,500		지역개발과	○
23	상남권역단위 종합개발사업	4,900		지역개발과	○
24	정동권역 창조적마을만들기사업	3,286		지역개발과	○
25	송포마을 권역단위 종합정비사업	3,374		지역개발과	○
26	사남면 농촌 중심지 활성화 사업	5,950		지역개발과	○
27	사천읍 농촌 중심지 활성화 사업	8,000		지역개발과	○
28	정동 소곡 금자정 창조적 마을 만들기 사업	1,000		지역개발과	○
29	사천IC일원 복합유통상업단지 조성사업	90,000		지역개발과	○
30	삼천포 구역사주변 도시개발사업	9,000		지역개발과	○
31	신수도 바다마을 쉼터조성	4,409		지역개발과	○
32	신수도 도서종합개발사업 공원계획 변경 및 도시관리계획 결정(변경)용역	200		지역개발과	○
33	종포일반산업단지 조성	63,000		우주항공과	○
34	향촌2지구 일반산업단지 조성사업	20,000		산업단지과	○
35	용당(MRO)산업단지 조성사업	90,000		산업단지과	○
36	송포 도시첨단산업단지 조성	160,000		산업단지과	○
37	축동 일반산업단지 조성사업	51900		산업단지과	○
38	삼천포 하수관거 개보수(갱생)	12,569		하수도사업소	○
39	사천지구(2단계) 하수관거 정비사업	17,393		하수도사업소	○

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	기획예산담당관	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 박영철(831-2200) 담 당 : 행정6급 정대웅(831-2214) 담당자 : 행정7급 강영태(831-2210)
③ 정책사업명	사천시 중·장기 발전계획 수립 학술용역
④ 선정기준	1억원 이상의 학술용역사업		⑤ 사업기간		2017.4.~2018.4.
⑥ 주요내용	가. 용역개요 ○ 용역기간 : 2017. 4. ~ 2018. 4.(12개월) ○ 용 역 비 : 300,000천원 ○ 성 과 품 : 2개 부분으로 나눠 납품 - 사천시 중장기발전계획 - 서부(권)지역 중장기 발전계획 나. 목적 및 필요성 ○ 사회 및 행정여건 변화에 능동적인 대응이 가능 ○ 미래 비전 제시로 시민에게 꿈과 희망 제공 다. 추진일정 ○ 2017. 1. : 사천시 중장기발전계획 용역 방향설정 등 ○ 2017. 2. : 행정절차 이행 ○ 2017. 3. : 용역시행 의뢰 ○ 2017. 4. : 용역착수 ○ 2017. 9월/12월 중 : 용역중간보고 1차/2차 ○ 2018. 2. : 용역최종보고회 ○ 2018. 4. : 성과품 납품

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	문화관광과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 김대균(831-2700) 담 당 : 행정6급 임정의(831-2729) 담당자 : 행정7급 김명애(831-2725)
③ 정책사업명	사천시청 관광명소화 사업
④ 선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤ 사업기간		2016.∼2020.(5년간)
⑥ 주요내용	□ 사업개요 ❍ 위 치 : 용현면 시청로 77 사천시청일원 ❍ 기 간 : 2016. ~ 2020.(5년) ❍ 사 업 량 : 조형물, 벽화, 트릭아트, 포토존 설치 등 ❍ 사 업 비 : 1,850백만원(시비) ❍ 내 용 - 역사 정원 : 고려현종정원, 이순신장군정원, 세종·단종태실지 조성 - 키즈 동산 : 슈퍼윙스를 이용한 놀이시설 및 포토존 설치 - 펀펀조각공원 : 유머와 위트가 있는 조각품 - 시 상징벽화 및 계단 트릭아트 : 케이블카 등 □ 2017년 추진일정 ❍ 펀펀조각공원 조형물 디자인 개발 및 제작·설치사업 . 제안서 공고 : 2017. 4. 10.(월) ~ 2017. 4. 25.(화) . 제안서 접수 : 2017. 4. 25.(화) 09:00 ~ 17:00 . 제안서 평가 : 2017. 5. 04.(목) 14:00 ❍ 협상대상자 선정 및 계약체결 : 2017. 5. 4. 이후 . 사업착수 및 준공 : 2017. 5. ~ 9.

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	문화관광과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 김대균(831-2700) 담 당 : 시설6급 안용주(831-2734) 담당자 : 시설8급 장성재(831-2731)
③정책사업명	비토 국민여가 캠핑장 조성사업
④선정기준	관광자원개발		⑤사업기간		‘17.1 ~’17.12
⑥주요내용	◇ 사업개요 ❍ 위 치 : 사천시 서포면 비토리 별주부전테마파크내 ❍ 시설개요 : 야영장 43면, 편익시설 등(관리동, 물놀이장) ❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2017년 ❍ 사 업 비 : 26.5억원(국비10, 도비3, 시비13.5) ◇ 주요 추진상황 ❍ ‘15. 06. 12. : 기본계획수립용역 착수 ❍ ‘15. 08. 31. : 용역보고회 개최(대상지 확정) ❍ ‘15. 10. 14. : 캠핑장 조성사업 대상지 공모 선정(경남도) ❍ ‘15. 11. 12. : 기본계획수립용역 완료 ❍ ‘16. 11. 29. : 실시설계용역 완료 ❍ ‘16. 12. 08. : 실시계획인가 ❍ ‘16. 12. 26. : 공사착공 ◇ 향후계획 ❍ ‘17. 07 : 관련 조례제정 ❍ ‘17. 12 : 공사 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	문화관광과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 김대균(831-2700) 담 당 : 시설6급 안용주(831-2734) 담당자 : 시설8급 장성재(831-2731)
③정책사업명	삼천포 대교공원 브릿지 설치사업
④선정기준	관광자원개발		⑤사업기간		’17. 1. ~ ’18. 12.
⑥주요내용	◇ 사업개요 ❍ 위 치 : 사천시 대방동 대방주차장 ~ 삼천포 대교공원 간 ❍ 시설개요 : 보도육교 설치 L=55m , B=4m ❍ 사업기간 : 2017년 01월 ~ 2018년 12월 ❍ 사 업 비 : 25억원(국비, 도비10, 시비15) ◇ 주요 추진상황 ❍ ‘15. 11. 20. : 실시설계용역 완료 ❍ ‘16. 03. 17. : 도시계획시설(육교) 결정(변경) ❍ ‘17. 02. 22. : 재정지원건의사업 건의 ❍ ‘17. 03. 13. : 재정지원건의사업 도비 교부 결정 ❍ ‘17. 03. 23. : 실시설계 보완 및 실시계획 인가 용역 착수 ◇ 향후계획 ❍ ‘17. 04. : 실시계획인가 ❍ ‘17. 05. : 공사착공 ❍ ‘18. 12. : 공사준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	문화관광과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 김대균(831-2700) 담 당 : 시설6급 안용주(831-2734) 담당자 : 시설8급 장성재(831-2731)
③정책사업명	삼천포 대교공원 주차장 확장사업
④선정기준	관광자원개발		⑤사업기간		‘17.1 ~’22.12
⑥주요내용	◇ 사업개요 ❍ 위 치 : 사천시 대방동 삼천포 대교공원 일원 ❍ 시설개요 : 주차장 확장 10,450㎡ ❍ 사업기간 : 2017년 01월 ~ 2022년 12월 ❍ 사 업 비 : 191억원(국비, 도비, 시비191) ◇ 주요 추진상황 ❍ ‘16. 12. 20 : 실시설계 완료 ❍ ‘16. 12. 29 : 도시관리계획(재정비) 결정고시 ❍ ‘17. 03. 09 : 실시계획인가 ◇ 향후계획 ❍ ‘17. 04. : 보상협의 및 감정평가 ❍ ‘17. 05. : 1차 공사착공(풍경커피숍 일원 1,200㎡) ❍ ‘17. 12. : 1차 공사준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	문화관광과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 김대균(831-2700) 담 당 : 시설6급 안용주(831-2734) 담당자 : 시설8급 장성재(831-2731)
③정책사업명	실안관광지 내 도로개설사업
④선정기준	관광자원개발		⑤사업기간		’17. 1. ~ ’17. 12.
⑥주요내용	◇ 사업개요 ❍ 위 치 : 사천시 실안동 869-4 일원 ❍ 시설개요 : 도로개설 1식(L=350m, B=8~15m) ❍ 사업기간 : 2017년 1월 ~ 2017년 12월 ❍ 사 업 비 : 10억원(계속비6.5, 도비, 시비3.5) ◇ 주요 추진상황 ❍ ‘16. 08. 17. : 실안관광지 장기미집행예산 집행계획 보고 ❍ ‘17. 01. 26. : 실시설계용역 완료 ◇ 향후계획 ❍ ‘17. 04. : 실시계획인가 및 보상협의 ❍ ‘17. 05. : 공사 착공 ❍ ‘17. 12. : 공사 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	체육지원과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 신현경(831-2400) 담 당 : 시설6급 한윤철(831-2417) 담당자 : 시설8급 노범석(831-2415)
③ 정책사업명	용현 생활체육시설 조성사업
④ 선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤ 사업기간		2015~2020
⑥ 주요내용	○ 추진배경 - 신촌체육공원 부지가 종포일반산업단지 조성사업 부지로 전환되어 대체 체육시설 조성 필요 - 생활체육시설 확충으로 시민의 건강증진 및 여가선용 공간 제공 ○ 추진기간 : 2015. 2. ~ 2020. 12. ○ 총사업비 : 8,500백만원 ○ 주요내용 - 축구장, 육상트랙 등 소규모 운동장 1식 - 족구장 및 부대시설 1식

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	재난안전과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 이종주(831-3300) 담 당 : 시설6급 김진윤(831-3319) 담당자 : 시설8급 조광래(831-3315)
③ 정책사업명	예동 재해위험지구 정비사업
④ 선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤ 사업기간		2013 ~ 2017
⑥ 주요내용	1. 추진배경 - 저지대의 주택지 및 농경지 침수에 따른 인명과 재산 피해 예방을 위함 2. 위 치 : 사천시 축동면 사다리 예동마을 일원 3. 추진기간 : 2013 ~ 2017 4. 사 업 량 - 하천개수공사 L=850.0m, 교량설치 N=4개소 - 침수주택이주 9가구 5. 총사업비 : 6,394백만원(국비 3,247, 도비 3,147) 6. 주요내용 - 토지보상 및 침수주택이주(9가구) - 하천개수 공사 L=850.0m 7. 추진경과 - 2012. 04. 14 : 재해위험지구 지정고시 - 2013. 01. : 신규사업 확정 - 2013. 04. 26 : 예동 재해위험지구 실시설계용역 착수 - 2013. 07. : 주민의견 수렴 및 설명회 개최 - 2013. 11. 18 : 소방방재청 실시설계 사전검토(1차) - 2014. 05. 03 : 소방방재청 실시설계 사전검토(2차) - 2015. 03. 13 : 사전검토 위원 의견 조치계획 제출 - 2016. 01. 28 : 소규모 환경영향평가 협의(낙동강유역 환경청) - 2016. 06. 29 : 경상남도 계약심사 의뢰 - 2016. 08 : 토지 및 지장물 보상 완료(총57필지) - 2016. 09. 07 : 총괄분 및 2016년분 착공 - 2017. 02. 20 : 2017년분 착공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	재난안전과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 이종주(831-3300) 담 당 : 시설6급 김진윤(831-3319) 담당자 : 시설8급 백근태(831-3316)
③ 정책사업명	노산공원 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
④ 선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤ 사업기간		2017 ~ 2018
⑥ 주요내용	1. 추진배경 - 절리면 풍화로 인한 낙석 및 붕락의 위험으로부터 인명과 재산피해 예방 2. 위 치 : 사천시 서금동 노산공원 일원 3. 추진기간 : 2017 ~ 2018 4. 사 업 량 - 계단식 옹벽 설치 : L=55.0m, H=14.0m - 영구앵커 및 난간설치, 수목제거 등 - 붕괴위험지역 내 위험주택 이주(3가구) 5. 총사업비 : 2,296백만원(국 1,148, 도 344, 시 804) 6. 주요내용 - 붕괴위험지역 내 주택이주(3가구), 보상 및 사업추진 7. 추진경과 - 2016. 06. 17 : 급경사지 붕괴위험지역 지정고시 - 2016. 07. 20 : 정밀안전진단 용역 실시 - 2017. 10. 14 : 정밀안전진단 용역 완료 - 2016. 10. 13 : 신규사업 확정 - 2017. 01. 13 : 실시설계용역 착수 - 2017. 02. 14 : 토지 및 지장물 감정평가 - ~ 현재 : 보상협의 중

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서

해양수산과

② 담당자

(전화번호)

부서장 : 해양수산5급 김연옥(831-3100)

담 당 : 해양수산6급 김용관(831-3129)

담당자 : 시설6급 성재권(831-3126)

③ 정책사업명

선진~신촌간 연안정비사업

④ 선정기준

총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업

⑤ 사업기간

2010~2020

⑥ 주요내용

○ 추진배경

- 연안정비 기본계획에 의한 중장기계획사업이며,

- 자연 환경 및 관광자원과 연계한 해양관광시설 및 이용객의 친수시설을 조성하여 어민 소득 증대는 물론 지역경제 활성화 할 수 있는 친수공간으로 개발토록 하는 사업

○ 사업개요

- 위    치  : 사천시 용현면 선진리~신촌리 일원

- 사업기간  : 2010 ~ 2020 (11년간)

- 사업내용  : 친수호안 조성 등 연안정비

· 선진리 지구 : 수변공원 21,016m2, 축제의거리 461m, 물양장 65m

· 신촌리 지구 : 친수호안도로 1,447m, 해안도로 확․포장 330m

- 총 사업비 : 22,810백만원

- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2015년 까지	2016년	2017년	2018 이후
계	22,810	8,114	1,538	286	12,872
국비(지특)	15,967	5,680	1,080	200	9,007
도 비	2,053	617	138	26	1,272
시 비	4,790	1,817	320	60	2,593
기 타	-	-	-	-	-

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서

해양수산과

② 담당자

(전화번호)

부서장 : 해양수산5급 김연옥(831-3100)

담 당 : 해양수산6급 박종석(831-3139)

담당자 : 해양수산7급 이상은(831-3135)

③ 정책사업명

사천 남일대 명승지 주변 정비사업

④ 선정기준

총사업비 10억원 이상의

건설 및 개발사업

⑤ 사업기간

2015 ~ 2018

⑥ 주요내용

○ 추진배경

- 사천8경 중 하나인 남일대를 주변 경관과 걸맞게 정비함으로써 시민과 관광객들에게 휴식공간 제공

- 남일대의 관광 명소화를 통한 관관객 유치로 지역민 소득증대 및 지역경제 활성화 추진

○ 사업개요

- 위    치  : 사천시 향촌동 남일대해수욕장 일원

- 사업기간  : 2015 ~ 2018 (4년간)

- 사업내용  : 관광자원 개발

· 건물(행정봉사실, 화장실) 리모델링, 테마산책로, 유물전시관        진입로 개설 및 코끼리바위 앞 스카이워크 등

- 총 사업비 : 3,800백만원

- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2015년 까지	2016년	2017년	2018 이후
계	3,800	1,000	1,000	-	1,800
국비(지특)	1,900	500	500	-	900
도 비	570	150	150	-	270
시 비	1,330	350	350	-	630
기 타	-	-

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	건축과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 시설5급 최인수(831-3200) 담 당 : 행정6급 황대성(831-3214) 담당자 : 시설7급 김용준(831-3211)
③ 정책사업명	직장어린이집 및 편의시설 공사
④ 선정기준	10억 이상 대규모 건축공사		⑤ 사업기간		2015. 8. ~ 2017. 12.
⑥ 주요내용	○ 추진목적 - 직원 자녀의 질 높은 교육과 우수한 보육서비스 제공을 위해 사천시청 행정동 피로티층을 증축하여 1층에 직장어린이집, 2층에 주민편의시설 설치 ○ 시행근거 : 영유아보육법 제14조(직장어린이집의 설치 등) ○ 총사업비 : 2,830백만원(시비 2,830) ○ 사업위치 : 사천시 용현면 시청로 77 (청사부지 내 행정동 피로티 층) ○ 사 업 량 - 연면적 : 1,316㎡(1층 직장어린이집 581㎡, 2층 주민편의시설 735㎡)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설 5급 채영석 (831-3350) 담 당 : 시설6급 유재기 (831-3379) 담당자 : 시설8급 이종진 (831-3377)
③정책사업명	국도3호선 송포교차로 개선사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2014. 1. ~ 2017. 9.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 국도3호선 상습정체구간 및 도로병목지점 개선으로 교통사고 예방 및 진출․입로 개선으로 지역경제 활성화와 산업물동량 수송원활 도모 2. 추진기간 : 2014. 1. ~ 2017. 9. 3. 총사업비 : 8,000백만원(국비 5,000 시비 3,000) 4. 주요내용 - 위 치 : 송포동 송포교차로(국도3호선) - 사업개요 : 교차로 개선 L=950m, B=10m, 교량 설치 L=50m, B=20.9m - 수 급 자 : 관보토건(주) 대표 김상우 - 건설사업관리용역자 : (주)진우엔지니어링코리아 대표 양현 외 1개사 - 현 공 정 : 70% 5. 추진경과 - ’13. 12. 12. : 부산지방국토관리청과 대행공사 협약 체결 - ’14. 4. 9. ~ ’15. 05. 18. : 실시설계용역 - ’15. 5. 21. : 도로구역 결정(변경) - ’15. 6. 19. : 총괄분 및 2015년분 착공 - ’16. 3. 28. : 2016년분 착공 - ’16. 10. 23. : 2015년분 준공 - ’17. 4. 3. : 2017년분 착공 - ’17. 5월 : 2016년분 준공예정 - ’17. 8월 : 총괄분 및 2017년분 준공예정

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 채영석 (831-3350) 담 당 : 시설6급 박영수 (831-2289) 담당자 : 시설6급 조현범 (831-2285)
③정책사업명	사천바다 케이블카 설치사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2015. 12 ~ 2018. 1
⑥주요내용	1. 사업목적 - 한려해상국립공원에 위치한 천혜의 섬, 바다, 다리를 조망할 수 있는 특화된 해상 케이블카 설치로 지역경제 활성화 2. 사업개요 - 위 치 : 사천시 동서동 일원 - 사업규모 : 삭도 L=2.43Km, 상․중․하부정류장 각 1개소 - 사 업 비 : 60,000백만원(국비 5,000 도비 10,000 시비 45,000) - 사업기간 : 2015. 12. ~ 2018. 1. - 시 행 자 : 사천시장 3. 추진사항 - '12. 06. : 공원계획변경 승인 및 삭도시범사업 선정(환경부) - '13. 10. : 지방재정 중앙 투․융자 심사 승인(조건부) - '15. 07. : 도시관리계획(도시계획시설-궤도) 결정(변경) - '15. 11. : 환경영향평가 협의 완료 및 공원사업시행허가 - '15. 12. : 실시계획 인가 및 공사착공 - '16. 05. : 삭도외자 물품계약 - '17. 03. : 정류장 3개소 삭도 기초콘크리트 타설 4. 향후계획 - '17. 04. : 공사 및 감리진행 - '18. 01. : 공사준공 및 시운전

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 채영석(831-3350) 담 당 : 시설6급 박영수(831-2289) 담당자 : 시설8급 류호철(831-2288)
③정책사업명	초양도 관광거점 마을 만들기
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2015. 6. ~ 2018. 6
⑥주요내용	1. 사업목적 - 해상케이블카 중간 역사인 초양도에 케이블카와 연계한 편의시설 및 해양친수 관광거점마을 조성 필요 2. 사업개요 - 위 치 : 사천시 동서동 일원(초양도) - 사업규모 : 물양장 확장, 부둣가 도막형 포장, 초양쉼터, 섬꽃․장미원, 전망시설, 보행육교, 흙포장 등 - 사 업 비 : 4,850백만원(도비 2,425 시비 2,425) - 사업기간 : 2015. 6. ~ 2018. 6 - 시 행 자 : 사천시장 3. 추진사항 - '12. 10. : 지역균형발전 사업 발굴계획 수립 - '13. 01. : 지역균형발전사업 수정심의 채택 - '13. 03. : 사천시 지방재정 투․융자 심사 완료 - '14. 05. : 실시설계 및 국립공원계획변경 용역 시행 - '15. 05. : 실시설계 완료 - '15. 06. : 공사착공(전체분, 1차분) - '16. 09. : 1차분 공사준공 및 2차분 공사착공 - '17. 03. : 3차분 공사착공 4. 향후계획 - '18. 06. : 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 채영석(831-3350) 담 당 : 시설6급 박영수 (831-2289) 담당자 : 시설6급 조현범 (831-2285)
③정책사업명	사천대방 관광자원 개발사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2016. 9 ~ 2018. 5.
⑥주요내용	1. 사업목적 - 전국에서 가장아름다운 길 대상에 선정된 삼천포 대교를 찾는 관광객의 관광자원 개발을 통한 관광인프라 구축 2. 사업개요 - 위 치 : 사천시 동서동 일원(대방동) - 사 업 량 : A=12,570㎡(도로 및 광장, 휴양시설, 편익시설, 녹지 및 기타) - 사 업 비 : 14,040백만원(국비 4,400 도비 2,320 시비 7,320) - 사업기간 : 2016. 9. ~ 2018. 5. - 시 행 자 : 사천시장 3. 추진사항 - '12. 11. : 중간역사 타당성검토 및 교통 영향분석 용역발주 - '13. 06. : 중간역사 설치를 위한 환경부 협의 - '13. 12. : 도시계획시설(공원)결정 및 지형도면 승인 고시 - '14. 03. : 조성계획 실시설계 용역시행 - '14. 07. : 지방재정 투융자 경남도 승인 - '16. 08. : 공원조성계획 결정 및 실시계획 인가 - '16. 09. : 공사착공(전체분, 1차분) - '16. 11. : 2차분 공사착공 - '17. 01. : 3차분 공사착공 4. 향후계획 - '18. 05. : 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 채영석(831-3350) 담 당 : 시설6급 이기영(831-2294) 담당자 : 시설7급 최호준(831-2290)
③정책사업명	자혜교차로 연결도로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2009. 1. ~ 2017. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대 2. 추진기간 : 2009. 1. ~ 2017. 12. 3. 총사업비 : 2,000백만원(시비 2,000) 4. 주요내용 - 위 치 : 서포면 자혜리 지내(농어촌도로 서포104, 205호선) - 사업개요 : 도로 확․포장 L=0.875km, B=7.0~10.0m - 수 급 자 : 성산종합건설(주) 대표이사 성재현 - 현 공 정 : 80% 5. 추진경과 - '08. 10월 : 중기재정계획 반영 - '08. 10. 10. : 투․융자심사 적정 - '09. 1. ~ '12. 12. : 토지보상 - '13. 5. : 장기계속공사 착공 - '13. 5. ~ '14. 5. : 2013년분 공사 - '14. 3. ~ '15. 3. : 2014년분 공사 - '15. 3. ~ '15. 11. : 2015년분 공사 - '16. 1. ~ '16. 12. : 2016년분 공사 - '17. 3. ~ '17. 12. : 2017년분 공사 추진 - '17. 12. : 장기계속공사 준공 예정

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 채영석(831-3350) 담 당 : 시설6급 이기영(831-2294) 담당자 : 시설7급 최호준(831-2290)
③정책사업명	포곡마을 진입로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2017. 1. ~ 2019. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대 2. 추진기간 : 2016. 1. ~ 2019. 12. 3. 총사업비 : 1,300백만원(시비 1,300) 4. 주요내용 - 위 치 : 곤양면 송전리 지내(농어촌도로 곤양202호선) - 사업개요 : 도로 확․포장 L=0.843km, B=8.0m 5. 추진경과 - '16. 6월 : 실시설계완료 - '17. 1월 ~ '17. 12월 : 토지보상

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 채영석(831-3350) 담 당 : 시설6급 이기영(831-2294) 담당자 : 시설7급 최호준(831-2290)
③정책사업명	사촌~대산간 도로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2016. 1. ~ 2019. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대 2. 추진기간 : 2016. 1. ~ 2019. 12. 3. 총사업비 : 1,500백만원(시비 1,500) 4. 주요내용 - 위 치 : 사남면 사촌리 지내(농어촌도로 사남206호선) - 사업개요 : 도로 확․포장 L=1.1km, B=6.0m 5. 추진경과 - '16. 12월 : 실시설계완료 - '17. 1월 ~ '17. 12월 : 토지보상

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역개발과	②담당자 (연락처)		부서장 : 행정5급 이상석(831-3230) 담 당 : 시설6급 강민구(831-3244) 담당자 : 시설6급 장경현(831-3240)
③정책사업명	곤양면소재지 종합정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2014. 1. ~ 2018. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 농촌의 쾌적한 생활환경 조성으로 기초생활 및 문화수준 향상, 농촌 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모 2. 추진기간 : 2014. 1. ~ 2018. 12. 3. 총사업비 : 6,500백만원(국비 4,550 도비 584.7 시비 1365.3) 4. 주요내용 - 위 치 : 곤양면 성내리 외 1개리 일원 - 사업개요 : 화초골 도시계획도로 L=116m B=6m, 소규모 주차장 및 쉼터 3개소, 마을회관 리모델링 1식, 면사무소 앞 가로경관정비 L=229, B=8m, 곤양천 수변산책로 조성 L=2.83km B=3.5m, 가로경관정비 L=550m, 남문 상징조형물 1식, 지역역량강화사업 1식(리더교육, 주민컨설팅 등) - 현 공 정 : 20% 5. 추진경과 - ′13. 4. 10. : 사업계획서 심의(농림축산식품부) - ′13. 7. 24. : 신규사업 선정 - ′15. 1. 15. : 기본계획 승인 - ′16. 12. 26. : 시행계획 승인 - ′17. 3. : 공사 착공 6. 추진계획 - ′18. 12. 31. : 사업완료

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역개발과	②담당자 (연락처)		부서장 : 행정5급 이상석(831-3230) 담 당 : 시설6급 강민구(831-3244) 담당자 : 시설6급 장경현(831-3240)
③정책사업명	곤명면소재지 종합정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2016. 1. ~ 2020. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 농촌의 쾌적한 생활환경 조성으로 기초생활 및 문화수준 향상, 농촌 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모 2. 추진기간 : 2016. 1. ~ 2020. 12. 3. 총사업비 : 5,400백만원(국비 3,780 도비 486 시비 1,134) 4. 주요내용 - 위 치 : 곤명면 봉계리 외 1개리 일원 - 사업개요 : 다솔문화센터 조성A=1,600㎡, 녹차공원조성 A=1,300㎡, 공동생활 홈 조성 A=80㎡, 배후마을 연결도로 정비 L=270m B=4m, 김동리 산책로 정비 L=830m B=2m, 중심가로 경관정비 L=330m B=2m, 봉명로 경관도로 조성 L=320m, 생태하천정비 L=1,400m, 지역역량강화 사업 추진(리더교육, 주민컨설팅 등) - 현 공 정 : 10% 5. 추진경과 - ′15. 3. 27. : 사업계획서 심의(농림축산식품부) - ′15. 9. 18. : 신규사업 선정 - ′17. 3. 16. : 기본계획 승인 - ′17. 3. 17. : 시행계획 발주 6. 추진계획 - ′17. 10. : 시행계획 승인 및 공사발주 - ′20. 12. 31. : 사업완료

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역개발과	②담당자 (연락처)		부서장 : 행정5급 이상석(831-3230) 담 당 : 시설6급 강민구(831-3244) 담당자 : 시설7급 이덕수(831-3241)
③정책사업명	용현권역단위 종합개발사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2013. 1. ~ 2017. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 농촌의 쾌적한 생활환경 조성으로 기초생활 및 문화수준 향상, 농촌 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모 2. 추진기간 : 2013. 1. ~ 2017. 12. 3. 총사업비 : 4,500백만원(국비 3,150 도비 405 시비 945) 4. 주요내용 - 위 치 : 용현면 송지리 외 2개리 일원 - 사업개요 : 한뜰문화교류센터 건립, CCTV설치 18개소 설치, 태양광설비 5개소, 해안도로 경관개선 L=3.0km, 지역역량강화 사업 추진(리더교육, 권역 컨설팅 등) - 현 공 정 : 85% 5. 추진경과 - ′13. 12. 18. : 기본계획 승인 - ′14. 9. 29. : 시행계획 용역 발주 - ′14. 11. 27. : 공사 계약 및 착수 - ′16. 12. : 한뜰문화교류센터, CCTV설치, 태양광설비 등 완료 6. 추진계획 - ′17. 8. : 마을쉼터 조성 - ′17. 12. 31. : 사업완료

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역개발과	②담당자 (연락처)		부서장 : 행정5급 이상석(831-3230) 담 당 : 시설6급 강민구(831-3244) 담당자 : 시설7급 이덕수(831-3241)
③정책사업명	상남권역단위 종합개발사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2013. 1. ~ 2017. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 농촌의 쾌적한 생활환경 조성으로 기초생활 및 문화수준 향상, 농촌 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모 2. 추진기간 : 2013. 1. ~ 2017. 12. 3. 총사업비 : 4,900백만원(국비 3,430 도비 441.1 시비 1028.9) 4. 주요내용 - 위 치 : 사남면 우천리 외 4개리 일원 - 사업개요 : 와룡교류센터 293㎡, 마을회관 신축 및 리모델링 4개소, 사촌마을 진입로 정비 300m, 계양마을 안길정비 50m, 마을숲 정비 5개소, 마을 소공원 조성 1개소, 지역역량강화 사업 추진(리더교육, 권역 컨설팅 등) - 현 공 정 : 55% 5. 추진경과 - ′13. 12. 18. : 기본계획 승인 - ′14. 12. 11. : 시행계획 용역 발주 - ′15. 1. 20. : 공사 계약 및 착수 - ′16. 12. : 와룡교류센터 건립, 보상협의 추진 6. 추진계획 - ′17. 3.~ : 보상협의 계속 추진, 숲정비 계속추진 - ′17. 12. 31. : 사업완료

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역개발과	②담당자 (연락처)		부서장 : 행정5급 이상석(831-3230) 담 당 : 시설6급 강민구(831-3244) 담당자 : 시설7급 이덕수(831-3241)
③정책사업명	정동권역 창조적마을만들기사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2015. 1. ~ 2019. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 농촌의 쾌적한 생활환경 조성으로 기초생활 및 문화수준 향상, 농촌 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모 2. 추진기간 : 2015. 1. ~ 2019. 12. 3. 총사업비 : 3,286백만원(국비 2,300 도비 296 시비 690) 4. 주요내용 - 위 치 : 정동면 고읍리 외 2개리 일원 - 사업개요 : 정동권역교류센터조성 1개소, 마을공동주차장 조성 A=321㎡, 수청마을숲 정비 A=1,328㎡, 사천강변 제방길 경관정비 L=1.86km, 예수마을 쉼터 조성 A=594㎡, 예수둘레길 조성 L=830m, 지역역량강화 사업 추진(리더교육, 권역 컨설팅 등) - 현 공 정 : 15% 5. 추진경과 - ′14. 4. 10. : 사업계획서 심의(농림축산식품부) - ′14. 10. 15. : 신규사업 선정 - ′16. 12. 29. : 기본계획 승인 - ′17. 3. : 시행계획 용역 착수 6. 추진계획 - ′17. 8. : 시행계획 승인 및 공사 발주 - ′19. 12. 31. : 사업완료

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역개발과	②담당자 (연락처)		부서장 : 행정5급 이상석(831-3230) 담 당 : 시설6급 강민구(831-3244) 담당자 : 시설7급 이정훈(831-3242)
③정책사업명	송포마을 권역단위 종합정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2014. 1. ~ 2018. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 송포권역의 해양자원, 경관자원, 농·어업자원, 문화·관광자원 등을 활용하여 기초생활기반확충, 지역소득증대, 경관개선, 지역역량강화를 통해 지역의 삶의 질 향상과 공동체 활성화 도모 2. 추진기간 : 2014. 1. ~ 2018. 12. 3. 총사업비 : 3,374백만원(지특 2,362, 도비 304, 시비 708), 자부담 195백만원 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 대방동, 실안동 일원 - 사업개요 : 두드림활성화센터 조성(건축연면적 253.8㎡) 수산자원조성 기초시설 1개소(인공어초용 사석투하 2,000㎥) 노을쉼터 경관정비(A=554㎡), 실안산책로 정비(L=1,000m, B=3m) 경관도로 조성(L=800m, B=8m), 대방어촌체험장 조성 (어촌체험시설 5개소) 지역역량강화 용역 1식 - 현 공 정 : 30% 5. 추진경과 - ’15. 8. 31. : 기본계획 수립·고시 - ’17. 1. 19. : 시행계획 수립·고시 - ’17. 3. : 공사 발주 6. 추진계획 - ’18. 12. : 사업 완료

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역개발과	②담당자 (연락처)		부서장 : 행정5급 이상석(831-3230) 담 당 : 시설6급 강민구(831-3244) 담당자 : 시설7급 이정훈(831-3242)
③정책사업명	사남면 농촌 중심지 활성화 사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2014. 1. ~ 2018. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 사남면 농촌중심지 활성화 사업을 통해 문화·예술 거점공간과 주민화합 활동공간을 마련, 마을 간 지역격차를 해소하고 중심지–배후마을 간 교류 및 지속가능한 사남면 중심지를 조성하고 함 2. 추진기간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.(4년간) 3. 총사업비 : 5,950백만원(지특 4,165, 도비 535.5 시비 1,249.5) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 사남면 죽천리, 화전리 일원 - 사업개요 : 문화복지센터 조성(연면적 660㎡), 교통 ICT 확충사업 조성 1식, 공동생활홈 조성 1식, 사계절 게이트볼장 1개소, 보행자 중심도로정비 L=920m, 중심가로 간판정비 1식, 수변산책로 정비 1,200㎡, 지역역량강화용역(안전지킴이 프로그램, 교육프로그램, 주민복지프로그램 등) 1식 - 현 공 정 : 10% 5. 추진경과 - ’16. 1. 15. : 농촌 중심지 활성화 사업 신청 - ’16. 9. 6. : 2017년 일반농산어촌개발 신규사업 선정 - ’17. 3. 23. : 기본 및 경관계획 수립 용역 착수 6. 추진계획 - ’17. 10. : 기본계획 수립·고시 - ’18. 5. : 시행계획 수립·고시 - ’20. 12. : 사업완료

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역개발과	②담당자 (연락처)		부서장 : 행정5급 이상석(831-3230) 담 당 : 시설6급 강민구(831-3244) 담당자 : 시설6급 장경현(831-3240)
③정책사업명	사천읍 농촌 중심지 활성화 사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2017. 1. ~ 2020. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 지역내 산재한 다양한 역사·문화, 관광자원들과 교육·문화·예술분야의 인적자원을 연계하여 매력적인 사천읍 조성 2. 추진기간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.(4년간) 3. 총사업비 : 8,000백만원(지특 5,600, 도비 720 시비 1,680) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 사천읍 일원 - 사업개요 : 상인활력센터 연면적 2,640㎡, 두레장터 1,346㎡, 다문화통합지원센터 조성 연면적 862㎡, 사천읍시장 가로환경정비 1식, 걷고싶은 시장길 조성 1식, 수양공원 범죄예방 정비, 지역역량강화 용역(중심상권활성화, 다문화 사회참여, 시장쓰레기 분리수거, 안전지킴이, 행복드림카 시범운영 2대, 나눔실버보행기 시범운영, 마을정원사, 스마트 두레공동체, 두꺼비 하우징, 문화공동제 활성화) 1식 5. 추진경과 - ’16. 1. 15. : 농촌 중심지 활성화 사업 신청 - ’16. 9. 6. : 2017년 일반농산어촌개발 신규사업 선정 - ’17. 3. 30. : 기본계획 수립 용역 착수 6. 추진계획 - ’20. 12. : 사업완료

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역개발과	②담당자 (연락처)		부서장 : 행정5급 이상석(831-3230) 담 당 : 시설6급 강민구(831-3244) 담당자 : 시설7급 이덕수(831-3241)
③정책사업명	정동 소곡 금자정 창조적 마을 만들기 사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2017. 1. ~ 2018. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 마을 자원 및 기반시설을 활용한 사업으로서 기존시설을 활용도를 극대화하고, 역사·문화·자연 자원의 특화를 통한 마을 주민 삶의 질 개선 2. 추진기간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.(3년간) 3. 총사업비 : 1,000백만원(지특 700, 도비 90 시비 210) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 정동면 소곡리 일원 - 사업개요 : 소곡문화마당 조성 500㎡, 교통환경 개선 1식, 공동생활홈 조성 1식, 소곡유원지 환경정비 2,600㎡, 주민화합 수변공원 조성 4,800㎡, 지역역량강화 1식 5. 추진경과 - ’16. 1. 15. : 농촌 중심지 활성화 사업 신청 - ’16. 9. 6. : 2017년 일반농산어촌개발 신규사업 선정 - ’17. 2. 14. : 기본 및 시행계획 수립 용역 착수 6. 추진계획 - ’18. 12. : 사업완료

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	지역개발과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 이상석(831-3230) 담 당 : 시설6급 양재규(831-3249) 담당자 : 시설7급 윤현찬(831-3245)
③ 정책사업명	사천IC일원 복합유통상업단지 조성사업
④ 선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤ 사업기간		2015 ~ 2018
⑥ 주요내용	1. 사업목적 - 사천IC일원 폐 고속도로 부지에 복합유통상업단지를 조성함으로써 서부경남 산업단지 개발 및 상업·물류 인프라 수요증가에 대비하고 지역경기 부양거점 확보 2. 추진기간 : 2015. ~ 2018. 3. 총사업비 : 900여억원(민·관 합동개발) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 축동면 사다리 87 일원(사천IC 주변) - 사업개요 : 복합유통상업단지 조성(270,097㎡) - 시 행 자 : 사천IC도시개발주식회사 5. 추진경과 - ‘15. 06. : 사천IC일원 복합유통상업단지 검토 보고[사업변경] - ‘15. 07. : 주요 정책토론회 개최 [개발방식 결정] - ‘15. 11. 19. : 민간사업자 공모 공고 - ‘15. 12. 31. : 선정심의위원회 개최 및 우선협상대상자 선정 - ‘16. 02. 18. : 투자협약서 체결 - ‘16. 03. 16. : 특수목적법인 출자 승인(안) - ‘16. 06. 29. : 특수목적법인(SPC) 설립 등기 완료 - ‘16. 07. 11. : 전략환경영향평가 환경영양평가협의회 구성 - ‘16. 08. 11. : 구역 지정 및 개발계획 수립을 위한 사전협의 - ‘17. 02. 08. : 도시개발구역 지정 제안 수용결정 통보 6. 추진계획 - `17. 03 ~ `17. 06 : 각종 행정절차 이행 - `17. 07 ~ `18. 12 : 공사 착공 및 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	지역개발과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 이상석(831-3230) 담 당 : 시설6급 양재규(831-3249) 담당자 : 시설7급 윤현찬(831-3245)
③ 정책사업명	삼천포 구역사주변 도시개발사업
④ 선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤ 사업기간		2012 ~ 2017
⑥ 주요내용	1. 사업목적 - 삼천포구역사부지의 계획적이고 체계적인 도시개발을 위해 토지의 이용 및 난개발 방지로 상업 중심지로서의 이미지 제고 2. 추진기간 : 2012 ~ 2017 3. 총사업비 : 9,000백만원(공영개발) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 동금동 151-5번지 일원 - 사업개요 : 기반시설 확충 및 상업부지 개발(25,374㎡) 5. 추진경과 - `16. 06. : 사업변경 추진계획 보고(도시개발사업→대지조성사업) - `16. 08. : 관련부서 협의 보완 및 조치계획 수립 - `16. 09. : 대지조성사업 승인·고시 - `16. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 인가 - `17. 01. 03 : 국토부 토지 18필지 용도폐지 - `17. 01. 06 : 지방채 발행(도 지역개발기금, 73억원) - `17. 01. 17 : 공유재산관리계획(처분) 시의회 의결 - `17. 01. 25 : 도유재산 9필지(9,310㎡) 매입완료 6. 추진계획 - `17. 04월 : 국유지(기재부, 국토부)매입(한국자산관리공사→사천시) - `17. 04월~5월 : 분양 기본 구상을 위한 용역 추진 - `17. 05월 : 조성원가 산정 및 분양공고문 작성 - `17. 06월 : 분양공고(시 홈폐이지 등, 14일간) 및 사업자 선정

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	지역개발과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 이상석(831-3230) 담 당 : 시설6급 양재규(831-3249) 담당자 : 시설8급 김진우(831-3246)
③ 정책사업명	신수도 바다마을 쉼터조성
④ 선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤ 사업기간		2011 ~ 2017
⑥ 주요내용	1. 사업목적 - 관광·체험 등 종합관광휴양섬 개발로 주민소득 창출 및 자연환경 활용으로 사계절 생태관광 섬으로 육성 2. 추진기간 : 2011 ~ 2017 3. 총사업비 : 4,409백만원(국비 3,528 도비 423.5 시비 457.5) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 동서동 신수도 일원 - 사업개요 : 복합문화터미널 1동, 힐링공원 30,000㎡, 캠핑장1개소, 탐방로조성 0.95km, 트레킹코스설치 5.5km 5. 추진경과 - ‘12. 05. : 생태공원 및 야영장 착공 - ‘14. 02. : 복합문화터미널 준공 - ‘14. 08. : 생태공원 및 야영장 준공 - ‘15. 06. : 소득증대사업 추진불가에 따른 대체사업 선정 - ‘15. 07. : 사업계획변경 승인(행자부) - ‘15. 10. : 실시설계 용역 발주 - ‘16. 06. : 용역완료 및 탐방로 등 개설공사 발주 - ‘16. 07. ~ : 탐방로 보상협의 추진 6. 추진계획 - `17. 04. : 야영장 시설설치공사 착공 - `17. 06. : 야영장 시설 설치공사 준공 - `17. 11. : 탐방로 등 개설공사 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	지역개발과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 이상석(831-3230) 담 당 : 시설6급 양재규(831-3249) 담당자 : 시설7급 윤현찬(831-3245)
③ 정책사업명	신수도 도서종합개발사업 공원계획 변경 및 도시관리계획 결정(변경)용역
④ 선정기준	1억원 이상의 용역사업		⑤ 사업기간		`17.03. ~ `17.12.
⑥ 주요내용	1. 사업목적 - 신수도 도서종합개발사업 추진을 위한 한려해상 국립공원계획 변경 및 도시관리계획 결정용역 추진 2. 추진기간 : 2017.3 ~ 2017.12 3. 총사업비 : 200백만원(국비 160 도비 20 시비 20) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 신수도 일원 - 사업개요 : 공원조성계획 변경, 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 1식 5. 추진경과 - `17. 02. : 신수도 도서종합개발사업 추진계획 보고 - `17. 03. 24 : 용역 시행 - `17. 03. 29 : 계약심사 의뢰 6. 추진계획 - `17. 04월 : 업체선정 및 용역 추진 - `17. 12월 : 용역 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	우주항공과	② 담당자 (전화번호)		부서장 : 시설5급 최 일(831-3490) 담 당 : 시설6급 이주은(831-3479) 담당자 : 시설7급 이상선(831-3475)
③ 정책사업명	종포일반산업단지 조성
④ 선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤ 사업기간		2014 ~ 2017
⑥ 주요내용	1. 추진배경 - 적기에 산업용지 공급 및 미래성장동력 산업 육성 2. 위 치 : 사천시 용현면 신촌리 432-24번지 일원 3. 추진기간 : 2014 ~ 2017 4. 사 업 량 : 산업단지조성 1식 A=376,125㎡ 5. 총사업비 : 63,000백만원 6. 주요내용 - 산업단지계획수립용역, 토지 및 지장물 보상, 산업단지 조성 공사 7. 추진경과 - 2013. 08. 22 : 투자의향서 타당성검토 결과통보(경남도→사천시) - 2013. 11. 04 : 산업단지지정 승인 신청(종포산단→경상남도) - 2013. 12. : 중기지방재정계획 - 2014. 01. 08 : 지방재정 투․융자 심사(안전행정부) - 2014. 04. 24 : 산업단지 승인 고시(경상남도) - 2014. 05. 29 : 사업시행자 변경 고시 : 종포산단개발(주)→사천시 - 2014. 10. 02 : 폐수처리관리기본계획 변경 승인(낙동강유역환경청) - 2014. 11. 24 : 착공(디에치건설, 동원건설산업, 서우건영) - 2014. 12. 23 : 기공식 - 2015. 01. 27 : 경상남도지방토지수용위원회 개최 - 2015. 06. 18 : 종포일반산업단지 계획(변경) 심의위원회 개최 - 2015. 07. 30 : 종포일반산업단지 계획(변경) 승인·고시 - 2016. 1. ~ 2017. 2. : 종포산단 분양 (산업시설 11필지 253,306㎡, 지원시설 1필지 13,563㎡)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	산업단지과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 강효정(831-3450) 담 당 : 시설6급 허원권(831-3469) 담당자 : 시설8급 임지은(831-3467)
③정책사업명	향촌2지구 일반산업단지 조성사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2015 ~ 2018
⑥주요내용	1. 추진배경 □ 필 요 성 - 사천시 관내 해안주변에 산재되어 있는 소형조선소로 인하여 도시 주거환경 저해 및 기름유출로 인하여 해양환경이 파괴되고 있는 실정으로, 이들 소규모 영세조선소를 한 장소로 집단화하여 경쟁력 제고, 지역경제 활성화, 해양환경 보존 그리고 쾌적한 도시환경을 구축하고자 산업단지를 조성함. □ 사업개요 - 위 치 : 사천시 사등동 산34지선 - 면 적 : 77,441㎡(23,466평, 공유수면) - 사업기간 : 2015년 ~ 2018년 - 개발방법 : 공영개발(사천시) - 유치업종 : 조선시설용지(소형수리조선) 2. 추진사항 - '09. 07. 09 : 소형조선소 이전에 따른 대체부지 조성건의 - '11. 07. 29 : 제3차 공유수면매립 기본계획 반영 확정(산업단지 A=70,933㎡, 국토해양부) - '15. 01. : 2015년 예산 편성(시비 : 15억원) - '15. 02. 27 : 입주확약서 접수(제일조선소, 삼선조선소, 해원조선소) - '15. 04. : 향촌2지구 산업단지 전략환경영향평가 용역 외 3건 착수 - '15. 05. 11 : 제3차 공유수면매립 기본계획 반영요청(진입도로 A=6,508㎡) - '16. 01. : 2016년 예산 편성(30억원 : 시비 10억원, 지방채 20억원) - '16. 01. 21 : 2016년 산업단지 지정계획 반영(국토교통부) - ‘16. 04. 14 : 제3차 공유수면매립 기본계획 반영예정지 - ‘16. 06. 15 : 한국환경정책 ·평가연구원(KEI)현장조사 - ‘16. 07. 01 : 전략환경영향평가서(초안) 협의내용 회신(낙동강유역환경청-조건부동의) - ‘16. 07. 21 : 2016년도 제4회 지방산업단지계획심의위원회 개최 (산업단지 A=70,933㎡→62,153㎡) -‘16. 07. 25 : 지방산업단지계획심의위원회 심의결과 통보 (경상남도→사천시/산업단지 A=70,933㎡→62,153㎡) -‘16. 09. 29 : 제3차 공유수면매립 기본계획 반영(진입도로 A=6,508㎡) -‘16. 12. 16 : 제11회 경상남도 지방건설기술심의 조건부 가결(실시설계 적정성)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	산업단지과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 강효정(831-3450) 담 당 : 시설6급 허원권(831-3469) 담당자 : 시설7급 정광복(831-3465)
③정책사업명	용당(MRO)산업단지 조성사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2015 ~ 2020
⑥주요내용	1. 추진배경 □ 필 요 성 - 항공선도기업인 KAI 1·2공장이 인접한 지역에 항공 MRO 및 생산단지조성으로 연구개발·생산·MRO가 일괄된 복합항공산업 클러스터로 발전 □ 사업개요 - 위 치 : 사천시 사천읍 용당리 일원 - 면 적 : 311,880㎡ - 사업기간 : 2015년 ~ 2020년 - 사 업 비 : 900억원(용지비 556, 조성비 344) - 사업내용 : KAI중심 MRO 합작법인 설립, MRO단지 조성 등 - 유치업종 : 항공업체(생산, 정비, 연구개발)관련 2. 추진사항 -‘14.12.23 : 항공MRO사업 지원 MOU체결(경남도/사천시/KAI) -‘15.01.28 : 항공MRO사업 지원 운영위원회 구성(10차 실시) -‘15.05.06 : 항공우주 및 항공MRO 육성전략세미나 개최(국회) -‘15.06.08 : 기본계획 및 타당성조사 용역 완료(MRO산업단지) -‘16.01.02 : 1-1단계 사업비 86억원 확보(경남도 26억, 사천시 60억) -‘16.01.14 : MRO사업 사천유치 도의회 대정부 건의안 채택 -‘16.01.21 : 2016년 산업단지 지정 계획 승인(국토부) -‘16.03.11 : 경남도 MRO 관련 긴급대책회의 개최(경남도, 사천시, KAI) -‘16.03.14 : 국토부 종합회의 개최(경남도, KAI, 충북경제자유구역청,아시아나) ☞ 사업계획서 수록 내용 제시 -‘16.06.09 : 국토부 사천MRO부지 현지 방문 및 조사(정용식 과장 외 1인) -‘16.07.20 : 항공MRO사업 사업계획서 제출〔전문업체(KAI→국토부)〕 -‘16.08.10 : 경남도 MRO부지 현장 확인(경남도 도시계획과) -‘16.10.25 : 2017년 산업단지 지정계획 제출(경남도) -‘16.12.13 : 개발행위허가 제한지역 기간연장 고시 (사천시 고시 제2016-247호) -‘16.12.13 : 2017년 제1차 정기 지방재정 투자사업 심사의뢰서 제출(중앙) -‘16.12.20 : 양해각서 체결(필리핀CAB, SIAEP) -‘17.01.13 : 2017년 산업단지 지정계획 산업입지정책심의회 (국토부 산업입지정책과, 한강홍수통제소) -‘17.01.23 : 2017년 산업단지 지정계획 확정

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	산업단지과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 강효정(831-3450) 담 당 : 시설6급 허원권(831-3469) 담당자 : 시설7급 정광복(831-3465)
③정책사업명	송포 도시첨단산업단지 조성
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2015 ~ 2020
⑥주요내용	1. 추진배경 □ 필 요 성 - 마리나 입지환경을 활용하여 해양,항공산업에 특화된 산업단지 및 체험형 레저단지 조성으로 명품 관광레저도시 건설 □ 사업개요 - 위 치 : 사천시 송포동․노룡동 앞 공유수면 - 면 적 : 756,252㎡ - 사업기간 : 2015년 ~ 2020년 - 사 업 비 : 1,600억원 - 사업내용 : 해양․항공 복합 산단 조성(756,252㎡) - 유치업종 : 해양 ․ 항공관련 업체 등 2. 추진사항 -‘15.01.09 : 송포 미래창조 첨단산업단지 개발계획 보고회 개최 -‘15.04.28 : 송포 미래창조 첨단산업단지 조성 양해각서 체결 -‘15.05.11 : 제3차 공유수면매립 기본계획 변경 반영수요조사서 제출 -‘15.06. : 공유수면매립 기본계획 반영을 위한 전략환경영향평가 착수 -‘15.06.25 : 전략환경영향평가협의회 개최(마산지방해양수산청) -‘15.06.29 : 전략환경영향평가 결정내용 공개 공고 및 의견수렴 -‘15.07.20 : 전략환경영향평가 초안 및 사전재해영향성 검토서 제출(마산지방해양수산청) -‘15.07.27 : 전략환경영향평가서(초안) 공람 및 설명회 개최 공고문 게재 -‘15.08.12 : 전략환경영향평가 초안 주민설명회 개최 -‘15.11.12 : 제3차 공유수면매립 기본계획 보완자료 제출 -‘16.10.25 : 2017년 산업단지 지정계획 제출 -‘16.11.11 : 항공레저 인프라(이착륙장) 조성 제안서 평가 -‘16.11.28 : 항공레저 이착륙장 후보지 확정 통보 -‘16.12.14 : 2017년 산단 지정계획 조정회의 개최 -‘17.01.13 : 2017년 제1차 산업입지정책심의회 개최 -‘17.01.23 : 2017년 산업단지 지정 -‘17.02.01 : 양해각서체결〔사천시·아론비행선박산업(주)〕

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	산업단지과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 강효정(831-3450) 담 당 : 시설6급 이종채(831-3464) 담당자 : 시설7급 정오식(831-3462)
③정책사업명	축동 일반산업단지 조성사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2012~2016.12
⑥주요내용	1. 사업개요 - 위 치 : 사천시 축동면 사다리 산26-1번지 일원 - 면 적 : 271,060㎡(산업시설면적 168,450㎡) - 사업기간 : 2012년 ~ 2016.12.31. - 개발방법 : 민간개발(실수요자개발) - 유치업종 : 기타기계 및 장비제조업, 자동차 및 트레일러제조업 기타운송장비제조업 2. 추진사항 - 2010. 5. 4. : 투자의향서 접수 - 2010. 5. 10. : 관련 부서 및 유관기관 검토 요청 - 2010. 6. 30. : 투자의향서 검토 결과 통보 - 2011. 4. 6. : 산업단지계획 승인 신청서 접수 - 2011. 8. 17. : 합동설명회 개최(3차) - 2011. 12. 20. : 산업단지계획 보완 1차 승인신청서류 접수 - 2012. 7. 5. : 지방산업단지계획심의위원회 조건부 심의의결 - 2012. 9. 13. : 산업단지계획 승인(사천시고시제2012-152호) - 2015. 1. 14. : 산업단지계획(변경) 사업기간연장승인신청 제출 - 2015. 3. 5. : 조건부 산업단지계획(변경) 승인․고시 - 2015. 7. 13. : 산업단지계획(변경) 승인․고시 - 2015. 11. 26. : 관리기본계획승인고시(사천시고시제2015-170호) - 2016. 12. 31. : 준공예정 - 2016. 6. 2. : 산업단지계획(변경) 승인 - 2016. 12. 29. : 산업단지계획(변경) 승인

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수도사업소	②담당자 (전화번호)		부서장 : 시설5급 이동승 (831-5500) 담 당 : 시설6급 강영실 (831-5545) 담당자 : 시설7급 황용찬 (831-5546)
③정책사업명	삼천포 하수관거 개보수(갱생)
④선정기준	10억원 이상 사업비가 소요되는 건설 및 개발 사업		⑤사업기간		2012~2018
⑥주요내용	1. 추진배경 - 공공수역의 수질보전과 소규모 공공하수처리시설의 경제적 운영 2. 추진기간 : 2012 ∼ 2017 3. 총사업비 : 12,569백만원(국비 7,442, 지방비 5,127) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 동지역, 사천읍 일원 - 사업개요 : 하수관로 개보수 L=10.509㎞ 5. 추진경과 - 2012. 04. : 지방재정 투․융자심사 - 2012. 06. : 타당성 조사용역 완료 - 2013. 11. : 기본 및 실시설계 완료 - 2014. 08. : 낙동강유역환경청 재원협의 완료 - 2014. 12. : 총사업비 변경 승인 - 2015. 04. : 공법 선정 위원회 - 2015. 11. : 사업 계약 - 2015. 12. : 총괄 착공 - 2016. 06. : 비굴착 준공 - 2017. 03. : 2017년분 착공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수도사업소	②담당자 (전화번호)		부서장 : 시설5급 이동승 (831-5500) 담 당 : 시설6급 강영실 (831-5545) 담당자 : 시설7급 황용찬 (831-5546)
③정책사업명	사천지구(2단계) 하수관거 정비사업
④선정기준	10억원 이상 사업비가 소요되는 건설 및 개발 사업		⑤사업기간		2012~2017
⑥주요내용	1. 추진배경 - 공공수역의 수질보전과 소규모 공공하수처리시설의 경제적 운영 2. 추진기간 : 2012~2017 3. 총사업비 : 17,393백만원(국비 12,175, 지방비 5,218) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 사천읍, 사남면, 축동면 일원 - 사업개요 : 하수관로 정비 L=11.947㎞, 배수설비 781개소 - 수 급 자 : (유)일봉도시개발 - 공사기간 : 2014. 11. 24. ~ 2017. 11. 22. 5. 추진경과 - 2011. 03. : 지방재정 투․융자심사 - 2012. 01. : 실시설계 완료 - 2013. 08. : 낙동강유역환경청 재원협의 완료 - 2014. 11. : 2014년분 착공 - 2015. 03. : 2015년분 착공 - 2016. 01. : 2014년분 준공 - 2016. 05. : 2015년분 준공 - 2016. 08. : 2016년분 착공 - 2016. 09. : 2차분 착공