정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	사천시 장애인 국민체육센터 건립공사
② 추진배경	장애인 생활체육 활성화 공간조성과 체육복지 증진을 위함
③ 사업개요	ㅇ 위 치 : 사천시 용현면 덕곡리 536-17번지 일원 ㅇ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년 ㅇ 사 업 량 : 체육관 1동(지하1층/지상2층, 3,058.02㎡) ㅇ 사 업 비 : 8,500백만원[기금(체육진흥) 5,000/ 시비 3,500]
④ 사업부서	사천시 주민생활지원과		⑤ 담 당 자		부서장 : 행정5급 조현숙 팀 장 : 복지6급 조현근 담당자 : 행정7급 김영미
⑥ 선정기준	시민의 권익이나 복지증진에 관련된 정책		⑦ 사업기간		2015년~2019년
<그간 주요 추진내용>
○ 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료		́15. 01.		김성순 주민생활지원과장 조현근 장애인복지담당 허정두 주무관
○ 건립 지원 대상지역 선정 (※ 사업비 중 기금 50억원 확보)		́15. 05.		송도근 시장 이선두 부시장 김태주 행정국장 김성순 주민생활지원과장 조현근 장애인복지담당 허정두 주무관
○ 건축설계공모 시행		́16. 08. 03.		김성순 주민생활지원과장 박주봉 장애인복지담당 우진희 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 시행		́16. 11. 18 ~ ́17. 11. 27		김성순 주민생활지원과장 조현근 장애인복지담당 우진희 주무관
○ 건립공사 시행		́17. 12.		송도근 시장 윤인국 부시장 박헌진 행정국장 김성순 주민생활지원과장 조현근 장애인복지담당 우진희 주무관
○ 계약의뢰		́18. 1. 8.		조현숙 주민생활지원과장 조현근 장애인복지팀장 이정미 주무관
○ 착공		́18. 2. 12.		조현숙 주민생활지원과장 조현근 장애인복지팀장 이정미 주무관
○ 준공		́19. 5. 23.(예정)		조현숙 주민생활지원과장 조현근 장애인복지팀장 김영미 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	서부권 관문지역 관광홍보판 설치
② 추진배경	균형 있는 상생도시개발로 서부권과 주요 관광지의 이미지 향상을 위해 시의 주요 관문지역에 관광지 홍보 안내판 설치
③ 사업개요	서부 3개면 주요 관문지역 관광홍보판 설치, 관광지 진입로 정비 및 홍보안내판 설치
④ 사업부서	사천시 관광진흥과		⑤ 담당자	부서장 : 행정5급 신현경 팀 장 : 시설6급 강호명 담당자 : 시설8급 김태현
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2018. ~ 2022. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 2019년도 주요 관광자원개발사업 추진계획 보고		‘19.01.08.	송도근 시장 박성재 부시장 이영재 산업관광국장 신현경 관광진흥과장 강호명 관광개발팀장 류호철 주무관
○ 월등도 명품조형물설치외 4건 기본계획수립용역 시행		‘19.01.16	신현경 관광진흥과장 강호명 관광개발팀장 김태현 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	초양도 관광거점 마을 만들기
② 추진배경	케이블카 중간 역사인 초양도에 케이블카와 연계한 편의시설 및 해양 친수 관광거점 마을 조성 필요
③ 사업개요	· 위 치 : 사천시 동서동 일원(초양도) · 사업규모 : 물량장 확보, 부둣가 도막형 포장, 초양쉼터, 섬꽃․장미원, 전망시설, 보행육교, 흙포장 등 · 사 업 비 : 4,850백만원 (도비 2,425, 시비2,425) · 사업기간 : 2015. 6. ~ 2019. 12. · 시 행 자 : 사천시장
④ 사업부서	사천시 관광진흥과		⑤ 담 당 자	부서장 : 행정5급 신현경 팀 장 : 시설6급 강호명 담당자 : 시설7급 류호철
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2015. 6. ~ 2019. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 지역균형발전사업 발굴계획 수립		‘12.10.
○ 지역균형발전사업 수정심의 채택 (경상남도)		‘13. 1.
○ 지방재정 투․융자 심사 완료		‘13. 3.
○ 실시설계 및 국립공원계획변경 용역시행		‘14. 5.
○ 공유재산 심의 완료		‘14.12.
○ 실시설계 완료		‘15. 5.
○ 공사착공		‘15. 6.
○ 보행육교 설치 완료		‘16.12.
○ 전망시설, 섬꽃․장미원 구조물 설치		‘18. 4.
○ 마을쉼터 설치 및 해변둘레길 설치		‘19. 4.	송도근 시장 박성재 부시장 이영재 국장 신현경 과장 강호명 팀장 류호철 주무관
○ 공사준공		‘19.12.

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	사천대방 관광자원 개발사업
② 추진배경	전국에서 가장 아름다운 길 대상에 선정된 삼천포대교를 찾는 관광객의 관광자원 개발을 통한 관광 인프라 구축
③ 사업개요	· 위 치 : 사천시 대방동 일원 · 사업규모 : A=12,570㎡(잔디 및 광장, 조형물, 편익시설, 공원, 관리시설, 주차장, 경관조명 등) · 사 업 비 : 14,040백만원 (지특 4,400, 도비 2,320, 시비 7,320) · 사업기간 : 2016. 9. ~ 2019. 12. · 시 행 자 : 사천시장
④ 사업부서	사천시 관광진흥과		⑤ 담 당 자	부서장 : 행정5급 신현경 팀 장 : 시설6급 강호명 담당자 : 시설7급 류호철
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2016. 9. ~ 2019. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 중간역사 타당성 검토 및 교통영향분석 용역		‘12.11.
○ 중간역사 설치를 위한 사업계획 변경(환경부)		‘13. 6.
○ 중기지방재정계획 수립		‘13.10.
○ 도시계획(공원)결정 및 지형도면 승인고시		‘13.12.
○ 조성계획 실시설계 용역 시행		‘14. 3.
○ 지방재정 투융자 승인		‘14. 7.
○ 공유재산 관리계획 반영		‘14.12.
○ 케이블카 공원조성 계획 및 실시설계용역 완료		‘16. 3.
○ 공사 시행		‘16. 7.	송도근 시장 양기정 부시장 한재천 국장 채영석 과장 박영수 팀장 조현범 주무관
○ 공원조성계획 결정 및 실시계획 인가		‘16. 8.
○ 공사착공		‘16. 9.
○ 문화지원시설(3층) 건축 완료		‘18. 5.
○ 공사준공		‘19.12.

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	사천 케이블카 자연휴양림 조성
② 추진배경	❍ 전문 산림체험ㆍ휴양시설 조성과 서비스 제공으로 시민 보건휴양 및 정서 함양 ❍ 열악한 지역 내 체험ㆍ숙박형 관광인프라 확충으로 지역경제 활성화 도모
③ 사업개요	휴양림 조성 1식[산림휴양관 3동(6실), 숲속의 집 16동(16실), 방문자센터, 야영센터, 주차장, 숲 놀이터, 수면욕장, 명상욕장, 계류탁족장, 숲 산책로 3km 등]
④ 사업부서	사천시 녹지공원과	⑤ 담당자		부서장 : 행정5급 이남근 팀 장 : 녹지6급 박은형 담당자 : 녹지6급 윤민석
⑥ 선정기준	대규모 예산	⑦ 사업기간		2016년 ~ 2020년
<그간 주요 추진내용>
○ 자연휴양림 지정 신청 (녹지공원과-2292)			‘17.02.13		송도근 시장 양기정 부시장 한재천 국장 제준봉 과장 김종수 팀장
○ “사천 케이블카 자연휴양림” 지정에 따른 조성사업 추진계획			‘17.05.18		송도근 시장 양기정 부시장 한재천 국장 제준봉 과장 김종수 팀장
○ 사천 케이블카 자연휴양림 조성계획 승인 신청 (녹지공원과-4731)			‘18.03.22		제준봉 과장 김종수 팀장
○ 자연휴양림 조성 실시설계 완료에 따른 추진 계획 보고			‘18.04.24		송도근 시장 박성재 부시장 한재천 국장 제준봉 과장 김종수 팀장
○ 휴양림 조성계획 승인 (산림녹지과-13388)			‘18.06.29		송도근 시장 박성재 부시장 한재천 국장 제준봉 과장 김종수 팀장
○ 휴양림 조성사업 추진실적 및 향후계획			‘18.07.06		송도근 시장 박성재 부시장 한재천 국장 제준봉 과장 김종수 팀장
○ 휴양림 조성사업 발주(총괄) (녹지공원과-4723, 4858, 4859)			‘18.10.05		송도근 시장 박성재 부시장 이영재 국장 제준봉 과장 김종수 팀장

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	사주천년교 가설
② 추진배경	사천읍 시내통과 차량의 분산으로 교통난 해소
③ 사업개요	- 위 치 : 사천시 정동면 고읍리,예수리 일원 - 사 업 량 : L=280m(교량가설 L=143.6m, 도로 136.4m) - 수 급 자 : 창원시 소재 서진산업(주) 윤해덕 - 총사업비 : 12,000백만원
④ 사업부서	사천시 도시과		⑤ 담 당 자		도시과장 강삼중 담당자 신성현
⑥ 선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑦ 사업기간		2015 ~ 2020
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 완료		2014. 10 ~		김상돈 도시과장 정재화 도시계획팀장 박재현 주무관
○ 계약심사 완료		2015. 12		김상돈 도시과장 정재화 도시계획팀장 박재현 주무관
○공사착수		2016. 03. 14		김상돈 도시과장 정재화 도시계획팀장 박재현 주무관
○ 교대1기, 교각 2기 및 거더제작 완료		2017. 06.		박재령 도시과장 정재화 도시계획팀장 신성현 주무관
○ 부체도로 손실보상		2017. 11.		강삼중 도시과장 정재화 도시계획팀장 신성현 주무관
○ 2018년분 공사착공 (부체도로 공사)		2018. 03.		강삼중 도시과장 허원권 도시계획팀장 신성현 주무관
○ 교량하부구조물 완료 (교대2기, 교각3기)		2019. 05.		강삼중 도시과장 허원권 도시계획팀장 신성현 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	사천시 경관기본계획(재정비) 및 공공디자인 진흥계획 수립
② 추진배경	경관자원의 체계적인 관리와 지역특성을 고려한 도시경관 조성 계획 수립
③ 사업개요	○ 위 치 : 사천시 행정구역 전지역(394.64㎢) ○ 기준년도 : 2018년 ○ 목표연도 : 2030년 ○ 용역개요 : 경관자원의 체계적인 관리와 지역특성을 고려한 도시경관 조성을 위하여 2030년을 목표 연도로 경관기본계획(재정비) 및 공공디자인 진흥 계획 수립 ○ 용역기간 : 착수일로부터 10개월 ○ 사 업 비 : 176백만원
④ 사업부서	사천시 도시과		⑤ 담 당 자		부서장 : 시설5급 강삼중 팀 장 : 행정6급 지태식 담당자 : 시설7급 강우선
⑥ 선정기준	연구용역		⑦ 사업기간		2018. 1. ~ 2019. 8.
<그간 주요 추진내용>
○ 사천시 경관기본계획 수립 용역계획(안)		‘17.09.13.		최인수 건축과장 박중한 건축디자인팀장 유영태 주무관
○ 사천시 경관기본계획(재정비) 및 공공디자인 진흥계획 수립용역 착수 (경관위원회 3회 개최)		‘18.04.12.		박명영 건축과장 박중한 건축디자인팀장 김용준 주무관
○ 사천시 경관기본계획(재정비) 및 공공디자인 진흥계획 수립용역 중간보고회		‘19.4.29.		강삼중 도시과장 박중한 도시경관팀장 강우선 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	정동면 행정복지센터 건립공사
② 추진배경	건물 노후화 및 복지센터 프로그램실 부족으로 인한 시민불편해소하고 지역민을 위한 복지서비스 공간을 제공하여 시민들의 삶의 질 향상
③ 사업개요	○ 위치 : 정동면 대곡리 298-2번지 일원 ○ 사업량 : 지상2층, 연면적 1,000제곱미터 이내 ○ 사업비 : 3,100백만원
④ 사업부서	사천시 건축과		⑤ 담당자		부서장 : 시설5급 박명영 팀 장 : 시설6급 이제훈 담당자 : 시설7급 우진희
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간		2018년 ~ 2020년
<그간 주요 추진내용>
○ 정동면 행정복지센터 신축 계획(안)		‘18.07.24		송도근 시장 박성재 부시장 박헌진 국장 강옥태 과장 임정의 팀장 장소현 주무관 <협조자> 김성관 팀장, 박명영 과장
○ 정동면 행정복지센터 건립공사 실시설계용역 시행		‘18.10.16		박성재 부시장 허태중 국장 박명영 과장 김성관 팀장 남형래 주무관
○ 정동면 행정복지센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역 성과 보고		‘19.02.12		송도근 시장 박성재 부시장 허태중 국장 박명영 과장 이제훈 팀장 우진희 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	옥동~도금간 도로 확․포장공사
② 추진배경	·낙후된 농촌 지역의 사회기반시설 확충 ·주민숙원사업 해소로 인한 행정 신뢰성 향상
③ 사업개요	·위 치 : 사천시 곤명면 은사리 일원 ·사 업 량 : 도로 확․포장 L=1.425㎞, B=8.0m ·사 업 비 : 1,527백만원(도급 1040, 관급 487)
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 안용주 담당자 : 시설7급 정오식
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2017.5.26.~2019. 6.30.
<그간 주요 추진내용>
○ 옥동~도금간 도로 확․포장공사 (총괄분) 시행		’17.3.31.	송도근 시장 양기정 부시장 한재천 국장 채영석 과장 유재기 팀장 이종진 주무관
○ 옥동~도금간 도로 확․포장공사 (2017년분) 시행		’17.4.27.	양기정 부시장 한재천 국장 채영석 과장 유재기 팀장 이종진 주무관
○ 공사 착공(총괄분 및 2017년분)		’17.5.26.
○ 옥동~도금간 도로 확․포장공사 (2018년분)시행		’18.1.2.	송도근 시장 박성재 부시장 한재천 국장 채영석 과장 안용주 팀장 김수언 주무관
○ 공사 착공(2018년분)		’18.1.9.
○ 공사 준공(2017년분)		’18.1.25.	한재천 국장 채영석 과장 안용주 팀장 김수언 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	배춘마을 진입로 확포장(시도15호선)
② 추진배경	·낙후된 농촌 지역의 사회기반시설 확충 ·주민숙원사업 해소로 인한 행정 신뢰성 향상
③ 사업개요	·위 치 : 사천시 축동면 배춘리 일원 ·사 업 량 : 도로 확․포장 L=440m, B=10m ·사 업 비 : 1,700백만원
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 안용주 담당자 : 시설9급 박수연
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2017년 ~ 2020년
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계		’17. 1. 13.	채영석 과장 유재기 팀장 신성현 주무관
○ 도로구역결정		’18. 2. 28.	한재천 국장 채영석 과장 안용주 팀장 김수언 주무관
○ 감정평가		’18. 5. 30.	채영석 과장 안용주 팀장 이호성 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가천마을 진입로 확포장(시도10호선)
② 추진배경	·낙후된 농촌 지역의 사회기반시설 확충 ·주민숙원사업 해소로 인한 행정 신뢰성 향상
③ 사업개요	·위 치 : 사천시 사남면 가천리 일원 ·사 업 량 : 도로 확․포장 L=310m, B=8m ·사 업 비 : 1,000백만원
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 안용주 담당자 : 시설7급 정오식
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2017년 ~ 2020년
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계		’18. 1. 2.	채영석 과장 안용주 팀장 이호성 주무관
○ 도로구역결정		’19. 1. 4.	허태중 국장 채영석 과장 안용주 팀장 정오식 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	통정마을 진입로 확포장(시도8호선)
② 추진배경	·낙후된 농촌 지역의 사회기반시설 확충 ·주민숙원사업 해소로 인한 행정 신뢰성 향상
③ 사업개요	·위 치 : 사천시 서포면 구평리 일원 ·사 업 량 : 도로 확․포장 L=380m, B=10m ·사 업 비 : 1,000백만원
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 안용주 담당자 : 시설9급 이호성
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2019년 ~ 2021년
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계		’19. 1. 14.	채영석 과장 안용주 팀장 정오식 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	이홀지구(홀곡마을) 위험도로 구조개선(지방도1016호선)
② 추진배경	·낙후된 농촌 지역의 사회기반시설 확충 ·주민숙원사업 해소로 인한 행정 신뢰성 향상
③ 사업개요	·위 치 : 사천시 이홀동 일원 ·사 업 량 : 위험도로 구조개선 L=200m ·사 업 비 : 1,500백만원
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자		부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 안용주 담당자 : 시설9급 박수연
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간		2017년 ~ 2020년
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계		’18. 9. 7.		채영석 과장 안용주 팀장 박수연 주무관
○ 도로구역결정		’19. 1. 24.		허태중 국장 채영석 과장 안용주 팀장 박수연 주무관
○ 감정평가		’19. 2. 25.		채영석 과장 안용주 팀장 박수연 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	서포삼거리~밀금간 도로개설
② 추진배경	·굴곡도로의 교통사고 위험을 해소 ·주민숙원사업 해소로 인한 행정 신뢰성 향상
③ 사업개요	·위 치 : 사천시 서포면 구평리 일원 ·사 업 량 : 도로개설 L=750m, B=10m ·사 업 비 : 1,600백만원
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 안용주 담당자 : 시설9급 박수연
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2017년 ~ 2021년
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계		’19. 4. 9.	허태중 국장 채영석 과장 안용주 팀장 박수연 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신송마을 진입로 확포장(시도10호선)
② 추진배경	·낙후된 농촌 지역의 사회기반시설 확충 ·주민숙원사업 해소로 인한 행정 신뢰성 향상
③ 사업개요	·위 치 : 사천시 용현면 송지리 일원 ·사 업 량 : 도로 확․포장 L=490m, B=15m ·사 업 비 : 2,600백만원
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 안용주 담당자 : 시설7급 정오식
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2017년 ~ 2020년
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계		’18. 1. 2.	채영석 과장 안용주 팀장 이호성 주무관
○ 도로구역결정		’19. 1. 4.	허태중 국장 채영석 과장 안용주 팀장 정오식 주무관
○ 감정평가		’19. 3. 4.	채영석 과장 안용주 팀장 정오식 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	시도1호선 확․포장공사
② 추진배경	·우리시의 주도로인 시도1호선 도로변에 건물 및 주택 건축을 위한 개발행위가 빈번함에 따라 시도1호선 전구간 실시설계를 추진 완료하여 시민들과 공유함으로써 효율적이고 체계적인 도로계획의 틀을 마련
③ 사업개요	· 위 치 : 사천시 사남면 ~ 남양동행정복지센터 · 사 업 량 : 도로 확․포장 L=8.42km, B=20m · 사 업 비 : 800,000백만원
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자		부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 안용주 담당자 : 시설7급 정오식
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간		2018년 ~ 2027년
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계		’18. 8. 20.		송도근 시장 박성제 부시장 허태중 국장 채영석 과장 안용주 팀장 정오식 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	양동마을 진입도로 확․포장(시도3호선)
② 추진배경	·낙후된 농촌 지역의 사회기반시설 확충 ·주민숙원사업 해소로 인한 행정 신뢰성 향상
③ 사업개요	·위 치 : 사천시 축동면 배춘리 일원 ·사 업 량 : 도로 확․포장 L=570m, B=15m ·사 업 비 : 3,000백만원
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자		부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 안용주 담당자 : 시설7급 정오식
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간		2018년 ~ 2020년
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계		’18. 1. 2.		채영석 과장 안용주 팀장 이호성 주무관
○ 도로구역결정		’18. 12. 17.		허태중 국장 채영석 과장 안용주 팀장 정오식 주무관
○ 감정평가		’18. 1. 22.		채영석 과장 안용주 팀장 정오식 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	용현 덕곡마을 도로 확․포장(시도1호선)
② 추진배경	·낙후된 농촌 지역의 사회기반시설 확충 ·주민숙원사업 해소로 인한 행정 신뢰성 향상
③ 사업개요	·위 치 : 사천시 용현면 덕곡리 일원 ·사 업 량 : 도로 확․포장 L=360m, B=20~23.5m ·사 업 비 : 3,000백만원
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 안용주 담당자 : 시설9급 이호성
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2019년 ~ 2021년
<그간 주요 추진내용>
○ 도로구역결정		’19. 2. 25.	허태중 국장 채영석 과장 안용주 팀장 이호성 주무관
○ 감정평가		’19. 3. 8.	채영석 과장 안용주 팀장 이호성 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	구암 텃골마을 우회도로개설(시도22호선)
② 추진배경	·낙후된 농촌 지역의 사회기반시설 확충 ·주민숙원사업 해소로 인한 행정 신뢰성 향상
③ 사업개요	·위 치 : 사천시 사천읍 구암리 일원 ·사 업 량 : 도로 확․포장 L=233m, B=8m ·사 업 비 : 1,200백만원
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 안용주 담당자 : 시설9급 박수연
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2018. ~ 2020.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계		’18. 1. 2.	채영석 과장 안용주 팀장 이호성 주무관
○ 도로구역결정		’19. 1. 4.	허태중 국장 채영석 과장 안용주 팀장 박수연 주무관
○ 감정평가		’19. 3. 19.	채영석 과장 안용주 팀장 박수연 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	제방마을 진입로 확․포장
② 추진배경	안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대
③ 사업개요	· 위 치 : 곤양면 묵곡리 지내(농어촌도로 곤양102호선) · 개 요 : 도로 확․포장 L=0.677㎞, B=8.0m · 사 업 비 : 1,130백만원 (시비 1,130)
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 이기영 담당자 : 시설7급 최호준
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2012. 1.~ 2019. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 제방마을 진입로 확․포장공사 시행		’17.1.31.	송도근 시장 양기정 부시장 한재천 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 제방마을 진입로 확․포장공사 (2017년분)시행		’17.1.8.	한재천 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 제방마을 진입로 확․포장공사 (2018년분)시행		’18.1.4.	한재천 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 제방마을 진입로 확․포장공사 (2019년분)시행		’19.1.31.	허태중 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	곤양 석문도로 확․포장
② 추진배경	안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대
③ 사업개요	· 위 치 : 곤양면 대진리 지내(농어촌도로 곤양207호선) · 개 요 : 도로 확․포장 L=0.64㎞, B=9.5m · 사 업 비 : 1,400백만원 (시비 1,400)
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 이기영 담당자 : 시설7급 최호준
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2013. 1.~ 2020. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 곤양 석문도로 확․포장공사 시행		’18.2.8.	송도근 시장 박성재 부시장 한재천 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 곤양 석문도로 확․포장공사 (2018년분) 시행		’18.3.12.	한재천 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 곤양 석문도로 확․포장공사 (2019년분) 시행		’19.1.31.	허태중 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	포곡마을 진입로 확․포장
② 추진배경	안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대
③ 사업개요	· 위 치 : 곤양면 송전리 지내(농어촌도로 곤양202호선) · 개 요 : 도로 확․포장 L=0.843㎞, B=8.0m · 사 업 비 : 1,500백만원 (시비 1,500)
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 이기영 담당자 : 시설7급 최호준
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2017. 1.~ 2020. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 포곡마을 진입로 확포장공사 시행		’18.1.30.	송도근 시장 박성재 부시장 한재천 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 포곡마을 진입로 확포장공사 (2018년분) 시행		’18.3.6.	한재천 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 포곡마을 진입로 확포장공사 (2019년분) 시행		’19.1.29.	허태중 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	사촌~대산간 도로 확․포장
② 추진배경	안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대
③ 사업개요	· 위 치 : 사남면 사촌리 지내(농어촌도로 사남206호선) · 개 요 : 도로 확․포장 L=0.914㎞, B=6.0m · 사 업 비 : 1,700백만원 (시비 1,700)
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 이기영 담당자 : 시설7급 최호준
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2016. 1. ~ 2020. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 사촌~대산간 도로 확․포장공사 시행		’18.1.31.	송도근 시장 박성재 부시장 한재천 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 사촌~대산간 도로 확․포장공사 (2018년분) 시행		’18.3.6.	한재천 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 사촌~대산간 도로 확․포장공사 (2019년분) 시행		’19.1.31.	허태중 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신복택지~동강아뜨리에간 도로 확․포장
② 추진배경	안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대
③ 사업개요	· 위 치 : 용현면 신복리 지내(농어촌도로 용현202호선) · 개 요 : 도로 확․포장 L=1.074㎞, B=8.0m · 사 업 비 : 2,400백만원 (시비 2,400)
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 이기영 담당자 : 시설7급 최호준
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2017. 11. ~ 2023. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계 및 노선지정 용역 시행		’17.11.1.	한재천 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 도로의 노선지정 공고		’19.1.17.	허태중 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	와티~안도간 도로 확․포장
② 추진배경	안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대
③ 사업개요	· 위 치 : 곤양면 중항리 지내(농어촌도로 곤양205,309호선) · 개 요 : 도로 확포장 L=1.8㎞, B=8.0m · 사 업 비 : 3,100백만원 (시비 3,100)
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 이기영 담당자 : 시설7급 최호준
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2018.1. ~ 2023.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계 및 노선지정 용역 시행		’18.2.8.	한재천 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 도로의 노선지정 공고		’19.1.31.	허태중 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	리가아파트~삼성초교간 도로 확․포장
② 추진배경	안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대
③ 사업개요	· 위 치 : 사남면 월성리 지내(농어촌도로 사남305호선) · 개 요 : 도로 확․포장 L=0.98㎞, B=8.0m · 사 업 비 : 3,460백만원 (시비 3,460)
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 이기영 담당자 : 시설7급 최호준
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2017. 1. ~ 2023. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 시행		’17.1.31.	채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 도로의 노선지정 공고		’18.12.20	허태중 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	백운마을 진입로 확․포장
② 추진배경	도로 확․포장으로 안전한 통행로 및 교통편익 증대
③ 사업개요	· 위 치 : 남양동 지내 · 개 요 : 도로 확․포장 L=250m, B=7.2m · 사 업 비 : 2,400백만원 (시비 2,400)
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 이기영 담당자 : 시설7급 최호준
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2017. 1. ~ 2020. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계 및 도시관리계획 결정 (변경)용역 시행		’17.12.4.	한재천 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 백운마을 진입로 확․포장공사 시행		’18.7.19.	송도근 시장 박성재 부시장 허태중 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	항공 클러스터 우회도로 개설
② 추진배경	도로개설로 안전한 통행로 확보 및 교통편익 증대
③ 사업개요	· 위 치 : 용현면 송지리 지내 · 개 요 : 도로개설 L=94m, B=20m · 사 업 비 : 2,400백만원 (시비 2,400)
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 이기영 담당자 : 시설7급 최호준
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2017. 9. ~ 2021. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 시행		’17.9.26.	한재천 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관
○ 실시계획인가 고시		’18.12.20.	허태중 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	평기마을 진입로 확․포장
② 추진배경	안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대
③ 사업개요	· 위 치 : 용현면 신복리 지내 · 개 요 : 도로 확․포장 L=0.522㎞, B=6.0m · 사 업 비 : 1,300백만원 (시비 1,300)
④ 사업부서	사천시 도로과		⑤ 담 당 자	부서장 : 시설5급 채영석 팀 장 : 시설6급 이기영 담당자 : 시설7급 최호준
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2018. 1. ~ 2021. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시계획인가 고시		’18.12.6.	허태중 국장 채영석 과장 이기영 팀장 최호준 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명

도시재생 뉴딜사업

② 추진배경

대통령 공약사업으로서 노후하고 쇠퇴한 구도심의 새로운 활력을 불어넣기 위한 마중물 사업을 공모를 통하여 선정

③ 사업개요

사업명	유형	위치	사업비	비고
삼천포 바다마실 프로젝트 삼천포愛 빠지다”	중심시가지형	동동485-2번지일원	300억원	기선정
바다로 열리는 문화마을 “굴항”	주거지지원형	동서동 320-17 일원(대방마을)	150억원	기선정

④ 사업부서

사천시 도시재생과

⑤ 담당자

부서장 : 시설5급 한윤철

팀 장 : 시설6급 김성관

담당자 : 시설7급 허성훈

⑥ 선정기준

국정과제

⑦ 사업기간

2018. ~ 2022.

<그간 주요 추진내용>

삼천포 바다마실 프로젝트 삼천포愛 빠지다” 사업시행

’18. 8.1.

송도근 시장

박성재 부시장

허태중 국장

강삼중 과장

서성우 팀장

허성훈 주무관

바다로 열리는 문화마을 “굴항”

사업선정

’18. 8.31.

송도근 시장

박성재 부시장

허태중 국장

강삼중 과장

서성우 팀장

김선국 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	사천IC일원 복합유통상업단지 조성
② 추진배경	사천IC일원 폐 고속도로 부지에 복합유통상업단지를 조성함으로써 서부경남 산업단지 개발 및 상업·물류 인프라 수요증가에 대비하고 지역경기 부양거점 확보
③ 사업개요	○ 총사업비 : 1,151여억원(민·관 합동개발) ○ 주요내용 - 위 치 : 사천시 축동면 사다리 87 일원(사천IC 주변) - 사업개요 : 복합유통상업단지 조성(262,000㎡) - 시 행 자 : 사천IC도시개발주식회사
④ 사업부서	사천시 도시재생과		⑤ 담 당 자		부서장 : 시설5급 한윤철 팀 장 : 시설6급 김정문 담당자 : 시설7급 강형구
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간		2015. ~ 2021.
<그간 주요 추진내용>
○ 도시개발구역 지정제안 수용여부 결정		‘17.02.07		송도근 시장 양기정 부시장 한재천 국장 이상석 과장 양재규 팀장 윤현찬 주무관
○ 도시개발구역 지정 개발 계획수립 고시		‘18.06.07		송도근 시장 양기정 부시장 한재천 국장 박명영 과장 양재규 팀장 윤현찬 주무관
○ 사업시행자 지정(경남도)		‘18.07.02.		송도근 시장 박성재 부시장 한재천 국장 한윤철 과장 양재규 팀장 황용찬 주무관
○ 도시개발계획(변경) 및 실시계획인가 신청		‘19.01.25		허태중 국장 한윤철 과장 김정문 팀장 강형구 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	삼천포 구역사주변 도시개발사업
② 추진배경	삼천포구역사부지의 계획적이고 체계적인 도시개발을 위해 토지의 이용 및 난개발 방지로 상업 중심지로서의 이미지 제고
③ 사업개요	○ 총사업비 : 9,000백만원(공영개발) ○ 주요내용 - 위 치 : 사천시 동금동 151-5번지 일원 - 사업개요 : 기반시설 확충 및 상업부지 개발(25,374㎡)
④ 사업부서	사천시 도시재생과		⑤ 담 당 자		부서장 : 시설5급 한윤철 팀 장 : 시설6급 김정문 담당자 : 시설7급 강형구
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간		2012. ~ 2022.
<그간 주요 추진내용>
○ 대지조성사업 승인 및 지형도면 승인 고시		‘16.09.09		송도근 시장 양기정 부시장 한재천 국장 김상돈 과장 양재규 팀장 윤현찬 주무관
○ 도시계획시설사업 실시 계획(시설) 인가 고시		‘16.11.17		이상석 과장 양재규 팀장 윤현찬 주무관
○ 택지분양 및 민간사업자 공모		‘18.04.11		송도근 시장 박성재 부시장 한재천 국장 한윤철 과장 양재규 팀장 황용찬 주무관
○ 잠정 유보		‘18.07.24		송도근 시장 박성재 부시장 허태중 국장 한윤철 과장 김정문 팀장 황용찬 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	곤명면소재지 종합정비사업
② 추진배경	농촌의 쾌적한 생활환경 조성으로 기초생활 및 문화수준 향상, 농촌 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모
③ 사업개요	다솔문화센터조성A=2,646㎡, 녹차공원조성 A=436㎡, 공동생활 홈 조성 A=123㎡, 배후마을 연결도로 정비 L=260m, 김동리 산책로 정비 L=785m, 중심가로 경관정비 L=540m, 봉명로 경관도로 조성 L=320m, 생태하천정비 1개소, 지역역량강화 사업 추진(리더교육, 주민컨설팅 등)
④ 사업부서	사천시 도시재생과		⑤ 담 당 자		부서장 : 시설5급 한윤철 팀 장 : 시설6급 이주은 담당자 : 시설7급 김길규
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간		2016. 1. ~ 2020. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 곤명면 농촌중심지 활성화사업 기본계획 변경 고시		`18.5.17.		박성재 부시장 한재천 국장 한윤철 과장 강민구 팀장 장경현 주무관
○ 곤명면 농촌중심지 활성화사업 시행계획 수립 고시		`18.6.1.		송도근 시장 박성재 부시장 한재천 국장 한윤철 과장 강민구 팀장 장경현 주무관
○ 곤명면 농촌중심지 활성화사업 (2018년분) 시행		`18.7.16.		송도근 시장 박성재 부시장 허태중 국장 한윤철 과장 강민구 팀장 김길규 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	정동권역 창조적마을 만들기사업
② 추진배경	농촌의 쾌적한 생활환경 조성으로 기초생활 및 문화수준 향상, 농촌 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모
③ 사업개요	정동권역교류센터조성 1개소, 마을공동주차장 조성 A=321㎡, 수청마을숲 정비 A=1,328㎡, 사천강변 제방길 경관정비 L=1.86km, 예수마을 쉼터 조성 A=594㎡, 예수둘레길 조성 L=830m, 지역역량강화 사업 추진(리더교육, 권역 컨설팅 등)
④ 사업부서	사천시 도시재생과		⑤ 담 당 자		부서장 : 시설5급 한윤철 팀 장 : 시설6급 이주은 담당자 : 시설7급 박현철
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간		2015. 1. ~ 2020. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 정동권역 창조적마을만들기사업 기본계획 수립 및 고시		`16.12.27.		송도근 시장 양기정 부시장 한재천 국장 이상석 과장 강민구 팀장 장경현 주무관
○ 일반농산어촌개발사업 위․수탁협약 추진 계획		`18.1.23.		송도근 시장 박성재 부시장 한재천 국장 한윤철 과장 강민구 팀장 박현철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	사남면 농촌 중심지 활성화 사업
② 추진배경	사남면 농촌중심지 활성화 사업을 통해 문화·예술 거점공간과 주민화합 활동공간을 마련, 마을 간 지역격차를 해소하고 중심지–배후마을 간 교류 및 지속가능한 사남면 중심지를 조성하고자 함
③ 사업개요	문화복지센터 조성(연면적 660㎡), 교통 ICT 확충사업 조성 1식, 공동생활홈 조성 1식, 사계절 게이트볼장 1개소, 보행자 중심도로정비 L=920m, 중심가로 간판정비 1식, 수변산책로 정비 1,200㎡, 지역역량강화용역(안전지킴이 프로그램, 교육프로그램, 주민복지프로그램 등) 1식
④ 사업부서	사천시 도시재생과		⑤ 담 당 자		부서장 : 시설5급 한윤철 팀 장 : 시설6급 이주은 담당자 : 시설7급 박현철
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간		2017. 1. ~ 2020. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 일반농산어촌개발사업 위탁시행 계획		`18.7.24.		송도근 시장 박성재 부시장 허태중 국장 한윤철 과장 강민구 팀장 박현철 주무관
○ 사남면 농촌중심지 활성화사업 기본계획 수립 고시		`18.10.8.		송도근 시장 박성재 부시장 허태중 국장 한윤철 과장 강민구 팀장 박현철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	사천읍 농촌 중심지 활성화 사업
② 추진배경	사천읍 농촌중심지 및 배후 마을의 특성을 고려한 종합계획을 수립 및 중심지내 생활편익, 문화 복지, 경제 기능을 확충함으로써 중심지 및 배후마을 주민들의 삶의 질 향상에 기여.
③ 사업개요	상인활력센터 연면적750㎡, 두레장터 1,323㎡, 다 어울림지원센터 조성 연면적 382㎡, 특화거리조성, 지역역량강화
④ 사업부서	사천시 도시재생과		⑤ 담 당 자		부서장 : 시설5급 한윤철 팀 장 : 시설6급 이주은 담당자 : 시설7급 박현철
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간		2017. 1. ~ 2020. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 사천읍 농촌중심지 활성화사업 기본계획 수립 및 고시		`18.4.17.		송도근 시장 박성재 부시장 한재천 국장 한윤철 과장 강민구 팀장 장경현 주무관
○ 일반농산어촌개발사업 위탁시행 계획		`18.7.24.		송도근 시장 박성재 부시장 허태중 국장 한윤철 과장 강민구 팀장 박현철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	항공기 복합재 부품 시험평가분석시스템 구축
② 추진배경	항공기 복합재 부품 비중이 폭발적인 증가 추세에 있으나, 국내에는 항공 복합재 부품 전문시험평가 기반이 전무한 실정으로 항공 복합재 부품의 개발, 수출 등 사업화에 필수적인 기반 조성 지원이 절실한 실정임
③ 사업개요	- 사업기간 : 2019. 4. ~ 2021. 12.(33개월) - 사 업 비 : 241억원(국비 80, 도비 78.5, 시비 78.5, 민자 4) - 위 치 : 경남테크노파크(항공우주센터) - 주요내용 : 시험평가 분석시스템 구축, 인증 및 물성치 확보 시스템 구축, 네트워크 구축 등
④ 사업부서	사천시 우주항공과		⑤ 담당자		부서장 : 행정5급 김성조 팀 장 : 행정6급 이의성 담당자 : 행정6급 김종영
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간		2019년 ~ 2021년
<그간 주요 추진내용>
❍ ’19년 지역거점 신규사업 신청(사천시⇒경남도⇒산자부)		2018.01.03.		송도근 시장 박성재 부시장 김대균 우주항공국장 정국현 우주항공과장 도영균 우주항공팀장 김판곤 주무관
❍ ’19년 지역거점사업 선정		2018.04.25.		정국현 우주항공과장 도영균 우주항공팀장 김판곤 주무관
❍ ’19 거점기관지원사업 선정평가위원회(사업 확정)		2019.04.25.		정태현 우주항공국장 김성조 우주항공과장 이의성 우주항공팀장 김종영 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경남 항공국가산업단지 기반시설 지원사업
② 추진배경	항공산업 인프라 구축과 항공 글로벌 G7진입을 위한 경남 항공국가산업단지 조성에 필요한 상·하수도 등 기반시설 지원을 위함.
③ 사업개요	○ 사업목적 : 경남 항공국가산업단지 조성에 따른 기반기설 지원 ○ 위 치 : 용현면 신촌리 일원 ○ 사 업 량 : 폐수펌프장(1,391㎥/일) 1개소, 폐수관로(D200) L=2,200m, 완충저류시설(4,241㎥/일) 2개소, 오수펌프장(400㎥/일) 1개소, 오수관로(D200) L=1,500m, 공업용수관로(D300) L=1,500m ○ 사 업 비 : 19,180백만원(국13,601/ 도1,353/ 시4,226)
④ 사업부서	사천시 우주항공과		⑤ 담 당 자	부서장 : 행정5급 김성조 팀 장 : 시설6급 강장영 담당자 : 시설7급 강민승
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2020. 1 ~2022. 12
<그간 주요 추진내용>
○기반시설 설치공사 추진계획 보고 [우주항공과-5791(2018.9.17.]		‘18.09.17.	송도근 시장 박성재 부시장 김대균 국장 정국현 과장 강순철 팀장 강민승 주무관
○오·폐수연계처리시설 기본 및 실시설계용역 시행 계획 [우주항공과-981(2019.2.7.)]		‘19.02.07.	박성재 부시장 정태현 국장 김성조 과장 강장영 팀장 강민승 주무관
○오·폐수연계처리시설 기본 및 실시설계용역 시행 [우주항공과-1409(2019.2.21.)]		‘19.02.21.	박성재 부시장 정태현 국장 김성조 과장 강장영 팀장 강민승 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	사천시립도서관 건립 사업
② 추진배경	․ 노후한 사천도서관을 대체할 공공도서관 신축 필요성 제기 ․ 시민 문화 복지 향상 및 정주여건 개선
③ 사업개요	․ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 7.(4년간) ․ 사업위치 : 정동면 예수리 552-2번지 일원 ․ 사 업 량 - 건립규모 : 연면적 4,638㎡(지상 3층, 지하 1층) - 주요시설 : 자료실, 다목적실, 다목적홀, 북카페 등 ․ 사 업 비 : 196억원(국비 72, 시비 124)
④ 사업부서	사천시 평생학습센터		⑤ 담당자		부서장 : 행정5급 서효숙 팀 장 : 행정6급 문상희 담당자 : 행정7급 이준형
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간		2019. 1.~2022. 7.
<그간 주요 추진내용>
○ 부지매입 완료		’12. 6.
○ 공유재산관리계획 심의 의결		’18. 10.
○ 중기지방재정계획 반영		’18. 11.
○ 타당성조사 및 기본계획수립 연구용역 [평생학습센터-486(2019.1.26.)]		’19. 1. ~ 4.		서효숙 소장 문상희 팀장
○ 2019년 공공도서관 건립지원 타당성검토 심사 결과 통보(적정) [경남도 문화예술과-3478(2019.3.15.)]		’19. 3.

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	사등 위생매립장 확장사업(2-2단계)
② 추진배경	생활폐기물의 배출량 증가로 매립시설이 포화상태에 도달하여 현 매립시설의 수직 확장으로 매립용량 확보
③ 사업개요	현 매립장 수직 확장(매립용량 200,000㎥)
④ 사업부서	사천시 환경사업소		⑤ 담 당 자		부서장 : 5급 신현범 팀 장 : 6급 성인욱 담당자 : 8급 정성도
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간		’18년~’19년
<그간 주요 추진내용>
○ 사등 위생매립장 확장(2-2단계) 공사(2019년분) 시행		‘19.01.07		송도근 시장 박성재 부시장 이영재 국장 신현범 소장 성인욱 담당 정성도 주무관
○ 사등 위생매립장 확장사업 (2-2단계) 실시설계용역 완료		‘18.05.28		박종원 소장 조용기 담당 정성도 주무관
○ 사등 위생매립장 확장(2-2단계) 공사(총괄분, 2018년분) 시행		‘18.05.02		박성재 부시장 박헌진 국장 박종원 소장 조용기 담당 정성도 주무관
○ 사등 위생매립장 확장사업(2-2단계) 실시설계용역 시행		‘17.10.10		박헌진 국장 박종원 소장 조용기 담당 정성도 주무관
○ 사등 위생매립장 확장사업 (2-2단계) 추진계획		‘17.09.19		송도근 시장 윤인국 부시장 박헌진 국장 박종원 소장 조용기 담당 정성도 주무관
○ 2017년 제3회 사천시 지방재정계획시의위원회 심의자료 제출		‘17.09.07		박종원 소장 조용기 담당 정성도 주무관
○ 2018년도 폐기물처리시설 국고보조사업 신청서 제출		‘17.03.13		박종원 소장 오남덕 담당 정영복 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	유기성폐자원 바이오가스화 사업
② 추진배경	◦음식물류폐기물의 내구연수 도래(2019년)에 따른 대체시설 필요 ◦유기성폐자원의 자원화로 자원순환사회 기반 조성
③ 사업개요	◦목 적 : 시설용량(20톤/일) 초과 음식물류폐기물량(28톤/일)의 안정적 처리 및 폐자원의 재활용 ◦위 치 : 사등동 114-1번지 일원(삼천포공공하수처리시설 내) ◦시설용량 : 음식물류폐기물 공공처리시설 40톤/일(하수병합 혐기성 소화) ◦총사업비 : 7,600백만원
④ 사업부서	사천시 환경사업소		⑤ 담 당 자		부서장 : 5급 신현범 팀 장 : 6급 성인욱 담당자 : 7급 정영복
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간		’16년~’19년
<그간 주요 추진내용>
○ 사천 음식물바이오가스화사업 총사업비 및 사업기간 조정 요구 ※ 사천 음식물바이오가스화사업 총사업비 조정요구서 제출		‘18.8.10.		도영균 소장 조용기 팀장 정영복 주무관
○ 음식물 바이오가스화사업 기본 및 실시설계 추진 ※ 사천 음식물 바이오가스화사업 기본 및 실시설계용역 시행		‘17.4.20.		송도근 시장 양기정 부시장 박헌진 국장 박종원 소장 오남덕 팀장 정영복 주무관
○ 음식물 바이오가스화사업 총사업비 조정에 따른 추진계획 수립 ※ 사천 음식물 바이오가스화사업 추진계획 ※ 사천시 음식물바이오가스화시설 조성사업 총사업비 및 사업기간 조정알림		‘17.3.31.		송도근 시장 양기정 부시장 박헌진 국장 박종원 소장 오남덕 팀장 정영복 주무관
○ 최적화 협의 결렬로 단독시설 설치 건의에 따른 총사업비 조정 요구 ※ 사천시 유기성폐자원 바이오가스화시설 설치사업 총사업비 조정요구서 제출		‘16.11.2.		박종원 소장 오남덕 팀장 신경민 주무관
○ 음식물 바이오가스화 사업 최적화(광역화) 실무협의 추진 ※ 음식물 바이오가스화 사업 최적화(광역시설 설치) 실무협의회 개최결과 보고		‘16. 3.28.		송도근 시장 양기정 부시장 박태정 국장 강영호 소장 윤병호 팀장 최봉철 주무관
○ 음식물 바이오가스화 사업 최적화(광역화) 추진계획(안) 수립		‘16. 3. 9.		송도근 시장 양기정 부시장 박태정 국장 강영호 소장 윤병호 팀장 최봉철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	사천읍 하수도정비중점관리지역 도시침수대응사업
② 추진배경	최근 기후변화로 인한 국지성 집중호우와 도심지역의 불투수 면적 증가로 도시침수로 인명 및 재산피해가 늘어남에 따라 상습침수지역에 우수 및 일부 하수관거에 대한 정비로 생활기반 안전확보
③ 사업개요	우수관거 개량 L=7.2km, 구역면적 A=2.22㎢
④ 사업부서	사천시 하수도사업소		⑤ 담당자		부서장 : 공업5급 정병화 팀 장 : 시설6급 강영실 담당자 : 시설7급 정연평
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간		2019. 1. 3. ~ 2021. 6. 20.
<그간 주요 추진내용>
○ 2017년도 하수도정비 중점관리 지역 선정결과 통보 - 환경부 → 사천시		‘16.05.24		송도근 시장 양기정 부시장 한재천 국장 이동승 소장 강장영 팀장
○ 하수도 중점관리지역 정비사업 추진계획 - 기본 및 실시설계용역비 확보 관련		‘16.06.01		송도근 시장 양기정 부시장 한재천 국장 이동승 소장 강장영 팀장
○ 재원협의 검토결과 및 총사업비 변경승인 - 환경부(낙동강유역환경청) → 사천시		‘18.09.03		허태중 국장 정병화 소장 강영실 팀장
○ 사업추진(발주,착수) 계획 보고		‘18.09.28		허태중 국장 정병화 소장 강영실 팀장
○ 사업추진(총괄분) 시행 품의 - ‘19.01.03 : 착수일		‘18.10.01		박성재 부시장 허태중 국장 정병화 소장 강영실 팀장