시민이 먼저입니다

‘16년도「정책실명제 」 중점관리 대상사업 현황

	사 천 시 (기획예산담당관)

2016년도 정책실명제 중점관리 대상사업 선정 대상 현황

연번	정 책 명	총사업비 (백만원)		사업부서	선정․심의		비고
					중점대상	내부이력
합계	34건	697,987		13개 부서
1	사천시 장애인 국민체육센터 건립	8,500		주민생활 지원과	○
2	고려황제 현종부자 상봉길 조성사업	400		문화관광과	○
3	비토국민여가캠핑장 조성사업	2,000		문화관광과	○
4	종합운동장(사천,삼천포) 천연잔디 관리 용역	171		체육지원과	○
5	예동 재해위험지구 정비 사업	6,394		재난안전과	○
6	노산공원 재해위험지구 정비 사업	8,533		재난안전과	○
7	사주동계 재해위험지구 정비 사업	22,350		재난안전과	○
8	선진~신촌간 연안정비 사업	22,810		해양수산과	○
9	사천 남일대 명승지 주변 정비사업	3,800		해양수산과	○
10	남양중학교~송포교간 도시계획 도로 확·포장	48,000		도시과	○
11	사주천년교 가설공사	8,000		도시과	○
12	신수도바다마을 쉼터조성사업	4,409		건설과	○
13	사천시 소하천 종합 정비계획	2,000		건설과	○
14	국도3호선 송포교차로 개선사업	8,000		도로과	○
15	사천흥사일반산업단지 진입도로 확ㆍ포장	30,228		도로과	○
16	복상~감곡간 도로 확ㆍ포장	2,800		도로과	○
17	주문~대례간 도로 확ㆍ포장	3,500		도로과	○
18	사천 바다케이블카 설치사업	60,000		도로과	○
19	초양도 관광거점 마을 만들기	4,850		도로과	○
20	사천대방 관광자원 개발사업	9,600		도로과	○
21	자혜교차로 연결도로 확ㆍ포장	2,000		도로과	○
22	두량5리~두량3리간 도로 확·포장	1,600		도로과	○
23	가화도로 확․포장	2,700		도로과	○
24	광역자전거도로 및 회암·배춘 진입로 확·포장	5,030		도로과	○
25	향촌2지구 산업단지 조성사업	20,000		산업단지과	○
26	용당(MRO)산업단지 조성사업	90,000		산업단지과	○
27	송포 도시첨단산업단지조성	160,000		산업단지과	○
28	축동구호농공단지 조성사업	11,300		산업단지과	○
29	축동일반산업단지 조성사업	51,900		산업단지과	○
30	종포일반산업단지조성	63,000		우주항공과	○
31	농산물종합가공센터 설치	1,300		미래농업과	○
32	학점은행제 평생하습대학 설치 운영	2,850		평생학습센터	○
33	삼천포 하수관거 개보수	12,569		상하수도사업소	○
34	사천지구(2단계) 하수관거 정비	17,393		상하수도사업소	○

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	주민생활지원과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 김성순(831-2600) 담 당: : 행정6급 박주봉(831-2629) 담당자 : 시설7급 김태현(831-2627)
③정책사업명	사천시 장애인 국민체육센터 건립
④선정기준	1억원 이상의 용역사업		⑤사업기간		2015.~2017.12
⑥주요내용	1. 목 적 □장애인 체육복지 증진 및 생활체육 활성화 공간 조성 □장애인의 자립생활 능력 향상 및 정서적 안정과 사회성 향상 도모 2. 추진상황 □ ́14. 08. : 장애인 국민체육센터 건립 계획 수립 □ ́14. 09. ~ ́15.02 : 건립에 따른 사전 행정절차 이행 완료 (공유재산 심의 및 관리계획 의결, 지방재정 투․융자 심사 통과, 중기지방재정계획 반영, 사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역) □ ́15.01 : 당초예산 확보(시비 10억원) □ ́15.03.06 : 장애인 국민체육센터 건립사업 공모 신청 □ ́15.05.04 : 건립 지원대상 확정 통보(문체부⇒경상남도⇒사천시) □ ́15.06.11 : 기금 10억원 수령 (국민체육진흥공단⇒경상남도⇒사천시) □ ́16.03.21 : 설계발주방식 및 추진계획 검토 보고 □ ́16.03.24 : 공공건축 사업계획서 사전검토 협의 (국가공공건축지원센터) 3. 향후계획 □ ́16.04. : 공공건축 사업계획 사전검토 □ ́16.05. : 설계공모 추진

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (전화번호)	과장 : 행정사무관 김대균(831-2700) 담당 : 행정6급 임정의(831-2729) 담당자: 행정7급 강정제(831-2725)
③정책사업명	고려황제현종부자상봉길 조성사업
④선정기준	1억원이상의 용역사업	⑤사업기간	2015. 3월∼2016. 12월
⑥주요내용	1. 사업개요 ❍ 위 치 : 정동면․사남면 일원 ❍ 기 간 : 2015. 1 ~ 2016. 12월 ❍ 사 업 량 : 부자 상봉길 조성 10㎞ (능화마을⇔배방사지, 3시간 소요) ❍ 사 업 비 : 400백만원(도비 200, 시비 200) ❍ 내 용 - 안내판(종합안내판 2개, 개별안내판 25개), 벽화 1식, 포토존 1식, 6각 정자 1식, 편의시설 등 2. 2016년 추진일정 ❍ 사 업 량 : 벽화 1식, 꽃동산 조성, 편의시설 1식 등 ❍ 설계용역 : 2016. 3월∼10월 ❍ 사업착공/준공 : 2016. 5월/10월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (전화번호)	과장 : 행정사무관 김대균(831-2700) 담당 : 행정6급 정종욱(831-2734) 담당자: 행정7급 조현범(831-2730)
③정책사업명	비토국민여가캠핑장 조성사업
④선정기준	관광자원개발	⑤사업기간	‘16.1 ~’17.12
⑥주요내용	1. 사업개요 ❍ 위 치 : 사천시 서포면 비토리 별주부전테마파크내 ❍ 시설개요 : 야영장 54면, 편익시설 등(숲속도서관,물놀이장) ❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2017년 ❍ 사 업 비 : 20억원(국비10, 도비3, 시비7) 2. 주요 추진상황 ❍ ‘15. 06. 12 : 기본계획수립용역 착수 ❍ ‘15. 08. 31 : 용역보고회 개최(대상지 확정) ❍ ‘15. 10. 14 : 캠핑장 조성사업 대상지 공모 선정(경남도) ❍ ‘15. 11. 12 : 기본계획수립용역 완료 ❍ ‘16. 03. 15 : 용역착수( 용역사 : 한가람이엔씨) 3. 향후계획 ❍ ‘16. 03 ~ 06 : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 ❍ ‘16. 07 ~ ’17. 12 : 공사착수 및 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	체육지원과	②담당자 (연락처)	부서장 : 행정5급 허태중 (831-2400) 담 당 : 시설6급 한윤철 (831-2424) 담당자 : 공업8급 이근형 (831-2423)
③정책사업명	종합운동장(사천, 삼천포) 천연잔디 관리 용역
④선정기준	1억 이상의 용역사업			⑤사업기간	2015.06.03. ~
⑥주요내용	1. 사업목적 - 사천, 삼천포종합운동장 천연잔디의 효율적 관리를 통해 잔디관리의 전문성 제고 및 시민의 체육 서비스 질 향상에 기여하고자 천연잔디 관리 용역시행 2. 사업개요 - 위 치 : 사천종합운동장(사천시 사천읍 정의리 7) 삼천포종합운동장(사천시 벌리동 4) - 사업기간 : 2015.06.03. ~ - 사 업 량 : 사천종합운동장 잔디관리 7,279㎡ 삼천포종합운동장 잔디관리 8,970㎡ - 총 사업비 : 연간 200백만원(시비) 3. 추진상황 ○ 2015.03.31~04.02 : 용역설계서 일상감사 ○ 2015.04.06~04.14 : 용역설계서 계약심사 ○ 2015.04.14. : 계약의뢰 및 공고 ○ 2015.06.02. : 2015년 관리 용역 계약 - 계약업체/계약기간 : ㈜양산조경/2015.06.03.~2016.06.01. - 계약금액 : 151백만원

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	재난안전과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 박영철(831-3300) 담 당 : 시설6급 김현수(831-3319) 담당자 : 시설8급 백근태(831-3315)
③정책사업명	예동 재해위험지구 정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2013 ~ 2017
⑥주요내용	1. 추진배경 - 저지대의 주택지 및 농경지 침수에 따른 인명과 재산피해 예방을 위함 2. 위 치 : 사천시 축동면 사다리 예동마을 일원 3. 추진기간 : 2013 ~ 2017 4. 사 업 량 - 하천개수공사 L=850.0m, 교량설치 N=4개소 - 침수주택이주 9가구 5. 총사업비 : 6,394백만원(국비 3,247, 도비 3,147) 6. 주요내용 - 토지보상 및 침수주택이주(9가구) - 하천개수 공사 L=850.0m 7. 추진경과 - 2012. 04. 14 : 재해위험지구 지정고시 - 2013. 01. : 신규사업 확정 - 2013. 04. 26 : 예동 재해위험지구 실시설계용역 착수 - 2013. 07. : 주민의견 수렴 및 설명회 개최 - 2013. 11. 18 : 소방방재청 실시설계 사전검토(1차) - 2014. 05. 03 : 소방방재청 실시설계 사전검토(2차) - 2015. 03. 13 : 사전검토 위원 의견 조치계획 제출 - 2016. 01. 28 : 소규모 환경영향평가 협의 (낙동강유역 환경청)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	재난안전과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 박영철(831-3300) 담 당 : 시설6급 김현수(831-3319) 담당자 : 시설9급 정연평(831-3316)
③정책사업명	노산공원 재해위험지구 정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2012 ~ 2016
⑥주요내용	1. 추진배경 - 절리면 풍화로 인한 낙석 및 붕락의 위험으로부터 인명과 재산피해 예방을 위함 2. 위 치 : 사천시 동서금동 노산공원 일원 3. 추진기간 : 2012 ~ 2016 4. 사 업 량 - 낙석방지책 L=198m, 완충지대조성 A=2,350㎡ - 배수관로 L=281m, 방재수목 1식 5. 총사업비 : 8,533백만원 (국비 4,464, 도비 1,170, 시비 2,733, 기타 166) 6. 주요내용 - 위험지구 주택이주(30가구), 보상 및 사업추진 7. 추진경과 - 2009. 01. 05 : 재해위험지구 지정고시 - 2011. 12. 30 : 신규사업 확정 - 2012. 02. 10 : 노산공원 재해위험지구 실시설계용역 착수 - 2012. 04. 19 : 주민의견 수렴 및 설명회 개최(등대경로당) - 2012. 07. 06 : 소방방재청 실시설계 사전검토(1차) - 2012. 09. 05 : 소방방재청 실시설계 사전검토(2차) - 2012. 12. 04 : 사전설계 승인 - 2012. 12. 04 ~ 현재 : 위험주택 보상 및 사업추진

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	재난안전과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 행정5급 박영철(831-3300) 담 당 : 시설6급 김현수(831-3319) 담당자 : 시설8급 백근태(831-3315)
③정책사업명	사주·동계 재해위험지구 정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2010 ~ 2016
⑥주요내용	1. 추진배경 - 집중호우 시 사천강 수위상승에 따른 내수배제 불량으로 저지대 주택지, 농경지의 인명 및 재산피해 예방 2. 위 치 : 사천읍 사주리, 정동면 고읍리 동계마을 일원 3. 추진기간 : 2010 ~ 2016 4. 사 업 량 - 배수펌프장 2개소(사주 Q=5.0㎥/s, 동계 Q=11.0㎥/s) - 배수로 정비(B=1.5~15.0m) : L=1.241km - 동계소하천 정비(B=10.5~14.0m) : L=0.988km 5. 총사업비 : 22,350백만원 (국비 11,936, 도비 3,344, 시비 6,405, 기타 665) 6. 주요내용 - 동계 배수펌프장 준공 7. 추진경과 - 2006. 12. 18 : 재해위험지구 지정고시 - 2010. 02. 22 : 실시설계용역 착수 - 2010. 12. 24 : 소방방재청 실시설계 사전심의 - 2011. 03. 14 : 환경영향평가 협의 - 2011. 03. ~ 12. : 실시설계 경제성 검토 등 행정절차 이행 - 2012. 01. 25 : 공사착공 - 2012. 02. 06 : 전면책임감리용역 착수 - 2016. 01. 23 : 공사준공 - 2016. 02. 04 : 전면책임감리용역 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	해양수산과	②담당자 (전화번호)		부서장 : 해양수산5급 강호진 (831-3100) 담 당 : 해양수산6급 김용관 (831-3129) 담당자 : 시설6급 강순철 (831-3125)
③정책사업명	선진~신촌간 연안정비사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2010~2020
⑥주요내용	1. 추진배경 - 연안정비 기본계획에 의한 중장기계획사업이며, - 자연 환경 및 관광자원과 연계한 해양관광시설 및 이용객의 친수시설을 조성하여 어민 소득 증대는 물론 지역경제 활성화 할 수 있는 친수공간으로 개발토록 하는 사업 2. 추진기간 : 2010. 01. ~ 2020. 12. 3. 총사업비 : 22,810백만원 4. 주요내용 - 선진리 지구 : 수변공원 21,016m2, 축제의 거리 461m, 물양장 65m - 신촌리 지구 : 친수호안도로 1,040m, 해안도로 확․포장 960m 5. 추진경과 - ‘06.07. : 국가시행 연안정비사업 확정 - ‘08.06.03. : 기본설계 용역 완료(해양수산부) - ‘09.05.27. : 제2차 연안정비 기본계획 반영 - ‘09.10.06. : 투.융자심사 - ‘11.07.29. : 제3차 공유수면매립기본계획 반영 - ‘11.09.30. : 건설기술심의 (경남도) - ‘11.06.17.~’11.8.4. : 설계의 경제성 검토용역 완료 - ‘11.08.04. : 재해영향 평가 - ‘11.09.29. : 설계의 경제성 검토용역 - ‘11.09.30. : 건설기술 심의 (경남도)

⑥주요내용	- ‘10.04.16.~’11.10.15. : 실시설계 완료 - ‘12.02.29. : 환경영향 평가 - ‘12.05.03. : 도시계획시설(도로) 결정 고시(2012-76호) - ‘12.06.01. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가고시 - ‘12.06.05. : 연압정비사업 실시계획(안)협의(국토해양부) - ‘12.08.27. : 문화재 조사 - ‘12.09.05. : 계약심사 - ‘12.09.11. : 선진~신촌간 연안정비사업 실시계획 수립 고시(2012-154호) - ‘12.09.11. : 공유수면매립 면허 고시 및 해역이용협의 - ‘12.10.19.~’14.01.23.: ‘11년분 및 ’12년분 사업 준공 (친수호안도로 670m) - ‘14.05.08. : 계약심사 - ‘14.06.09.~’15.06.08. : ‘14년분 착공(신촌해안도로554m, 선진해안도로 250m) 및 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

해양수산과

②담당자

(전화번호)

부서장 : 해양수산5급 강호진 (831-3100)

담  당 : 해양수산6급 홍기은 (831-3139)

담당자 : 해양수산6급 홍기은 (831-3139)

③정책사업명

사천 남일대 명승지 주변 정비사업

④선정기준

총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업

⑤사업기간

2015~2017

⑥주요내용

1. 추진배경

- 신라말의 대문장가 고운 최치원 선생이 수려한 경관에 “남녘에서 가장 빼어난 절경”이라는 뜻으로 명명한 남일대의 정체성과 역사성을 재조명하여 관광자원 개발

- 남일대 명승지를 역사성과 예술성이 조화하는 관광지로 개발하여 관광객 유치를 통한 지역경기 활성화를 도모

2. 사업개요

- 위    치  : 사천시 향촌동 일원

- 사업기간  : 2015 ~ 2017 (3년간)

- 사업내용  : 관광자원 개발

- 총 사업비 : 3,800백만원 (광특 1,900  도비 570  시비 1,330)

- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년 까지	2015년	2016년	2017 이후
계	3,800	-	1,000	1,000	1,800
국비(광특)	1,900	-	500	500	900
도 비	570	-	150	150	270
시 비	1,330	-	350	350	630
기 타	-	-

3. 향후 추진 계획

- 2016. 8월 중 : 사천 남일대 명승지 주변정비사업기본및실시설계용역완료

- 2016년 10월중 : 사천 남일대 명승지 주변 정비사업 시행

- 2017년 12월 : 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시과	②담당자 (전화번호)	부서장 : 시설5급 김상돈 (831-3150) 담 당 : 시설6급 정재화 (831-3169) 담당자 : 시설7급 박재현 (831-3166)
③정책사업명	남양중학교~송포교간 도시계획도로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업			⑤사업기간	2011~2016
⑥주요내용	1. 사업의 목적 ○ 동지역 관문 도로의 쾌적한 가로 환경 조성 2. 사업개요 ○ 위 치 : 사천시 송포동, 죽림동 일원 ○ 사업기간 : 2011. ~ 2020. ○ 사 업 량 : L=3.3km, B=25 ~ 50m - 1차구간 : 국도3호선~남양중학교 L=900m, B=25m - 2차구간 : 남양중학교~죽림삼거리 L=1,500m, B=25m - 3차구간 : 죽림삼거리~대성초교 L=900m, B=50m ○ 사 업 비 : 480억원(보상비 315 ,공사비 160 기타 5 ) 3. 추진사항 ○ ‘11. 4월 : 1차구간 실시설계 ○ ‘12. 9월 : 1차구간 공사 준공 ○ ‘14. 5월 : 2차구간 실시설계 ○ '15. 4월 ~ 현재 : 2차구간 공사시행중

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시과	②담당자 (전화번호)	부서장 : 시설5급 김상돈 (831-3150) 담 당 : 시설6급 정재화 (831-3169) 담당자 : 시설7급 박재현 (831-3166)
③정책사업명	사주천년교 가설공사
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간	2014 ~ 2018
⑥주요내용	1. 사업의 목적 ○ 사천읍 시가지 우회도로를 확보하여 시내통과 차량의 분산 으로 교통난 해소 2. 사업개요 ○ 위 치 : 정동면 예수리 550-1~고읍리 589-2번지 ○ 사업기간 : 2014. 3. ~ 2018. 12. ○ 사 업 량 : L=280m, B=20.0m (교량가설L=280m, B=20.0m) ○ 사 업 비 : 80억원(보상비 5억,공사비 72억, 기타 3억) 3. 추진사항 ○ ‘14. 3월 : 지방재정 투․융자 심사 ○ ‘14. 3월 ~ ’15. 10월 : 실시설계용역 준공 ○ ‘15.12월 : 공사발주 ○ '16. 3월 : 공사착공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

건설과

②담당자

(연락처)

부서장 : 시설5급 강삼중 (831-3250)

담  당 : 시설6급 이제훈 (831-3269)

담당자 : 시설6급 장경현 (831-3266)

③정책사업명

신수도바다마을 쉼터조성사업

④선정기준

총사업비 10억 원 이상의

건설 및 개발사업

⑤사업기간

2011 ~ 2016

⑥주요내용

1. 추진목표

○ 낙후된 도서지역에 생활 및 생산기반시설을 확충함으로서 지역주민의 소득증대와 복지향상을 기하고 지역간 격차를 해소하여 지역의 균형있는 발전을 도모

2. 사업내용

○ 위 치 : 사천시 동서동 신수도 일원

○ 사업량 : 복합문화터미널 1동, 힐링공원 30,000㎡, 캠핑장1개소,               탐방로조성 0.95km, 트레킹코스설치 5.5km

※ 2016년 :힐링공원 30,000㎡,캠핑장 1개소,

탐방로조성 0.95km, 트레킹코스설치 5.5km

○ 사 업 비 : 4,409백만원(국비 3,528, 도비 424  시비 457)

※ 2016년 : 1,409백만원(국비 1127  도비 141  시비 141)

○ 사업기간 : 2011 ~ 2016

분기별 추진계획		세부일정	비 고
1/4	○ 주민설명회 및 세부설계	2016. 1～3월	○ 소요예산: - 2,590백만원 (이월사업비포함)
2/4	○부지매입 및 공사 착공	2016. 4～6월
3/4	○ 공사추진	2016. 7～9월
4/4	○ 공사완료	2016. 11월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

건설과

②담당자

(연락처)

부서장 : 시설5급 강삼중 (831-3250)

담  당 : 시설6급 서성우 (831-3274)

담당자 : 시설6급 구자회 (831-3271)

③정책사업명

사천시 소하천 정비 종합계획

④선정기준

1억 원 이상의 용역사업

⑤사업기간

2014.09 ~2017.09

⑥주요내용

1. 추진배경

○ 「소하천정비법」제6조 제1항 규정 상 소하천정비종합계획을 10년마다 수립하여 시․도지사의 승인을 받도록 규정하고 있는 법정사무임

2. 사업내용

○ 위    치 : 사천시 관내

○ 사 업 량

- 소하천정비 종합계획 용역 L=166.71km

○ 사 업 비 : 20억 원(시비100%)

※ 2016년 예산 : 5억 원

○ 사업기간 : 2014. 9. 18 ~ 2017. 09. 16(3년간)

분기별 추진계획		세부일정	비 고
1/4	○ 2016년도분 착수	2016.02
2/4	○ 소하천대장 작성	2016.04~2016.06
3/4	○ 소하천대장 작성	2016.07~2016.09
4/4	○ 2016년도분 사업완료	2016.10~2016.12

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설 5급 채영석 (831-3350) 담 당 : 시설6급 유재기 (831-3379) 담당자 : 시설7급 신성현 (831-3377)
③정책사업명	국도3호선 송포교차로 개선사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2014. 1. ~ 2017. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 국도3호선 상습정체구간 및 도로병목지점 개선으로 교통사고 예방 및 진출․입로 개선으로 지역경제 활성화와 산업물동량 수송원활 도모 2. 추진기간 : 2014. 1. ~ 2017. 12. 3. 총사업비 : 8,000백만원(국비 5,000 시비 3,000) 4. 주요내용 - 위 치 : 송포동 송포교차로(국도3호선) - 사업개요 : 교차로 개선 L=950m, B=10m, 교량 설치 L=50m, B=20.9m - 수 급 자 : 관보토건(주) 대표 김 상 우 - 건설사업관리용역자 : (주)진우엔지니어링코리아 대표 양현 외 1개사 - 현 공 정 : 20% 5. 추진경과 - ‘13. 12. 12 : 부산지방국토관리청과 대행공사 협약 체결 - ‘14. 04. 09 ~ ’15. 05. 18 : 실시설계용역 - ‘15. 05. 21 : 도로구역 결정(변경) - ‘15. 06. 19 : 총괄분 및 2015년분 공사착공 - ‘16. 03. 28 : 2016년분 공사착공 - ‘16. 6월 : 2015년분 준공예정 - ‘17. 1월 : 2017년분 공사착공 - ‘17. 6월 : 총괄분 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설 5급 채영석 (831-3350) 담 당 : 시설6급 유재기 (831-3379) 담당자 : 시설6급 이기영 (831-3375)
③정책사업명	사천흥사일반산업단지 진입도로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2013 ~ 2016.12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 흥사일반산업단지 조성에 따른 진입도로 지원 사업으로 산업단지 기반시설확보 및 지역주민 생활환경 개선 2. 추진기간 : 2013. 4. 8. ~ 2015. 12. 7. 3. 총사업비 : 30,228백만원(국비 29,977, 시비 251) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 축동면 가산리~곤양면 흥사리일원 - 사업개요 : 도로 확포장 L=5.15km, B=10~13m, 교량 1기 - 시 행 자 : 글로웨이(주)대표 강용호외 2개사 - 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 대표 노진명외 1개사 - 현 공 정 : 88% 5. 추진경과 - 2011. 08. 08. ~ 2013. 2. 20. : 실시설계용역 착수 및 준공 - 2013. 03. 21. : 진입도로 사업 승인고시 (경남도 고시 제2013-112호) - 2013. 04. 08. : 총괄분 및 2013년도분 착공 - 2013. 04. 26. : 전면책임감리 착수 - 2015. 04. ~ 2016.4. 도로확포장 공사중

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설 5급 채영석 (831-3350) 담 당 : 시설6급 유재기 (831-3379) 담당자 : 시설7급 신성현 (831-3377)
③정책사업명	복상~감곡간 도로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2008. 1. ~ 2016. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대 2. 추진기간 : 2008. 1. ~ 2016. 12. 3. 총사업비 : 2,800백만원(시비 2,800) 4. 주요내용 - 위 치 : 정동면 감곡리 지내(군도9호선) - 사업개요 : 도로 확․포장 L=1.13km, B=8.0m - 시 행 자 : (주)구현 대표 박영호 - 현 공 정 : 100% 5. 추진경과 - ‘07. 12. 07. : 투융자심사 적정 - ‘09. 01. 02. : 공사 착공(총괄입찰, 연차공사 추진) - ‘10. 9월 : L=260m 기층포장 완료 - ‘11. 9월 : L=260m 표층포장 완료 - ‘12. 6월 : L=200m 확․포장 완료 - ‘13. 10월 : L=340m 확․포장 완료 - ‘15. 2월 : 2014년분도분 준공 - ‘15. 2월 : 2015년도분 착공 - ‘16. 2월 : 총괄분 및 2015년도분 준공(사업완료)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 채영석 (831-3350) 담 당 : 시설6급 유재기 (831-3379) 담당자 : 시설9급 정성도 (831-3358)
③정책사업명	주문~대례간 도로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2009. 1. ~ 2016. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 도로의 개설사업을 통한 사회기반시설 확충 및 통행 불편 해소 2. 추진기간 : 2009. 01. ~ 2016. 12. 3. 총사업비 : 3,500백만원(시비 3,500) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 용현면 주문리, 대포동일원 - 사업개요 : 도로 확포장 L=670m, B=12~15m - 현 공 정 : 50% 5. 추진경과 - 2008. 10. 10. : 투융자심사 적정 - 2010. 02. 22. : 실시설계용역 완료 - 2010. 01. 08. : 도로구역결정(변경) 고시(사천시 고시 제2010-22호) - ‘10. 1월∼‘13. 12월 : 토지보상 - ‘14. 6월 : 총괄분 착공 - ‘14. 12월 : 2014년분도분 공사준공 - ‘15. 1월 : 2015년도분 공사착공 - ‘15. 12월 : 2015년도분 공사준공 - ‘16. 3월 : 2016년도분 공사착공 - ‘16. 4월 : 도로확․포장 공사 추진중

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 채영석(831-3350) 담 당 : 시설6급 박영수 (831-2289) 담당자 : 시설7급 박용국 (831-2285)
③정책사업명	사천바다 케이블카 설치사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2012. 1 ~ 2018. 1
⑥주요내용	1. 사업목적 - 한려해상국립공원에 위치한 천혜의 섬, 바다, 다리를 조망할 수 있는 특화된 해상 케이블카 설치로 지역경제 활성화 2. 사업개요 - 위 치 : 사천시 동서동 일원 - 사업규모 : 삭도 L=2.43Km, 상․중․하부정류장 각 1개소 - 사 업 비 : 60,000백만원(국비 5,000 도비 10,000 시비 45,000) - 사업기간 : 2012. 1. ~ 2018. 1. - 시 행 자 : 사천시장 3. 추진사항 - '12. 06. : 공원계획변경 승인 및 삭도시범사업 선정(환경부) - '13. 06. : 케이블카 사업계획 변경(중간역사 추가)협의(환경부) - '13. 10. : 지방재정 중앙 투․융자 심사 승인(조건부) - '15. 05. : 실시설계 최종보고 및 시의회 현황보고 - '15. 07. : 도시관리계획(도시계획시설-궤도) 결정(변경) - '15. 08. : 풍동실험 및 지방건설기술심의 위원회심의 완료 - '15. 11. : 환경영향평가 협의 완료 및 공원사업시행허가 - '15. 12. : 공사착공 4. 향후계획 - '16. : 공사진행 및 ISO14001인증 - '18. 01. : 사업준공 및 시운전

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 채영석(831-3350) 담 당 : 시설6급 박영수 (831-2289) 담당자 : 시설7급 이덕수 (831-2287)
③정책사업명	초양도 관광거점 마을 만들기
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2012. 10. ~ 2018. 2
⑥주요내용	1. 사업목적 - 해상케이블카 중간 역사인 초양도에 케이블카와 연계한 편의시설 및 해양친수 관광거점마을 조성 필요 2. 사업개요 - 위 치 : 사천시 동서동 일원(초양도) - 사업규모 : 물양장 확장, 부둣가 도막형 포장, 초양쉼터, 섬꽃․장미원, 전망시설, 보행육교, 흙포장 등 - 사 업 비 : 4,850백만원(도비 2,425 시비 2,425) - 사업기간 : 2012. 10. ~ 2018. 2 - 시 행 자 : 사천시장 3. 추진사항 - '12. 10. : 지역균형발전 사업 발굴계획 수립 - '13. 01. : 지역균형발전사업 수정심의 채택(경상남도) - '13. 03. : 사천시 지방재정 투․융자 심사 완료(조건부) - '14. 01. : 기본계획 수립 - '14. 05. : 실시설계 및 국립공원계획변경 용역 시행 - '14. 11. : 공원계획 변경 사전협의(환경부, 국립공원) - '14. 12. : 공유재산 심의 - '15. 01. : 실시설계 최종 보고회 개최 - '15. 05. : 실시설계 완료 - '15. 06. : 공사착공 4. 향후계획 - '18. 02. : 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 채영석(831-3350) 담 당 : 시설6급 박영수 (831-2289) 담당자 : 시설7급 박용국 (831-2285)
③정책사업명	사천대방 관광자원 개발사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2013 ~ 2018
⑥주요내용	1. 사업목적 - 전국에서 가장아름다운 길 대상에 선정된 삼천포 대교를 찾는 관광객의 관광자원 개발을 통한 관광인프라 구축 2. 사업개요 - 위 치 : 사천시 동서동 일원(대방동) - 사 업 량 : A=12,570㎡(도로 및 광장, 휴양시설, 편익시설, 녹지 및 기타) - 사 업 비 : 9,600백만원(국비 4,400 도비 1,320 시비 3,880) - 사업기간 : 2013 ~ 2018 - 시 행 자 : 사천시장 3. 추진사항 - '12. 11. : 중간역사 타당성검토 및 교통 영향분석 용역발주 - '13. 06. : 중간역사 설치를 위한 환경부 협의 - '13. 11. : 지방재정 투․융자 자체 심사 승인(조건부) - '13. 12. : 도시계획시설(공원)결정 및 지형도면 승인 고시 - '14. 03. : 조성계획 실시설계 용역발주 - '14. 07. : 지방재정 투융자 경남도 승인(조건부) - '15. 05. : 2016년 지특사업(사천대방 관광자원 개발사업 신청) - '15. 07. : 실시설계 용역재개 - '15. 10. : 사천대방 관광자원 개발사업 가 내시 통보 4. 향후계획 - '16. 04. : 실시설계 완료 - '16. 06. : 업체선정 및 공사 착공 - '18. 12. : 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 채영석(831-3350) 담 당 : 시설6급 김진윤(831-2294) 담당자 : 시설7급 하진건(831-2290)
③정책사업명	자혜교차로 연결도로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2009. 01. ~ 2017. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대 2. 추진기간 : 2009. 01. ~ 2017. 12. 3. 총사업비 : 2,000백만원(시비 2,000) 4. 주요내용 - 위 치 : 서포면 자혜리 지내(농어촌도로 서포104, 205호선) - 사업개요 : 도로 확․포장 L=0.875km, B=7.0~10.0m - 수 급 자 : 성산종합건설(주) 대표이사 성재현 - 현 공 정 : 60% 5. 추진경과 - '08. 10월 : 중기재정계획 반영 - '08. 10. 10. : 투․융자심사 적정 - '09. 1월~'12. 12월 : 토지보상 - '13. 5월 : 장기계속공사 착공 - '13. 5월~'14. 5월 : 2013년분 공사 - '14. 3월~'15. 3월 : 2014년분 공사 - '15. 3월~'15. 11월 : 2015년분 공사 - '16. 1월~'16. 5월 : 2016년분 공사 추진 - '17. 12월 : 장기계속공사 준공 예정

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)	부서장 : 시설5급 채영석 (831-3350) 담 당 : 시설6급 김진윤 (831-2294) 담당자 : 시설7급 하진건 (831-2290)
③정책사업명	두량5리~두량3리간 도로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간	2010. 01. ~ 2016. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대 2. 추진기간 : 2010. 01. ~ 2016. 12. 3. 총사업비 : 1,600백만원(시비 1,600) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천읍 두량리 지내(농어촌도로 사천읍201호선) - 사업개요 : 도로 확․포장 L=0.94km, B=8.0m - 수 급 자 : 태원종합건설(주) 대표이사 구종회 - 현 공 정 : 65% 5. 추진경과 - '09. 10월 : 중기재정계획 반영 - '10. 7월 : 설계완료 - '11. 1월~'14. 5월 : 토지보상 - '14. 6월 : 장기계속공사 착공 - '14. 7월~'15. 2월 : 2014년분 공사 - '15. 3월~'15. 12월 : 2015년분 공사 - '16. 1월~'16. 12월 : 2016년분 공사 추진 - '16. 12월 : 장기계속공사 준공 예정

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 채영석 (831-3350) 담 당 : 시설6급 김진윤 (831-2294) 담당자 : 시설7급 하진건 (831-2290)
③정책사업명	가화도로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2012. 01. ~ 2018. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 안전한 통행로 및 농수산물 유통로 확보로 교통편익 증대 2. 추진기간 : 2012. 01. ~ 2018. 12. 3. 총사업비 : 2,700백만원(시비 2,700) 4. 주요내용 - 위 치 : 곤양면 가화리 지내(농어촌도로 곤양209호선) - 사업개요 : 도로 확․포장 L=2.1km, B=8.0m - 수 급 자 : 메이드건설(주) 대표이사 박광신 - 현 공 정 : 55% 5. 추진경과 - '10. 10월 : 중기재정계획 반영 - '10. 10. 28. : 투․융자심사 적정 - '12. 1월~'12. 5월 : 실시설계(우선 L=1.0㎞추진) - '13. 1월~'14. 11월 : 토지보상 - '14. 12월 : 장기계속공사 착공 - '14. 12월~'15. 12월 : 2014년분 공사 - '15. 3월~'15. 12월 : 2015년분 공사 - '16. 1월~'17. 1월 : 2016년분 공사 추진 - '17. 12월 : 장기계속공사 준공 예정

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로과	②담당자 (연락처)		부서장 : 시설5급 채영석(831-3350) 담 당 : 시설6급 유재기(831-3379) 담당자 : 시설7급 신성현(831-3377)
③정책사업명	광역자전거도로 및 화암․배춘 진입로 확․포장
④선정기준	총사업비 10억이상의 건설 및 개발사업		⑤사업기간		2014. 01. ~2017. 12.
⑥주요내용	1. 사업목적 : 자전거도로 및 화암․배춘 진입로를 병행개설하여 교통편익 증대 및 국가자전거도로 연결망 구축 2. 추진기간 : 2014. 01. ~ 2017. 12. 3. 총사업비 : 5,030백만원(국비 1,406, 도비 422, 시비 3,202) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천읍 선인리~축동면 배춘리 일원 - 사업개요 ․ 기존도로정비 및 자전거도로개설 L=4.6km B=1.5~3.0m ․ 화암진입로 확․포장 L=0.815km B=10.5m ․ 배춘진입로 확․포장 L=0.44km B=10.0m - 수 급 자 : ㈜선진건설 대표이사 최동환 - 현 공 정 : 15% 5. 추진경과 - '13. 12월 : 실시설계 완료 - '14. 1월 : 토지보상 - '14. 12월 : 장기계속공사 착공 - '14. 12월~'16. 12월 : 2014년분 공사 추진 - '17. 12월 : 장기계속공사 준공 예정

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	산업단지과	②담당자 (전화번호)	부서장 : 행정5급 강효정(831-3450) 담 당 : 시설6급 허원권(831-3469) 담당자 : 시설7급 이정훈(831-3466)
③정책사업명	향촌2지구 일반산업단지 조성사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업			⑤사업기간	2015 ~ 2018
⑥주요내용	1. 추진배경 □ 필 요 성 - 사천시 관내 해안주변에 산재되어 있는 소형조선소로 인하여 도시 주거환경 저해 및 기름유출로 인하여 해양환경이 파괴되고 있는 실정으로, 이들 소규모 영세조선소를 한 장소로 집단화하여 경쟁력 제고, 지역경제 활성화, 해양환경 보존 그리고 쾌적한 도시환경을 구축하고자 산업단지를 조성함 □ 사업개요 - 위 치 : 사천시 사등동 산34지선 - 면 적 : 77,441㎡(23,466평, 공유수면) - 사업기간 : 2015년 ~ 2018년 - 개발방법 : 공영개발(사천시) - 유치업종 : 조선시설용지(소형수리조선) 2. 추진사항 - '09. 07. 09 : 소형조선소 이전에 따른 대체부지 조성건의 - '11. 07. 29 : 제3차 공유수면매립 기본계획 반영 확정(산업단지 A=70,933㎡, 국토해양부) - '15. 01. : 2015년 예산 편성(시비 : 15억원) - '15. 02. 27 : 입주확약서 접수(제일조선소, 삼선조선소, 해원조선소) - '15. 04. : 향촌2지구 산업단지 전략환경영향평가 용역 외 3건 착수 - '15. 05. 11 : 제3차 공유수면매립 기본계획 반영요청(진입도로 A=6,508㎡) - '16. 01. : 2016년 예산 편성(30억원 : 시비 10억원, 지방채 20억원) - '16. 01. 21 : 2016년 산업단지 지정계획 반영(국토교통부)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	산업단지과	②담당자 (전화번호)	부서장 : 행정5급 강효정(831-3450) 담 당 : 시설6급 허원권(831-3469) 담당자 : 시설7급 윤현찬(831-3465)
③정책사업명	용당(MRO)산업단지 조성사업
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업			⑤사업기간	2015 ~ 2020
⑥주요내용	1. 추진배경 □ 필 요 성 - 항공선도기업인 KAI 1·2공장이 인접한 지역에 항공 MRO 및 생산단지조성으로 연구개발·생산·MRO가 일괄된 복합항공산업 클러스터로 발전 □ 사업개요 - 위 치 : 사천시 사천읍 용당리 일원 - 면 적 : 311,880㎡ - 사업기간 : 2015년 ~ 2020년 - 사 업 비 : 900억원(용지비 556, 조성비 344) - 사업내용 : KAI중심 MRO 합작법인 설립, MRO단지 조성 등 - 유치업종 : 항공업체(생산, 정비, 연구개발)관련 2. 추진사항 -‘14.12.23 : 항공MRO사업 지원 MOU체결(경남도/사천시/KAI) -‘15.01.28 : 항공MRO사업 지원 운영위원회 구성(10차 실시) -‘15.05.06 : 항공우주 및 항공MRO 육성전략세미나 개최(국회) -‘15.06.08 : 기본계획 및 타당성조사 용역 완료(MRO산업단지) -‘16.01.02 : 1-1단계 사업비 86억원 확보(경남도 26억, 사천시 60억) -‘16.01.14 : MRO사업 사천유치 도의회 대정부 건의안 채택 -‘16.01.21 : 2016년 산업단지 지정 계획 승인(국토부) -‘16.03.11 : 경남도 MRO 관련 긴급대책회의 개최(경남도, 사천시, KAI)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	산업단지과	②담당자 (전화번호)	부서장 : 행정5급 강효정(831-3450) 담 당 : 시설6급 허원권(831-3469) 담당자 : 시설7급 윤현찬(831-3465)
③정책사업명	송포 도시첨단산업단지 조성
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업			⑤사업기간	2015 ~ 2020
⑥주요내용	1. 추진배경 □ 필 요 성 - 마리나 입지환경을 활용하여 해양,항공산업에 특화된 산업단지 및 체험형레저단지 조성으로 명품 관광레저도시 건설 □ 사업개요 - 위 치 : 사천시 송포동․노룡동 앞 공유수면 - 면 적 : 756,252㎡ - 사업기간 : 2015년 ~ 2020년 - 사 업 비 : 1,600억원 - 사업내용 : 해양․항공 복합 산단 조성(756,252㎡) - 유치업종 : 해양 ․ 항공관련 업체 등 2. 추진사항 -‘15.01.09 : 송포 미래창조 첨단산업단지 개발계획 보고회 개최 -‘15.04.28 : 송포 미래창조 첨단산업단지 조성 양해각서 체결 -‘15.05.11 : 제3차 공유수면매립 기본계획 변경 반영수요조사서 제출 -‘15.06. : 공유수면매립 기본계획 반영을 위한 전략환경영향평가 착수 -‘15.06.25 : 전략환경영향평가협의회 개최(마산지방해양수산청) -‘15.06.29 : 전략환경영향평가 결정내용 공개 공고 및 의견수렴 -‘15.07.20 : 전략환경영향평가 초안 및 사전재해영향성 검토서 제출(마산지방해양수산청) -‘15.07.27 : 전략환경영향평가서(초안) 공람 및 설명회 개최 공고문 게재 -‘15.08.12 : 전략환경영향평가 초안 주민설명회 개최 -‘15.11.12 : 제3차 공유수면매립 기본계획 보완자료 제출

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	산업단지과	②담당자 (전화번호)	부서장 : 행정5급 강효정(831-3450) 담 당 : 시설6급 하대철(831-3464) 담당자 : 시설7급 정오식(831-3462)
③정책사업명	축동 구호농공단지 조성사업
④선정기준	10억원 이상 사업비가 소요되는 건설 및 개발사업			⑤사업기간	2008~2016. 6.
⑥주요내용	1. 사업개요 - 위 치 : 사천시 축동면 구호리 933번지 일원 - 면 적 : 106,425㎡ - 사업기간 : 2008~2015.6 - 개발방법 : 민간개발(실수요자개발) - 유치업종 : 금속가공제품제조업, 기타기계 및 장비제조업 등 2. 추진사항 - 2007. 6. 22. : 주민설명회 개최 - 2007. 12. 18. : 농공단지 지정승인 - 2008. 4. 11. : 사업시행자 지정 - 2008. 9. 9. : 농공단지 지정변경 및 실시계획승인 - 2008. 10. 1. : 공사착공 - 2008. 12. 26. : 관리기본계획승인 - 2009. 12. 2. : 농공단지 지정변경 및 실시계획변경 승인 및 지형도면 고시 - 2009. 12. 10. : 관리기본계획 변경승인 - 2009. 12. 24. : 분양계획 승인 - 2010. 4. 28. : 농공단지지정변경 및 실시계획변경승인 - 2010. 8. 6. : 분양공고 - 2011. 10. 26. : 농공단지계획 변경승인고시 - 2011. 11. 29. : 시공사 변경 (나라종합건설 → 상일토건) 분양계약체결 (케이유터(주)) - 2012. 5. 25. : 농공단지계획 변경승인고시(사업기간연장) - 2012. 7. 11. : 확정측량에 따른 농공단지계획 변경승인고시 - 2012. 8. 20. : 부분준공(1공구)인가 공고 - 2013. 1. 10. : 농공단지계획 변경승인고시(사업기간연장) - 2014. 1. 9. : 농공단지계획 변경승인고시 - 2015. 2. 26. : 농공단지계획 변경승인고시(사업기간연장) - 2015. 6. 18. : 농공단지계획 변경승인고시(사업기간연장) - 2016. 1. 21. : 농공단지계획 변경승인고시 (토지이용계획, 기간연장)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	산업단지과	②담당자 (전화번호)	부서장 : 행정5급 강효정(831-3450) 담 당 : 시설6급 하대철(831-3464) 담당자 : 행정7급 조현구(831-3461)
③정책사업명	축동 일반산업단지 조성사업
④선정기준	10억원 이상 사업비가 소요되는 건설 및 개발사업			⑤사업기간	2012~2016.12
⑥주요내용	1. 사업개요 - 위 치 : 사천시 축동면 사다리 산26-1번지 일원 - 면 적 : 271,060㎡(산업시설면적 168,450㎡) - 사업기간 : 2012년 ~ 2016.12.31. - 개발방법 : 민간개발(실수요자개발) - 유치업종 : 기타기계 및 장비제조업, 자동차 및 트레일러제조업, 기타운송장비제조업 2. 추진사항 - 2010. 5. 4. : 투자의향서 접수 - 2010. 5. 10. : 관련 부서 및 유관기관 검토 요청 - 2010. 6. 30. : 투자의향서 검토 결과 통보 - 2011. 4. 6. : 산업단지계획 승인 신청서 접수 - 2011. 8. 17. : 합동설명회 개최(3차) - 2011. 12. 20. : 산업단지계획 보완 1차 승인신청서류 접수 - 2012. 7. 5. : 지방산업단지계획심의위원회 조건부 심의의결 - 2012. 9. 13. : 산업단지계획 승인(사천시고시제2012-152호) - 2015. 1. 14. : 산업단지계획(변경) 사업기간연장승인신청 제출 - 2015. 3. 5. : 조건부 산업단지계획(변경) 승인․고시 - 2015. 7. 13. : 산업단지계획(변경) 승인․고시 - 2015. 11. 26. : 관리기본계획승인고시(사천시고시제2015-170호) - 2016. 12. 31. : 준공예정

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	우주항공과	②담당자 (전화번호)	부서장 : 시설5급 최 일 (831-3490) 담 당 : 시설6급 이주은 (831-3479) 담당자 : 시설7급 이상선 (831-3475)
③정책사업명	종포일반산업단지 조성
④선정기준	총사업비 10억원 이상의 건설 및 개발사업			⑤사업기간	2013 ~ 2016
⑥주요내용	1. 추진배경 - 적기에 산업용지 공급 및 미래성장동력 산업 육성 2. 위 치 : 사천시 용현면 신촌리 432-24번지 일원 3. 추진기간 : 2013 ~ 2016 4. 사 업 량 : 산업단지조성 1식 A=376,125㎡ 5. 총사업비 : 63,000백만원 6. 주요내용 - 산업단지계획수립용역, 토지 및 지장물 보상, 산업단지 조성 공사 7. 추진경과 - 2013. 08. 22 : 투자의향서 타당성검토 결과통보(경남도→사천시) - 2013. 11. 04 : 산업단지지정 승인 신청(종포산단→경상남도) - 2013. 12. : 중기지방재정계획 - 2014. 01. 08 : 지방재정 투․융자 심사(안전행정부) - 2014. 04. 24 : 산업단지 승인 고시(경상남도) - 2014. 05. 29 : 사업시행자 변경 고시 : 종포산단개발(주)→사천시 - 2014. 10. 02 : 폐수처리관리기본계획 변경 승인(낙동강유역환경청) - 2014. 11. 24 : 착공(디에치건설, 동원건설산업, 서우건영) - 2014. 12. 23 : 기공식 - 2015. 01. 27 : 경상남도지방토지수용위원회 개최 - 2015. 06. 18 : 종포일반산업단지 계획(변경) 심의위원회 개최 - 2015. 07. 30 : 종포일반산업단지 계획(변경) 승인·고시 - 2016. 03. 04 : 산업시설용지 분양(3개업체) 계약 체결 (씨엔리(주), ㈜카프마이크로, ㈜에이에스티지)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	미래농업과	②담당자 (전화번호)		과장 : 농업사무관 강성순 (831-3800) 담당 : 농촌지도사 임경주 (831-3824) 담당자 : 농촌지도사 송혜경 (831-3820)
③정책사업명	농산물종합가공센터 설치
④선정기준	10억이상 사업비가 소요되는 사업		⑤사업기간		2015~2016년(2년간)
⑥주요내용	1. 목 적 - 농업기술센터를 지역농산물 가공기술의 전진기지로 육성하여 농업인의 농산물가공 활동 활성화 도모 및 농외소득 활동지원 2. 사업개요 - 위 치 : 농업기술센터 내(용현면 신복리 산75-2) - 규 모 : 1동 330㎡ - 주요기능 : 농산물 가공 공동시설 및 창업보육 - 가공유형 : 다품목 소량생산 시스템 - 사 업 비 : 1,300백만원(국비 100, 도비 450, 시비 750) ·건축 700, 가공장비 250, 용역비 등 150 - 사업내용 : 농산물종합가공센터 건축 및 가공기계 구축 3. 주요추진상황 - 농산물가공센터 구축 기본조사 용역 : ‘15. 7월 - 도시관리계획(변경)결정 : ‘15. 12월 4. 추진계획 - 토목·건축 및 공정설계용역 완료 : ‘16. 6월 - 착공 및 설비 구축 : ‘16. 7월 - 준공계획 : ‘16. 11월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	평생학습센터	②담당자 (전화번호)		소 장 : 행정5급 황현숙 (831-2590) 담 당 : 행정6급 곽정란 (831-2599) 담당자 : 행정8급 이성은 (831-2596)
③정책사업명	학점은행제 평생학습대학 설치 운영
④선정기준	시민의 권익 및 복지증진관련		⑤사업기간		2015년 ~ 2018년
⑥주요내용	1. 사업 목적 ○ 평생학습을 통한 학위취득 기회제공으로 시민들의 삶의 질 향상 ○ 맞춤식 고급인력 양성으로 지역경쟁력 제고 2. 사업 개요 ○ 위 치 : 사천시 평생학습센터 ○ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년) ○ 사업량 : 학점은행제 평생학습대학 설치 및 운영 ○ 사업비 : 2,850백만원 3. 추진 사항 ○ 2010년~2015년 : 교육기관 운영실적 충족 - 사천시 평생학습센터 프로그램 운영실적 마련 (75개 과정/1,700명) ○ 2015. 3월 : 타군 학점은행제 평생학습대학 운영 벤치 마킹 (칠곡군) ○ 2015. 7월~11월 : 교육과정 운영실적 충족 - 학점은행제(평생학습대학) 신청대비 전공과정 운영 - 3과목, 153시간, 54명 수료 (노인복지론, 영유아보육론, 정신건강론) ○ 2015. 8월~11월 : 평생학습대학 내 강의실 리모델링(1층~2층), 50,000원 ○ 2015. 6월 : 전공서적 구입(225권, 4,267천원) ○ 2016. 1월 : 평생교육사 일반임기제공무원 1명 채용 ○ 2016. 3월 : 사회복지학 전공강사 선정 5명 4. 추진 계획 ○ 2016. 4월~5월 : 시설 정비 및 도서·장비 구입(3,000천원) ○ 2016. 5월~12월 : 국가평생교육진흥원 학점은행제 평가인정기관 신청 및 선정발표 ○ 2016. 7월 11월 : 2017년도 학점은행제 교육훈련기관 평가인정 신청대비 전공과정 운영 - 심리학 전공 3과목, 153시간 운영 ○ 2016. 9월 : 시홈페이지 학사관리시스템 구축 ○ 2016. 10월~12월 : 학점은행제 평생학습대학 운영규정 제정 ○ 2017. 1월 : 사회복지학 전공강사 위촉 및 계약 ○ 2017. 3월 : 학점은행제 평생학습대학 개강(사회복지학 전공) 5. 문제점 및 대책 ○ 2017년 학점은행제 평생학습대학 운영에 따른 수강생 확보 어려움 예상됨 - 관내 고등학교와 연계하여 졸업예정자를 선발하여 학점은행제를 통한 학위취득 기회제공 ○ 학점은행제 학사관리 행정업무 증가로 인력 충원

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	상하수도사업소	②담당자 (전화번호)		부서장 : 시설5급 이동승 (831-5500) 담 당 : 시설6급 강장영 (831-5545) 담당자 : 시설7급 황용찬 (831-5546)
③정책사업명	삼천포 하수관거 개보수(갱생)
④선정기준	10억원 이상 사업비가 소요되는 건설 및 개발 사업		⑤사업기간		2012~2017
⑥주요내용	1. 추진배경 - 공공수역의 수질보전과 소규모 공공하수처리시설의 경제적 운영 2. 추진기간 : 2012 ∼ 2017 3. 총사업비 : 12,569백만원(국비 7,442, 지방비 5,127) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 동지역, 사천읍 일원 - 사업개요 : 하수관로 개보수 L=10.509㎞ 5. 추진경과 - 2012. 04. : 지방재정 투․융자심사 - 2012. 06. : 타당성 조사용역 완료 - 2013. 11. : 기본 및 실시설계 완료 - 2014. 08. : 낙동강유역환경청 재원협의 완료 - 2014. 12. : 총사업비 변경 승인 - 2015. 04. : 공법 선정 위원회 - 2015. 11. : 사업 계약 - 2015. 12. : 착공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	상하수도사업소	②담당자 (전화번호)		부서장 : 시설5급 이동승 (831-5500) 담 당 : 시설6급 강장영 (831-5545) 담당자 : 시설7급 임지은 (831-5547)
③정책사업명	사천지구(2단계) 하수관거 정비사업
④선정기준	10억원 이상 사업비가 소요되는 건설 및 개발 사업		⑤사업기간		2012~2017
⑥주요내용	1. 추진배경 - 공공수역의 수질보전과 소규모 공공하수처리시설의 경제적 운영 2. 추진기간 : 2012~2017 3. 총사업비 : 17,393백만원(국비 12,175, 지방비 5,218) 4. 주요내용 - 위 치 : 사천시 사천읍, 사남면, 축동면 일원 - 사업개요 : 하수관로 정비 L=11.947㎞, 배수설비 781개소 - 수 급 자 : (유)일봉도시개발 - 공사기간 : 2014. 11. 24. ~ 2017. 11. 22. 5. 추진경과 - 2011. 03. : 지방재정 투․융자심사 - 2012. 01. : 실시설계 완료 - 2013. 08. : 낙동강유역환경청 재원협의 완료 - 2014. 11. : 2014년분 착공 - 2015. 03. : 2015년분 착공