3-10	어르신 당구장 설치

			관리번호		3-10
추진부서	문화체육과	협조부서	노인장애인과
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	배수덕 (2419)	담당자		이서준 (2421)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		5%

목    적

❍ 어르신들이 사계절 부담없이 이용할 수 있는 당구장을 설치해 일상생활 활력 및 건강 증진

❍ 실버스포츠로 각광받고 있는 당구 저변 확대

사업개요

❍ 위    치: 사천시 사천읍 수석리 152번지 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2025년

❍ 사 업 량: 국민체육센터 건립 1식

❍ 사업내용: 국민체육센터(당구장, 헬스장 등)

❍ 사 업 비: 9,800백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	9,800	-	9,800	-	200	2,100	7,500	-	-
국비	3,000	-	3,000	-	200	1,400	1,400	-	-
도비	750	-	750	-	-	350	400	-	-
시비	6,050	-	6,050	-	-	350	5,700	-	-
기금	-	-		-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2022.  9.: 시니어 국민체육센터 건립지원 공모 선정

❍ 2023.  4.: 지방재정 투자심사 결과 재검토

❍ 2023.  9.: 지방재정 투자심사 신청

❍ 2023.  9.: 도시계획시설결정 용역 실시

❍ 2023. 10.: 공유재산 심의

❍ 2023. 10.: 도시계획시설결정 의뢰

추진상 애로사항 및 대책

❍ 조속한 추진을 위해 도시계획시설결정과 설계공모 절차 동시 진행

향후 추진계획

❍ 2024.  1.: 설계공모 방침결정

❍ 2024.  3.: 설계공모 사전검토

❍ 2024.  4.: 설계공모

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		5%	20%	50%	100%
어르신 당구장 설치		도시계획시설 결정	설계공모 및 실시설계	착공	준공