3-19	광포만 갯벌 해양생태관광 자원화

			관리번호		3-19
추진부서	해양수산과	협조부서	관광진흥과
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	손지숙 (3130)	담당자		손지숙 (3130)
임기 중 목표	50%	추진상황	정상추진	추진율		10%

목    적

❍ 광포만 갯벌 해양생태관광 조성으로 관광자원화 및 관광 인프라 확충

사업개요

❍ 위    치: 서포면 조도리, 곤양면 대진리 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2027년

❍ 사 업 량: 탐방로 설치, 방문객센터 건립 등

❍ 사 업 비: 10,000백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	10,000	-	2,500	-	-	500	2,000	7,500
국비	7,000	-	1,750	-	-	350	1,400	5,250
도비	900	-	225	-	-	45	180	675
시비	2,100	-	525	-	-	105	420	1,575
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2020.  4.: 한려해상국립공원 구역 조정 타당성 조사 용역 착수

❍ 2020.  6.: 주민설명회 개최(곤양면, 서포면)

❍ 2020.  9.: 국립공원 타당성조사 관련 총괄협의회 안건 제출

❍ 2021.  7.: 주민설명회 및 공청회 개최

❍ 2022.  3.: 국립공원 구역조정을 위한 관계부처 협의(환경부)

❍ 2023.  5.: 광포만 국립공원 구역 미반영

❍ 2023.  5.: 해양보호구역 신규지정 의견수렴 및 우리 시 의견 제출

❍ 2023. 10. 23.: 사천 광포만 습지보호지역 지정

❍ 2023. 12.  8.: 사천 광포만 습지보호지역 관리자 워크숍 개최

추진상 애로사항 및 대책

❍ 2024년도 관리기본계획 수립(마산지방해양수산청) 및 세부 시행계획 수립(사천시) 등 관련 절차 이행이 필요함에 따라 2025년 이후 예산 확보하여 사업추진 불가피

향후 추진계획

❍ 2024.  1.: 지역 관리위원회 구성(사천시)

❍ 2024. 10.: 습지보호지역 관리 기본계획 수립(해양수산청)

❍ 2024. 12.: 습지보호지역 관리 세부시행계획 수립(사천시)

❍ 2025.  1.: 국·도비 예산 확보

❍ 2025.  3.: 기본 및 실시설계용역

❍ 2026.  1.: 공사 착공

❍ 2027. 12.: 공사 준공

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		10%	20%	40%	50%	100%
광포만 해양생태관광자원화		습지보호지역 지정	관리 기본계획 및 세부시행 계획 수립	기본 및 실시설계 용역	공사 착공	공사 완료