3-20	용현~대포 해안도로 관광자원화 기반 마련

			관리번호		3-20
추진부서	관광진흥과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기후	팀 장	신성현 (2734)	담당자		차재희 (2731)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		5%

목    적

❍ 선상지의 경관가치를 활용하여 차별화된 지역특화 관광콘텐츠 발굴과 관광브랜드로 자원화하여 지역경제 성장동력 확보

사업개요

❍ 위    치: 용현면 주문리 일원

❍ 사업기간: 2024년 ~ 2028년

❍ 사업내용

- 선상지 경관전망대 1식(높이 30m, 건축면적 A=800㎡)

- 경관개선 쉼터조성, 야관경관 등 부대시설 조성

❍ 사 업 비: 18,800백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	18,800	-	6,846	-	-	846	4,000	2,000	11,954
국비	9,400	-	3,423	-	-	423	2,000	1,000	5,977
도비	2,820	-	1,027	-	-	127	600	300	1,793
시비	6,580	-	2,396	-	-	296	1,400	700	4,184
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2022.  6.: 남부권 광역관광개발계획 신규사업 신청

❍ 2023.  7.: 제2회 지방재정계획 심의 반영

❍ 2023.  9.: 남부권 광역관광개발계획 신규사업 확정

❍ 2023. 10.: 4차 경상남도 지방재정 투자심사 심의 반영(조건부 2단계)

❍ 2024.  3.: 건축기획 용역 착수

추진상 애로사항 및 대책

❍ 해당사항 없음

향후 추진계획

❍ 2024.  6.: 공공건축심의위원회 심의

❍ 2024.  6 ~ 2025.  6.: 건축설계공모 및 실시설계

❍ 2025.  7.: 공사 착공

❍ 2028. 12.: 사업 완료

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	-	-	10%	30%	50%	100%
선상지 테마 관광명소 조성사업	-	-	기본 및 실시설계	공사추진	공사 추진	사업 완료

3-21	다솔사 주변(다솔 문화밸리) 조성

			관리번호		3-21
추진부서	관광진흥과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	신성현 (2734)	담당자		김진우 (2730)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		35%

목    적

❍ 다솔사 주변 문화밸리 조성으로 관광인프라 확충 및 관광활성화

사업개요

❍ 위    치: 곤명면 용산리 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2025년

❍ 사업내용: 경관조명 설치, 진입로 정비, 휴양길 조성, 사찰음식 체험관 조성 등

❍ 사 업 비: 1,900백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	1,900	-	1,900	-	200	800	900	-	-
국비	950	-	950	-	100	400	450	-	-
도비	665	-	665	-	30	120	135	-	-
시비	285	-	285	-	70	280	315	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2022. 10.: 관광자원개발사업 선정

❍ 2023.  5.: 2023년분 실시설계용역 완료

❍ 2023.  6.: 2023년분 공사 착공

❍ 2023. 11.: 2023년분 공사 준공

❍ 2024.  3.: 2024년분 실시설계용역 착수

향후 추진계획

❍ 2024.  5.: 2024년분 공사 착공

❍ 2024. 12.: 2025년분 공사 준공 및 사업완료

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		30%	70%	100%
다솔 문화밸리 조성		실시설계 및 공사추진	공사 추진	사업 완료