2024년 1/4분기 시장공약사항 관리카드

(농축산과)

□ 총    괄

총 건수	완료	완료 후 계속추진	추진 중			미착수	비고
			소계	정상	부진
2	-	-	2	2	-	-

□ 사업현황

(단위:백만 원)

관리번호	사업명	사업기간	총사업비	추진상황	비고
3-29	사천형 축산물 로컬푸드 복합센터 건립	2022.~2025.	9,902	정상
4-13	반려동물 가족을 위한 펫공원 조성	2022.~2026.	5,100	정상

3-29	사천형 축산물 로컬푸드 복합센터 건립

			관리번호		3-29
추진부서	농축산과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시/민간
완료시기	임기내	팀 장	김학성 (3780)	담당자		황현빈 (3784)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율		5%

목    적

❍ 축산물 생산에서 가공, 유통, 소비까지 ONE-STOP 시스템 구축

❍ 로컬푸드의 사회적가치 확산을 통한 도농상생 활성화 기반 조성

❍ 안정적 판로 개척 및 지역경제 활성화 기여

사업개요

❍ 위    치: 사천시 관내

❍ 기    간: 2022년 ~ 2025년

❍ 내    용: 축산물 로컬푸드 복합센터 건립(연면적 1,815㎡, 2동 2층)

- 육가공 166, 한우프라자 728, 회의실 100, 판매장 198, 사무실 66, 창고 198

❍ 사 업 비: 9,902백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	9,902	-	-	-	-	8,869	1,033	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,936	-	-	-	-	1,936	-	-	-
민자/기타	7,966	-	-	-	-	6,933	1,033	-	-

추진상황

❍ 2022.  6.: 추진내용 및 사업비 검토

❍ 2022. 11.~ :사업부지 선정 검토

- 사천IC 복합유통상업단지 또는 사천읍 앞뜰지구 검토중

❍ 2023.  8.: 민간 사업대상자 사업계획 검토 및 협의

❍ 2023. 12.: 사업부지 검토

추진상 애로사항 및 대책

❍ 국비 사업 부재로 시 자체 사업으로 추진 시 자체 예산확보 필요하고 민간투자가 80% 투입되는 사업으로 사업자의 신속한 추진 의지가 필요한 사항임

❍ 추진 의지가 있는 단체에서 사업부지 선정 검토 및 추진계획 수립 보류

향후 추진계획

❍ 2024.  6.: 추진계획 수립

❍ 2024.  7.: 사업대상자 선정

❍ 2025.  1.: 경상남도 지방재정투자심사 승인 요청

❍ 2025.  2.: 경상남도 지방재정투자심사 승인

❍ 2025.  4.: 보조금 교부결정 및 교부

❍ 2025.  6.: 실시설계용역(사업자)

❍ 2025. 12.~2026. 6.: 공사 시행 및 준공(사업자)

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	5%	-	25%	50%	100%	-
사천형 축산물 로컬푸드 복합센터 건립	사업부지 선정 검토	-	사업부지 및 대상자 선정	보조금 교부 및 실시설계용역	준공	-

4-13	반려동물 가족을 위한 펫공원 조성

			관리번호		4-13
추진부서	농축산과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	김여랑 (3788)	담당자		김여랑 (3788)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율		5%

목    적

❍ 사람과 반려동물이 공존하는 사회 분위기 조성

❍ 반려동물 관련 산업 기반 마련 및 신규 일자리 창출

❍ 반려동물로 인해 발생하는 사회적 갈등 완화를 위한 인프라 확충

사업개요

❍ 위    치: 사천시 관내

❍ 기    간: 2022년 ~ 2026년

❍ 내    용: 반려동물 펫공원 및 부대시설 건립

- 내외부 울타리, 격리장, 놀이시설, 음수대, 파라솔, 관리실, 주차장 등

❍ 사 업 비: 5,100백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	5,100		5,100	-	38	62	2,500	2,500	-
국비	-	-	-	-	-		-	-	-
도비	3,060	-	3,060				1,530	1,530
시비	2,040	-	2,040	-	38	62	970	970	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2023.  4.: 일상감사 및 입찰공고

❍ 2023.  4.: 제안서 접수 및 평가, 협상적격자 선정

❍ 2023.  4.: 계약체결 및 용역 착수

❍ 2023.  5.: 착수보고회 개최

❍ 2023.  8.: 시민 의견수렴 설문조사

❍ 2023.  9.: 펫공원 조성 성별영향평가

❍ 2023. 10.: 펫공원 조성 설문조사 결과보고

❍ 2023. 10.: 펫공원 조성 타당성 조사용역 기간연장

❍ 2024.  2.: 펫공원 조성 타당성 조사용역 일시중지

추진상 애로사항 및 대책

❍ 후보지 선정을 위한 기간 부족으로 타당성 조사 용역 기간 연장

- 추가 후보지 발굴 및 타부서 용역사업과 연계한 확대 조사 필요

- 펫친화도시 연계한 기존공원을 이용한 펫 이용시설 및 놀이터 설치 등

향후 추진계획

❍ 2024. 10.: 타당성 조사 용역 및 기본계획 수립 최종보고

❍ 2024. 12.: 타당성 조사 용역 및 기본계획 수립용역 완료

❍ 2025.  7.: 펫공원 조성관련 공모사업 신청

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	-	5%	10%	40%	100%	-
펫공원 조성	-	기본계획 수립용역	후보지선정 및 최종보고	펫공원 조성관련 공모신청	준공	-