3-5	파크골프장 조성

			관리번호		3-5
추진부서	문화체육과	협조부서	녹지공원과(공원팀)
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	배수덕 (2419)	담당자		노범석 (2415)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		60%

목    적

❍ 시민 누구나 즐길 수 있는 파크골프장 조성

사업개요

❍ 위    치: 정동면, 서포면, 송포동 일원

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2024년

❍ 사 업 량: 파크골프장 조성 3개소

❍ 사업내용: 파크골프장 조성 3개소(9홀 2, 27홀 1)

❍ 사 업 비: 9,450백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	9,450	-	9,450	1,050	400	8,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,400	-	2,400	-	-	2,400	-	-	-
시비	5,750	-	5,750	150	-	5,600	-	-	-
기금	1,300	-	1,300	900	400	-	-	-	-

추진상황

<항공우주테마공원 파크골프장>

❍ 2022.  7.: 실시설계용역 완료

❍ 2022.  9.: 도시계획시설 결정(변경) 용역 완료

❍ 2022. 12.: 우주항공 파크골프장 개장

<구우진항 임시 파크골프장>

❍ 2023.  9.: 구우진항 임시 파크골프장 개장

❍ 2023. 10.: 화장실 임차

<모충공원 파크골프장>

❍ 2023.  4.: 도시계획위원회 공원조성계획 변경 결정(조건부 승인)

❍ 2023.  5.: 제2차 경상남도 지방재정투자심사

❍ 2023.  8.: 실시계획 변경인가 고시

❍ 2023. 11.: 24년 전환사업 가내시

❍ 2023. 11.: 모충공원 공공파크골프장 조성공사 착공

추진상 애로사항 및 대책

❍ 파크골프장 조성에 대한 부지매입비(자체재원) 예산 과다 소요

❍ 파크골프장 조성 위치를 선정하여 부지매입 후 체육진흥지원사업(균특) 국고보조금 확보 필요

향후 추진계획

<모충공원 파크골프장>

❍ 2024. 11.: 공사 준공

<기타 추가설치>

❍ 곤명 구. 다솔사역 파크골프장 조성: 2023. 9. 철도공단 공모 선정

- 2024년도 철도공단 영남본부와 협의 후 용역 시행(설계,재난,환경)

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	3%	60%	100%
파크골프장 조성	설계용역 공사진행	설계용역 공사착공	준공