5-17	서포 구평리~자혜리(시도8호선) 도로 건설

			관리번호		5-17
추진부서	도로과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	박용국 (3379)	담당자		홍승후 (3377)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		45%

목    적

❍ 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도로의 건설 및 공공복리의 향상

❍ 낙후된 농촌지역의 사회기반시설 확충 및 주민숙원 해소로 인한 행정 신뢰성 향상

사업개요

❍ 위    치: 사천시 서포면, 다평리 일원

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2025년

❍ 사업내용: 도로 확포장 L=3,810m, B=8m

- 자혜구간 L=810m, B=8m, 다평구간 L=3,000m, B=8m

❍ 사 업 비: 4,800백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	4,800	-	4,800	20	500	-	4,280	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	4,800	-	4,800	20	500	-	4,280	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2022.  7.: 민선8기 공약사업 선정

❍ 2022. 12.: 실시설계용역(자혜구간) 착수

❍ 2023.  3.: 실시설계용역(자혜구간) 완료

❍ 2023.  3.: 보상계획열람 공고

❍ 2023.  4.: 분할측량

❍ 2023.  8.: 도로구역 결정 및 감정평가 의뢰(자혜구간)

❍ 2023. 12.: 보상협의 및 공사(자혜구간) 착공

❍ 2024.  1.: 실시설계 용역(다평구간) 착수

추진상 애로사항 및 대책

❍ 도로정비 및 확·포장으로 많은 사업비 소요

⇒ 구간별 우선순위에 따라 연차적 사업비 투입

향후 추진계획

❍ 2024.  6.: 실시설계 용역(다평구간) 완료

❍ 2024.  8.: 보상 협의 및 공사 착공(다평구간)

❍ 2024. 12.: 공사준공(자혜구간)

❍ 2025. 12.: 공사준공(다평구간)

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	30%	60%	100%
서포 구평리~자혜리(시도8호선) 도로건설	실시설계용역 (자혜구간)	자혜구간 도로확포장	실시설계용역 (다평구간)	다평구간 도로확포장