5-18	곤양 중항 와티마을~안도간 도로 확장

			관리번호		5-18
추진부서	도로과	협조부서
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	성재권 (2294)	담당자		장성재 (2291)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		35%

목    적

❍ 도로 폭이 협소하여 차량 및 주민 통행에 불편을 초래

❍ 농수산물 유통로 확보로 물류 수송을 원활히 하고 지역균형 발전에 기여

사업개요

❍ 위    치: 사천시 곤양면 중항리 일원

❍ 사업기간: 2018년 ~ 2025년

❍ 사업내용: 도로 확포장 L=1,800m, B=8m

❍ 사 업 비: 3,100백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	3,100	-	3,100	273	720	650	1,457	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	3,100	-	3,100	273	720	650	1,457	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2018.  3.: 노선지정 및 보상계획 공고

❍ 2019.  4.: 우선시행 구간(1구간) 손실보상 협의

❍ 2022. 12.: 1구간 총괄분 및 2022년분 공사 착공

❍ 2023.  1.: 2023년분 공사 착공

❍ 2023. 10.: 2023년분 공사 중지

❍ 2024.  3.: 우선시행 구간(1구간)(2023년분) 공사재개

추진상 애로사항 및 대책

❍ 해당사항 없음

향후 추진계획

❍ 2024.  5.: 우선시행 구간(1구간)(2023년분) 공사 공사준공

❍ 2024. 12.: 우선시행 구간(1구간) 공사 준공

❍ 2025.  1.: 잔여구간 보상 협의

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	30%	70%	100%
와티~안도 간 도로 확포장공사	1구간 보상 및 착공	1구간(2023년분) 준공	1구간 준공, 2구간 보상	2구간 공사준공