5-20	신복택지~동강아뜨리에 간 도로 확·포장

			관리번호		5-20
추진부서	도로과	협조부서
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	성재권 (2294)	담당자		장성재 (2291)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		25%

목    적

❍ 효율적인 도로 교통망을 구축하고 지역 주민의 차량 통행 등 불편함을 해소

사업개요

❍ 위    치: 사천시 용현면 신복리 일원

❍ 사업기간: 2018년 ~ 2025년

❍ 사업내용: 도로 확포장 L=1,074m, B=8m

❍ 총사업비: 3,870백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	3,870	320	3,550	-	800	2,750	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	3,870	320	3,550	-	800	2,750	-	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2019.  3.: 노선지정 및 보상계획 공고

❍ 2019.  4.: 손실보상 협의

❍ 2023.  6.: 우선 시행구간 손실보상 협의

❍ 2023.  9.: 2024년 당초예산 건의

추진상 애로사항 및 대책

❍ 손실보상 예산 부족

향후 추진계획

❍ 2024.  5.: 우선시행구간 공사착공 및 잔여구간 보상 협의

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	25%	50%	100%
신복택지~동강아뜨리에 도로 확포장공사	보상협의	보상협의	보상협의 및 공사 착공	공사 준공