5-28	도시가스 공급사업 지원금 확대

			관리번호		5-28
추진부서	지역경제과	협조부서	-
사업성격	계속	사업주체	민간((주)지에스이)
완료시기	임기내	팀 장	정형선 (3069)	담당자		김효정 (3065)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		47%

목    적

❍ 도시가스 공급 취약지역 도시가스 보급 확대

❍ 주민들의 주거환경 개선 및 연료비 부담 경감

사업개요

❍ 위    치: 사천시 일원

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2026년

❍ 사업내용

- 공급세대수: 1,000세대(도시가스 보급률 69% ⇒ 75% 목표)

- 도시가스 공급 배관 매설 연장: 12km

❍ 사 업 비: 25,063백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	25,063	17,780	7,283	24	2,159	1,700	1,700	1,700	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,574	1,939	635	12	223	200	100	100	-
시비	11,689	5,041	6,648	12	1,936	1,500	1,600	1,600	-
민자/기타	10,800	10,800	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2022. 07.: 도시가스 공급사업 지원금 확대 추진계획 수립

❍ 2022. 12.: 도시가스 행정절차 신속성을 위한 조례 개정

- 당초: 매년 초 지원계획 수립(수요조사, 타당성 검토 등 기간 소요) → 하반기 착공

- 개정: 익년도 사업을 전년도에 계획수립(당해년도 1월부터 착공)

❍ 2022. 12.: 2023년도 도시가스 공급구역 보조금 지원 대상지 확정

- 5개 지역(12억원, 212세대)  ※22.8~11월(수요조사 및 타당성검토: 9개소)

❍ 2023. 09.: 2024년도 도시가스 공급구역 보조금 지원 대상지 확정

- 7개 지역(17억원, 260세대) ※23.5~9월(수요조사 및 타당성검토: 11개소)

❍ 2023. 10.: ｢사천시 단독주택 등 도시가스 공급사업 지원 조례｣ 개정

- 단독주택 → 상업시설 확대(소상공인 해당)

❍ 2024. 01.: 2024년도 도시가스 공급구역 공사 착공

- 사업비 17억원(7개지역, 사업량: 260세대, L=4.5km)

- 사업비 신속 집행(’23.3월 사업비의 70% 선금 지급)

❍ 연도별 추진결과(공급세대)

구 분	2022년	2023년	2024년
추진결과 (추진율)	9 (0.9%)	458 (46.7%)	260(예정) (72.7%)

※도시가스 보급률: 71.6%(총 55,031세대 중 39,411세대, ‘24.3월기준)

추진상 애로사항 및 대책

❍ 인구 밀집도가 낮은 지역일수록 시설분담금이 높아 재정(사업비) 부담 지속 증가

→ 보조금(도비, 시비) 및 ㈜GSE 부담분 증가(사업비의 약 16%)

❍ 타 부서(도로포장, 상하수도 등) 공사로 도시가스 배관공사 지연

→ 부서 간 사전 협의로 지연 최소화

향후 추진계획

❍ 2024. 4. ~ 12.: 도시가스 공급구역 사업추진(착공 및 준공)

→ 구역별 완료 사업장 보조금 신속 집행

❍ 2024. 5월 : 2025년도 도시가스 공급구역 지원계획 수립

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	5%	25%	50%	75%	100%
도시가스확대	50세대	200세대	500세대	750세대	1000세대