6-2	사천시립도서관 완공

			관리번호		6-2
추진부서	평생학습센터	협조부서	도시재생과 공공시설팀
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	강윤남 (2594)	담당자		이정갑 (2591)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		90%

목    적

❍ 항공산업 인구증가와 대규모 택지개발에 따른 공공도서관 수요 대비

❍ 최척의 독서문화서비스 제공을 위한 시(市) 직영 공공도서관 완공

사업개요

❍ 위    치: 사천시 정동면 반룡로 27(반룡공원 내)

❍ 사업기간: 2019. 1. ~ 2024. 5.

❍ 사업내용: 공공도서관 1동

- 대지면적 7,654㎡, 연면적 5,270㎡, 지상 1~4층

❍ 사 업 비: 25,832백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	25,832	7,423	18,409	12,829	5,580	-	-	-	-
국비	4,722	2,764	1,958	1,958	-	-	-	-	-
도비	2,440	-	2,440	-	2,440	-	-	-	-
시비	18,670	4,659	14,011	10,871	3,140	-	-	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2019.  3.: 문체부 타당성 검토결과 통보(적정)

❍ 2019.  6.: 경남도 지방재정투자 심사 승인(조건부)

❍ 2019. 10.: 사천시립도서관 운영 기본계획 수립

❍ 2020.  9.: 설계 공모 당선작 선정

❍ 2021. 12.: 기본 및 실시설계 및 문화재 시□발굴조사 용역 준공

❍ 2022.  2.: 공사 착수

❍ 2022. 12.: 진입로 확장공사 손실보상 협의 추진

❍ 2023. 12.: 공사 준공

❍ 2024.  1. ~ 4.: 운영준비 및 시범운영

추진상 애로사항 및 대책

❍ 「도서관법」개정에 따라 공공도서관 등록제 이행을 위한 사서 인력 충원

향후 추진계획

❍ 2024.  5.: 개관 및 정상운영

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	50%	90%	100%
주민참여예산 제도 확대 추진	공사추진	시립도서관 완공	시립도서관 개관